둔덕동 주민(자치)센터 신축공사

여수시청 회계과 지상훈 061-659-3223

□ 준공전 단계

<일반현황>

구   분

내  용

비  고

일반

현황

○ 소 재 지

여수시 좌수영로 509(둔덕동 436-3)

○ 인구 수

11,088 명(2017. 7월 기준)

○ 공무원 수

10 명/ 10 명

정원/현원

○ 재정자립도

30.1%

사업

개요

○ 기존청사

용도

준공연도

부지면적

기준면적

건물연면적

층수

(지하/지상)

비고

합계

1987.2

1,019.1㎡

-

681.96㎡

지상3층

본청

의회

기타

1987.2

1,019.1㎡

-

681.96㎡

지상3층

철거예정

○ 청사신축 필요성

노후 주민센터 신축을 통한 주민불편 해소, 업무 효율성 증대 및 안전사고 예방

○ 사업기간

2017. 8.  ~ 2018. 3.

○ 사업수행방식

입찰(적격심사 낙찰제)

○ 추정(예정)가격

2,704,141,000원

계약금액

2,437,022,060원

낙찰율

90.12%

○ 청사신축 계획(안)

용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
합계
본청
의회
기타	2018. 3.	1,596.6㎡	-	1,276.97㎡	지상3

소요

예산액

○ 사업비 조달 현황

구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
합계	2,900,000,000원			2,900,000,000원
2017년	2,900,000,000원			2,900,000,000원
2018년
2019년
2020년

○ 총사업비                            2,900,000,000원

1) 토지매입비

-

비고

2) 설계비

94,760,200원

3) 감리비

42,920,000원

4) 공사비

2,751,879,800원

5) 기타부대비

10,440,000원

향후

계획

및

일정

구   분

년월

결과

관련기관

비고

중기재정계획

2016.

완료

자체

타당성 조사

해당없음

투융자심사

2016. 10.

승인

도

공유재산관리계획

2016. 12.

의결

여수시의회

설계

2017.  7.

완료

자체

착공

2017.  8.

미착수

자체

준공

2018.  3.

미도래

자체

<추가 자료>

1. 계약수행 전 단계

① 공종별 공사비

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		2,437,022,060원
	원/㎡		1,908,441원/㎡
	비율		100%
건 축/ 기계설비	금액		2,162,255,000원
	원/㎡		1,693,270원/㎡
	비율		88.73%
전 기	금액		119,322,200원
	원/㎡		93,442원/㎡
	비율		4.90%
통 신	금액		84,403,770원
	원/㎡		66,097원/㎡
	비율		3.46%
소 방	금액		22,880,090원
	원/㎡		17,917원/㎡
	비율		0.94%
부대시설 (기타)	금액		48,161,000원
	원/㎡		37,715원/㎡
	비율		1.98%

② 주요 장비내역

구분	주요 사업설계내용	비 고
건축	○ 골조 : 철근콘크리트조 ○ 외부 : THK16 칼라복층유리, 압출성형시멘트패널, 고밀도 목재패널 등 ○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등 - 바닥 : 화강석, PVC타일, 기능성흡음바닥재 등 - 벽 : 친환경수성페인트, 인테리어필름, 벽지, 불연패널 등 - 천정 : 금속천정재, 흡음텍스, 무늬코트뿜칠 등 ○ 토목 : 토공사, 우․오수공사, 포장공사, 식재공사 등
설비	○ 배기휀, 배수펌프, 급탕재순환펌프, 급탕순환펌프, 저가수조, 온수탱크, 부스터펌프, 환기유니트, 엘리베이터 등 ○ 배관 : 옥외, 기계실, 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관 등
전기 · 통신	○ 전력간선, 전등전열, 자동화재탐지, 유도등 등 ○ 통신간선, TV, CCTV설비 및 방송설비공사 등
특이 사항	대지면적 : 1,596.6㎡, 건축면적 : 607.07㎡, 연면적 : 1,276.97㎡ 규모 : 3층/1동, 건축물높이 : 14.1m, 주차장 : 24대