【 붙임5 】

화양면사무소 신축사업

- 단계 : 준공 -

회계과, 이아람, 5253

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	여수시 화양면 나진길 16-10(나진리 470-1)
	인구 수	착공일	준공일
		6,660명(2019.5.기준)	6,574명(2020.1. 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		19명/21명	19명/20명
	재정자립도	착공일	준공일
		26.39%	27.02%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1983			1.322㎡						883.49㎡			3층
	본청	1983			1.322㎡						883.49㎡			3층
	의회
	기타
	청사신축 필요성			준공 후 35년 경과한 노후 청사 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무 효율 증대
	사업기간			착공 당시			2019. 5.~ 2019. 12. (0.8년)
				준공			2019. 5.~ 2020. 1.(0.9년)
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			3,880,943,000원			계약금액			3,526,079,310원			낙찰율			90.85%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계		2020			1,615㎡						1,623.02㎡			3층
	본청		2020			1,615㎡						1,623.02㎡			3층
	의회
	기타

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	4,290						4,290
	Y-3 이전
	Y-2	3,332						3,332
	Y-1	958						958
	준공연도(Y)
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비				280
	2) 설계비				140
	3) 감리비				59		20
	4) 공사비				2,803		889
	5) 기타부대비				50		49

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2017. 11.	확정	자체
	타당성 조사	해당없음		자체
	투융자심사	2017. 10.	승인	도
	공유재산관리계획	2017. 11.	의결	여수시의회
	설계	2018. 7.	착수	자체
	착공	2019. 5.	착공	자체
	준공	2020. 1.	준공	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액ㆍ비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	3,808,933,420
	단위비용(원/㎡)	2,346,847
	점유율(%)	100
건 축	금액(원)	2,790,813,590	민원실, 복지상담실, 문서고, 북카페, 회의실, 농어업상담소, 주민자치위원회사무실, 프로그램실, 통합중대본부
	단위비용(원/㎡)	1,719,540
	점유율(%)	73.27
기 계	금액(원)	116,867,900	냉·난방기, 공기순환장치, 물탱크
	단위비용(원/㎡)	72,007
	점유율(%)	3.06
전 기	금액(원)	515,297,760	전력간선, 동력, 전열, 전등, 공기순환 전원설비, 냉난방 전원설비, 태양광
	단위비용(원/㎡)	317,497
	점유율(%)	13.52
통 신	금액(원)	233,315,870	통신간선, TEL, LAN, TV, 전관방송설비, 방송설비, CCTV설비
	단위비용(원/㎡)	143,755
	점유율(%)	6,12
소 방	금액(원)	54,672,500	수신기, 시각전원반, 수동발신기, 화재감지기, 유도등, 비상조명등, 시각경보기, 소화기, 완강기
	단위비용(원/㎡)	33,686
	점유율(%)	1.43
부대시설 (토목,조경)	금액(원)	97,965,800	우수받이, 빗물받이블록, 집수정, 조립식우수맨홀, 우수관, 아스콘포장, 시각장애인보도블럭, 경계석, 디자인휀스
	단위비용(원/㎡)	60,360
	점유율(%)	2.57