정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설
② 추진배경	국도 17호선을 대체하여 우회할 수 있는 보조간선도로 개설로 교통량 분산을 통한 관광객 및 주민 교통편익 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 돌산읍 평사리 1377번지 일원 ○ 사 업 량 : 도로개설 L = 660m, B = 10m ○ 사 업 비 : 5,800백만원 (보상 3,800 / 공사 1,814 / 기타 200)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 박지윤 시설5급 박성식
⑥ 선정기준	10억원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘21. 1. ~‘25. 12.
<그간 주요 추진내용>
○「돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 공사 실시설계용역」 시행계획 보고 ※ 도로과-279		‘21. 1. 8.		서은수 부시장 김문환 과장 강 균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○「돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 공사 실시설계용역」계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 도로과-2090		‘21. 2. 19.		강 균 과장 황보호 주무관
○ 착수계(돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 실시설계 용역) ※ 도로과-2334		‘21. 2. 25.		강 균 과장 황보호 주무관
○「돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 공사 실시설계용역」작업 지시 ※ 도로과-5175		‘21. 4. 28.		강 균 과장 김정남 팀장 황보호 주무관
○「돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 공사 실시설계용역」일시정지 통보 ※ 도로과-9623, 회계과-41281		‘21. 8. 6.		강 균 과장 문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설 소규모 환경영향평가 용역 시행 ※ 도로과-11478		‘21. 9. 27.		강 균 과장 조계윤 과장 김진욱 팀장 김정남 팀장 문태영 주무관
○ 착수계(돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 소규모 환경영향평가 용역) ※ 도로과-12139		‘21. 10. 14.		문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 소규모 환경영향평가 용역 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 도로과-2272 ※ 회계과-9544		‘22. 3. 3.		문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 해양환경영향조사 용역 준공계 ※ 도로과-5658		‘22. 5. 18.		문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가 용역 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 도로과-7244, 회계과-32160		‘22. 6. 30.		문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 지반조사 및 사면안정성 평가 용역 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 도로과-9864,회계과-42474		‘22. 9. 5.		문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 농어촌도로 노선지정 공고를 위한 인·허가 의제 협의 ※ 도로과-9920, 9921, 11596		‘22. 9. 5.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 도로의 노선지정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-10015		‘22. 9. 7.		장문희 주무관 김정아 팀장 오정환 과장
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 지반조사 및 사면안정성 평가 용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-10807,회계과-45778		‘22. 9. 27.		문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 소규모 재해영향평가 심의 자료제출 ※ 도로과-10999		‘22. 9. 30.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 소규모환경영향평가 협의 요청 ※ 도로과-11336 영산청 환경평가과-462		‘22. 10. 11.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 사업인정(의제) 사업협의요청 ※ 도로과-11648		‘22. 10. 17.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 사업추진계획 보고 ※ 도로과-11843		‘22. 10. 21.		정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 사업추진 주민설명회 ※ 도로과-11909, 12523		‘22. 11. 4.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 총사업비 변경 및 추진계획 보고 ※ 도로과-1212		‘23. 2. 2.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 전라남도 지정문화제 현상변경 허가신청 ※ 도로과-2627, 문화유산과-4301		‘23. 3. 13.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 여수시 기술자문위원 확인서 제출 ※ 도로과-3969		‘23. 4. 11.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 도로의 노선지정에 관한 공고 ※ 도로과-2627		‘23. 4. 25.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 사업시행 계획검토보고(사업구간) ※ 도로과-4568		‘23. 4. 25.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 결과 알림 ※ 감사담당관-5805		‘23. 5. 30.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 사업 시행계획 보고 ※ 도로과-5981		‘23. 6. 5.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 계약의뢰 ※ 도로과-6004		‘23. 6. 5.		오정환 과장 배도선 팀장 문태영 주무관
○ 낙찰자 결정 통보 ※ 회계과-30998		‘23. 6. 27.		이동일 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 계약 체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-32907		‘23. 7. 4.		한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 ※ 도로과-7466		‘23. 7. 6.		오정환 과장 김정아 팀장 장문희 주무관
○ 품질관리자 변경 선임 및 알림 ※ 도로과-7466		‘23. 7. 21.		심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 보상계획 열람 및 알림 ※ 도로과-8302, 8303		‘23. 7. 26.		심근하 과장 김정아 팀장 장문희 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 검토 및 의뢰 ※ 도로과-8798, 8918		‘23. 8. 7.		이경종 국장 심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-39351		‘23. 8. 8.		한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 감정평가 의뢰 ※ 도로과-9318		‘23. 8. 21.		심근하 과장 김정아 팀장 장문희 주무관
○ 실시설계용역 준공 ※ 도로과-9889		‘23. 9. 4.		심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 공사 일시정지 검토 및 의뢰 ※ 도로과-10254, 10265		‘23. 9. 13.		이경종 국장 심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 공사 일시정지 알림 ※ 회계과-45359		‘23. 9. 14.		한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관
○ 편입토지(지장물)등 손실보상비 산정 및 집행계획 및 집행 ※ 도로과-11036		‘23. 10. 6.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 한진숙 과장 심근하 과장 김진욱 팀장 윤대근 팀장 김정아 팀장 김현철 주무관 장문희 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 건설재해예방 기술지도용역 계약 의뢰 ※ 도로과-13214		‘23. 10. 23.		심근하 과장 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 건설재해예방 기술지도용역 계약 알림 ※ 회계과-63423		‘23. 12. 13.		한진숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 일시정지 해제 요청 ※ 도로과-14116		‘23. 12. 13.		김정아 팀장 대결 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 소규모환경영향평가 용역 일시정지 해지 요청 ※ 도로과-14411		‘23. 12. 19.		김정아 팀장 대결 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가 용역 변경계약 의뢰 ※ 도로과-14409		‘23. 12. 19.		김정아 팀장 대결 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 소규모환경영향평가 용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-65911		‘23. 12. 21.		한진숙 과장 김진욱 팀장 김수정 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가 용역 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-65951		‘23. 12. 21.		한진숙 과장 김진욱 팀장 김수정 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설공사 일시정지해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-65951		‘23. 12. 26.		이동일 과장 대결 한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관
○ 전라남도 지정문화재 현상변경 등 착수 신고서 제출 ※ 도로과-14691호		‘23. 12. 27.		김정아 팀장 대결 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 건설재해예방 기술지도용역 착수계 제출 ※ 도로과-14831호		‘23. 12. 29.		김정아 팀장 대결 윤대근 팀장 김현철 주무관
○ 보상협의 공시송달 공고 ※ 도로과-117호		‘24. 1. 3.		김정아 팀장 전결 장문희 실무원
○ 편입 주택 거주자 이사 완료 촉구 ※ 도로과-2227호		‘24. 2. 22.		명호남 과장 전결 차용석 팀장 김현철 주무관
○ 2024년 제2회 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 도로과-3474호		‘24. 3. 21.		염승열 건설교통국장 전결 명호남 과장 차용석 팀장 장문희 실무원
○ 토지수용 재결신청서 열람공고 ※ 도로과-4202호		‘24. 4. 4.		명호남 과장 전결 차용석 팀장 장문희 실무원
○ 2024년 제2회 지방토지수용위원회 재결을 위한 편입토지(지장물)등에 대한 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-4587호		‘24. 4. 15.		명호남 과장 전결 차용석 팀장 장문희 실무원
○ 토지수용 재결신청서 열람공고 결과 제출 ※ 도로과-4870호		‘24. 4. 19.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 수용재결에 따른 보상협의 요청 및 공탁 안내 ※ 도로과-6417호		‘24. 5. 28.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 대결 장문희 실무원
○ 2024년 제2회 지방토지수용위원회 재결서 정본 송부 ※ 도로과-6561호		‘24. 5. 30.		장문희 실무원
○ 2024년 제2회 지방토지수용위원회 재결서 공시송달 공고 ※ 도로과-6904호		‘24. 6. 7.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 2024년 제2회 지방토지수용위원회 재결서 공시송달 공고 결과 제출 ※ 도로과-7801호		‘24. 6. 26.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 장문희 실무원
○ 도로개설공사 가연성폐기물처리, 기술지도용역 기간연장 검토보고 ※ 도로과-8004호		‘24. 7. 1.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 차용석 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 추진 촉구 ※ 도로과-2010호		‘24. 8. 26.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 대결 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 기성(1회) 검사조서 제출 ※ 도로과-2687호		‘24. 9. 11.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 지정폐기물 (철거,조사,처리용역) 시행 보고 ※ 도로과-2827호		‘24. 9. 19.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일원 계약1팀장 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 기간연장 검토보고 ※ 도로과-3553호		‘24. 10. 10.		이동일 교통도로국장 전결 강행숙 회계과장 정일원 계약1팀장 명호남 과장 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 가연성 폐기물 처리 용역 준공검사조서 제출 ※ 도로과-4185호		‘24. 10. 25.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 도로개설공사 가연성 폐기물 처리 용역 지연배상금 부과 알림 ※ 회계과-56909호		‘24. 10. 25.		강행숙 회계과장 전결 정일권 계약1팀장 장지수 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 지정폐기물 철거공사 준공계 제출 ※ 도로과-4652호		‘24. 11. 6.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 지정폐기물 조사용역 완료계 제출 ※ 도로과-4656호		‘24. 11. 6.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 지정폐기물 조사용역 완료계 제출 ※ 도로과-4656호		‘24. 11. 6.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 지정폐기물 처리용역 완료계 제출 ※ 도로과-4754호		‘24. 11. 8.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전 사거리 우회도로 개설 관련 안굴전 마을 진입로 개설건의에 대한 검토보고 ※ 도로과-4754호		‘24. 11. 8.		정기명 시장 결재 최정기 부시장 이동일 국장 명호남 과장 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 2회 기성(개산급) 부분검사원 제출 ※ 도로과-6255호		‘24. 12. 16.		명호남 과장 곽원 팀장
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 현장실정(설계변경)에 대한 검토보고 ※ 도로과-2688호		‘25. 3. 14.		최연호 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 곽원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 현장 확인에 따른 보완 요청 ※ 도로과-3005호		‘25. 3. 14.		황규석 팀장 전대결 곽원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 현장대리인 변경 검토보고 ※ 도로과-4615호		‘25. 3. 14.		박성식 과장 전결 곽원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 설계자 의견 제출 요청 ※ 도로과-5426호		‘25. 5. 26.		박성식 과장 전결 곽원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 설계자 의견 제출 요청 ※ 도로과-5426호		‘25. 5. 26.		박성식 과장 전결 곽원 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 실정보고에 따른 일시정지 검토보고 ※ 도로과-8477호		‘25. 8. 4.		임병종 교통과장 대결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 실정보고에 따른 일시정지 검토보고 ※ 도로과-8477호		‘25. 8. 4.		임병종 교통과장 대결 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 설계변경 심의 요청 ※ 도로과-9253호		‘25. 8. 26.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 설계변경 일상감사 요청 ※ 도로과-9391호		‘25. 8. 29.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 현장실정(설계변경)에 대한 검토보고 ※ 도로과-9883호		‘25. 9. 11.		정기명 시장 결재 최정기 부시장 최연호 국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 과장 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 설계변경 계약심사 요청 ※ 도로과-9886호		‘25. 9. 11.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사(설계변경) 일상감사 조치결과 제출 ※ 도로과-10052호		‘25. 9. 16.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 외 2건 일시정지 해지 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-10053호		‘25. 9. 16.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 기성부분검사원(3회) 제출 ※ 도로과-10430호		‘25. 9. 25.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관
○ 돌산읍 안굴전사거리 우회도로 개설공사 기성검사조서(3회) 제출 ※ 도로과-10570호		‘25. 9. 30.		박성식 과장 결재 서주용 팀장 박지윤 주무관