정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신재생에너지 융ㆍ복합지원사업(국동, 대교동 일원)
② 추진배경	2종 이상의 신재생에너지원 간 융합사업을 통하여, 지역에너지 자립기반 구축 및 신ㆍ재생에너지 보급 확대, 에너지비용 절감 등 친환경 청정에너지 자립마을 조성
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 국동, 대교동 일원 ○ 사업량 : 327개소 (태양광 314건/1,188㎾, 태양열 12건/109.8㎡) ○ 사업비 : 2,412백만 원(국비 1,212, 도비 115, 시비 655, 민간 430)
④ 사업부서	여수시 에너지정책과		⑤ 담당자	공업5급 김영현 공업6급 천경국
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘20.∼‘22.
<그간 주요 추진내용>
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 공고(산업부)		‘20. 3. 20.	-
○ 2021년 신재생에너지 융ㆍ복합지원사업 컨소시엄 참여업체 공모 추진계획 수립		’20. 4. 3.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 이동일 과장 강석재 팀장 채정문 주무관
○ 여수시 융ㆍ복합지원사업 컨소시엄 참여업체 선정 결과보고		’20. 4. 14.	김병완 국장 이동일 과장 강석재 팀장 채정문 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융ㆍ복합지원사업 사업계획서 제출		‘20. 5. 8.	이동일 과장 강석재 팀장 채정문 주무관
○ 산업부 「2021년 신재생에너지보급 융복합지원사업」공모 선정결과 안내 ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-3427호		‘20. 9. 9.	-
○ 대상지 및 예산 최종확정 알림 ※ 전라남도 에너지신산업과-28067호		‘20. 12. 15.	-
○ 업무 협약 체결 (한국에너지공단, 여수시, 컨소시엄업체, 수요자대표)		‘21. 1. 29.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융·복합지원사업 추진계획		‘21. 3. 19.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융·복합지원사업 국고보조금(선급금) 신청		‘21. 3. 22.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융·복합지원사업 국고보조금(선급금) 교부 알림 ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-1111호		‘21. 4. 5.	-
○ 2021년 여수시 신재생에너지 융·복합지원사업 관련 협조 요청(1차분)		‘21. 4. 7.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 신재생에너지 융·복합지원사업 국고보조금(선급금) 세입세출외현금 수납등록 및 반환 요청		‘21. 4. 14.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 융·복합지원사업 국고보조금(잔여금) 교부신청 안내 ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-1287호		‘21. 4. 19.	-
○ 2021년도 신재생에너지 융·복합지원사업 보조금(선급금) 교부 결정		‘21. 4. 23.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융·복합지원사업 국고보조금(잔여금) 신청		‘21. 4. 27.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융·복합지원사업 태양광 모듈 현장 적용에 관한 검토보고		‘21. 4. 28.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년도 신재생에너지 융·복합지원사업 보조금(선급금) 교부 결정 알림		‘21. 4. 29.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 융·복합지원사업 국고보조금(잔여금) 교부 알림(전남) ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-1946호		‘21. 6. 3.	-
○ 신재생에너지 융·복합지원사업 국고보조금(잔여금) 세입세출외현금 수납등록 및 반환 요청		‘21. 6. 7.	김정오 과장 박철성 팀장 한승희 주무관
○ 2021년 10월 신재생에너지 융복합지원사업 사업변경 신청 안내 ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-3439호		‘21. 10. 5.	-
○ 2021년 신재생에너지 융·복합지원사업 변경 신청		‘21. 10. 5.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2021년 융복합지원사업 사업계획서 변경 심의결과 알림(여수) ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-3995호		‘21. 10. 29.	-
○ 2021년 12월 신재생에너지 융복합지원사업 사업변경 신청 안내 ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-4308호		‘21. 11. 22.	-
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 사업연장 신청서 제출		‘21. 11. 29.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2021년 융복합지원사업 사업계획서 변경 심의결과 알림(여수) ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-4821호		‘21. 12. 20.	-
○ 2021년 사고이월사업 검토보고		‘21. 12. 20.	박현식 부시장 박은규 국장 김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2021년도 세출예산 사고이월 대상사업 제출		‘21. 12. 20.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 「2021년 신재생에너지 융복합지원사업」 이월에 따른 사전 품의		‘21. 12. 21.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2021년 여수시 신재생에너지 융복합지원사업 관련 협조 요청		‘22. 2. 17.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2022년 신재생에너지 융복합지원사업 사업변경 신청 안내 ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-615호		‘22. 3. 10.	-
○ 2021년도 여수시 신재생에너지 융복합지원사업 지원 협조 요청		‘22. 3. 11.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 사업변경 신청		‘22. 3. 22.	김정오 과장 곽원준 팀장 김보영 주무관
○ 2021년 융복합지원사업 사업계획서 변경 평가결과 알림(여수) ※ 한국에너지공단 신재생에너지보급실-1245호		‘22. 5. 3.	-
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 사업변경 신청		‘22. 11. 17.	장광일 과장 곽원준 팀장 이성우 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 준공계 접수		‘22. 11. 28.	-
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 준공		‘22. 12. 13.	장광일 과장 곽원준 팀장 이성우 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 잔여금 지급 결정		‘22. 12. 16.	장광일 과장 곽원준 팀장 이성우 주무관
○ 2021년 신재생에너지 융복합지원사업 선급금 잔액 및 이자 반납		‘22. 12. 30.	㈜이삭엔지니어링