정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	블루투어 섬 관광안내소 조성사업(이월사업)/ 완료
② 추진배경	여수섬섬길과 여수-고흥 관광정보 안내를 통한 관광수용태세 확립으로 맞춤형 관광안내 공간 확보로 관광객 편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 화정면 조발리 산26-1번지(조발해오름 언덕) ○ 건축면적 : 363.42㎡(연면적 298.02㎡) ⁕철근콘크리트조 / 1층 ○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 2021. 9. ○ 총사업비 : 1,075,095천원 ○ 사업내용 : 안내소, VR체험관, 특산품판매장, 푸드뱅크, 카페, 루프탑전망대 설치
④ 사업부서	여수시 관광과		⑤ 담당자	행정5급 박형열 행정7급 윤은미
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘21. 5.∼‘21. 11.
<그간 주요 추진내용>
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 공모계획 ※ 관광과-7424호		‘20. 4 27.	권오봉 시장 서은수 부시장 김용필 국장 정재호 과장 김상욱 팀장 정 숙 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 실시설계용역 계약 심사 ※ 회계과-40742호		‘20. 7. 9.	조계윤 과장 백현철 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 검토 ※ 관광과-12284호		‘20. 7 17.	권오봉 시장 정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 실시설계용역 계약 ※ 회계과-45910호		‘20. 8 7.	권오봉 시장 정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 차장
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 실시설계용격 일시 정지 ※ 회계과-54760호		‘20. 10. 5.	조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-1190호		‘21. 2. 4.	이충현 과장 배도선 팀장 한태광 차장

○ 장애물 없는 생활환경 예비 인증 신청 ※ 관광과-2896호	‘21. 2 23.	정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 차장
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 계약 사전심사 요청 ※ 관광과-4793호	‘21. 3. 29.	정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 차장
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 건축허가 통보 ※ 허가민원과-24755호	‘21. 4 6.	박창배 과장 최정일 팀장 신은주 주무관
○ 여수 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 계약심사 결과알림	‘21. 5. 27.	김성훈 과장 문인기 팀장 백대성 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 실시설계 용역 일시해지 및 설계변경 계약 ※ 회계과-32724호	‘21. 6. 21.	정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 차장
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(건축,기계) 시행 ※ 회계과-32689호	‘21. 6. 24.	정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 차장
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(전기) 시행 ※ 회계과-33077호	‘21. 6. 28.	정재호 과장 김상욱 팀장 예정준 차장
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(통신) 시행 ※ 회계과-39038호	‘21. 7. 26.	박형열 과장 김상욱 팀장 박연주 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 예산변경 사용 검토보고	‘21. 8. 3.	김학섭 국장 박형열 과장 김상욱 팀장 박연주 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 감리용역 시행 ※ 회계과-42927호	‘21. 8. 25.	박형열 과장 김상욱 팀장 박연주 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(건축,기계)공사기간 연장 검토보고	‘21. 8. 30.	김학섭 국장 박형열 과장 김상욱 팀장 박연주 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 기간연장 계약 사항 통보 ※ 회계과-45280호	‘21. 8. 31.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김창희 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(전기,통신)공사기간 연장 검토보고	‘21. 9. 1.	김학섭 국장 박형열 과장 김상욱 팀장 박연주 주무관

○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(전기)기간연장 계약 통보 ※ 회계과-45174호	‘21. 9. 2.	조계윤 과장 김진욱 팀장 김창희 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(통신)기간연장 계약 통보 ※ 회계과-45269호	‘21. 9. 3.	조계윤 과장 김진욱 팀장 최수지 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 BF본인증 처리 용역 시행 ※ 회계과-45280호	‘21. 9. 10.	박형열 과장 김상욱 팀장 박연주 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(건축,기계) 실정보고에 따른 설계변경 검토보고	‘21. 10. 18.	박현식 부시장 김학섭 국장 박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(건축,기계) 설계변경에 따른 계약의뢰	‘21. 10. 19.	박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업 예산변경 사용 검토	‘21. 10. 20.	김학섭 국장 박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(통신)실정보고에 따른 설계 변경 검토보고	‘21. 10. 27.	박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(건축,기계) 실정보고에 따른 2차분(2회) 설계변경 검토보고	‘21. 11. 08.	김학섭 국장 박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성 사업(총괄분 및 2차분) 설계 변경 계약의뢰	‘21. 11. 09.	박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 조성사업 BF본인증 처리용역 일시정지 검토보고	‘21. 11. 10.	박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관
○ 블루투어 섬 관광안내소 준공에 따른 섬섬여수힐링쉼터 더섬 개소식 계획	‘21. 12. 14.	박형열 과장 김상욱 팀장 윤은미 주무관