정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사
② 추진배경	○ 웅천 주민들의 도로에 의한 보행단절 및 대중교통 이용 불편 등 민원사항 해결 ○ 인근 초등학교 학생들의 안전한 통학로 확보
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 웅천동 일원 ○ 사 업 량 : 육교 설치 1개소(L= 87m, B= 3m) ○ 사 업 비 : 30억 원 ○ 공사기간 : 2019. 1. ~ 2023. 6.
④ 사업부서	도로시설관리과		⑤ 담당자	한상범
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간	‘19. 1 ~ ’23. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수 ※ 회계과-29487호(2019. 6. 14.)		‘19. 6.18.	문태선 단장 최홍식 과장 조일섭 팀장 이민호 주무관
○ 교통안전시설심의 ※ 여수경찰서 경비교통과-7102호 (2019. 7. 15.), 7765호(2019. 8. 2.)		‘19. 7.22.	문태선 단장 심근하 과장 장현철 팀장 조정선 차장
○ 육교 형식 결정 ※ 도로시설관리과-21051호(2019. 9. 18.)		‘19. 9.18.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 심근하 과장 장현철 팀장 조정선 차장
○ 육교 공법 선정 ※ 도로시설관리과-25366호(2019. 11. 12.)		‘19.11.12.	심근하 과장 장현철 팀장 조정선 차장
○ 여수시 경관심의 ※ 도시계획과-7927호(2020. 4. 3.)		‘20. 3.27.	심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 계약체결 ※ 회계과-49267(2020.8.31.)		‘20. 8.31.	심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 2021년 상반기 정기인사		‘21. 1. 8.	주영근 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 공사 일시정지 (관급자재(강판) 공급 지연)		’21. 5. 13.	주영근 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 2021년 하반기 정기인사		‘21. 7. 7.	주영근 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 2022년 상반기 정기인사		‘22. 1. 10.	김인옥 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 관급자재(강판) 재구매 요청(8회) ※ 강판자재 가격 급등에 따른 계약 지연		‘22. 6. 28.	김인옥 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 2022년 하반기 정기인사		’22. 7. 25.	김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 관급자재(강판) 구매계약 체결		’22. 7. 29.	김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 관급자재(강판) 납품 완료		’22. 9. 20.	김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 공사 일시정지 해제		’22. 10. 4.	정재호 단장 김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 2023년 상반기 정기인사		’23. 1. 9.	박성식 과장 황용순 팀장 한상범 주무관
○ 웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사 설계변경		’23. 5. 9.	김병완 단장 박성식 과장 황용순 팀장 한상범 주무관
○ 웅천 꿈에그린 아파트 앞 육교 설치공사 준공		’23. 6. 15.	박성식 과장 황용순 팀장 한상범 주무관