정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	고소동 공영주차장(타워)신축
② 추진배경	○ 고소동 벽화마을 관광객 증가에 따른 주차난과 차량접촉사고 등 주민 불편을 해소하기 위해 주차타워 신축
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 고소동 636-4번지 일원 ○ 사 업 량 : 주차전용건축물 1동 - (당초) 부지 2,366㎡, 건물 3,637㎡-3+1층, 주차 129면 - (변경(안)) 지평식 주차장 조성, 주차 36면 ○ 사 업 비 : 46억원(시 46) ○ 사업기간 : `20. 2. ~ `24. 12. ※ 용역 기간 : ‘20. 3. ~ ’24. 10.
④ 사업부서	여수시 주차차량과		⑤ 담당자	시설8급 황주영 행정5급 고영준
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	`20. 2 ~ `24. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정(계획 수립) ※ 교통과-51125호(‘19. 7. 5.)		‘19. 7. 5.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 고영준 과장 양준호 팀장 김경열 주무관
○ 설계용역 계약체결 ※ 회계과-10995호(‘20. 2. 28.)		‘20. 3. 2.	고영준 과장 서근채 팀장 윤창열 주무관
○ 여수 도시계획시설 결정 ※ 도시계획과-7961호(‘20. 4. 6.)		‘20. 4. 6.	고영준 과장 서근채 팀장 윤창열 주무관
○ 도시관리계획 실시계획인가 ※ 여수시 고시 제2020-384호(‘20. 9. 24.)		‘20. 9. 24.	고영준 과장 서근채 팀장 윤창열 주무관
○ 문화재 현상변경 허가신청 ※ 교통과-105432호(‘20. 12. 4.) ⇒ 불허[문화예술과-14578(2021. 6. 21.)]		‘20. 12. 4.	고영준 과장 서근채 팀장 윤창열 주무관
○ 문화재 현상변경 허가신청 ※ 교통과-72105호(‘21. 7. 28.) ⇒ 허가[문화예술과-20038(2021. 8. 20.)]		‘21. 7. 28.	공주식 과장 김영화 팀장 정은주 주무관
○ 도시계획시설 실시계획(변경)인가 ※ 도시계획과-466호(‘22. 1. 5.)		‘22. 1. 5.	김문환 과장 명호남 팀장 정동현 주무관
○ BF 예비인증 ※ 한국생산성본부 BF인증센터-1042		‘22. 5.12.	김동율 본부장 남택유 센터장 박은주 팀원
○ 사업비 증액 검토보고 ※ 교통과-78913호		`22. 8. 9.	정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 서채훈 과장 김영화 팀장 정은주 주무관
○ 매장문화재 표본조사용역 ※ 교통과-114197호		`22. 11. 28.	서채훈 과장 박인천 팀장 정은주 주무관
○ 매장문화재 발굴조사용역 ※ 주차차량과-25644호		`23. 5. 30.	장지문 과장 문치곤 팀장 최두용 주무관
○ 매장문화재 발굴조사용역 준공검사 기한 연장 ※ 주차차량과-25644호		`23. 9. 25.	장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 유적 전문가 검토회의 조치사항 통보 ※ 발굴제도과-10633호(‘23.10.10.)		`23. 10. 10.	김동대 과장 이상원 행정사무관 정연준 주무관
○ 사업부지 내 문화재 관련 검토보고 ※ 주차차량과-73016호(‘23.11.7)		`23. 11. 7.	장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 유적 전문가 검토회의 결과에 따른 부서 의견 제출 ※ 문화유산과-13375호(‘23.11.13.)		`23. 11. 13.	김춘수 과장 서혜은 팀장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 고소동 공영주차장 조성방안 변경 검토 보고 ※ 주차차량과-30070호(‘24.5.3.)		`24. 5. 3.	정기명 시장 김종기 부시장 이동일 국장 박형열 과장 강행숙 과장 조정만 과장 서은주 팀장 김진욱 팀장 고영준 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 설계변경 검토보고 ※ 주차차량과-41936호(‘24.6.19.)		`24. 6. 19.	김종기 부시장 이동일 국장 박형열 과장 서은주 팀장 김남영 팀장 김진욱 팀장 고영준 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 및 기간 연장 검토 보고 ※ 주차차량과-46326호(‘24.7.3.)		`24. 7. 3.	이동일 국장 강행숙 과장 김진욱 팀장 고영준 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 변경계약 체결 ※ 회계과-37890호(‘24.7.11.)		`24. 7. 11.	강행숙 과장 정일권 팀장 김대건 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 준공조서 송부 ※ 주차차량과-23636호(‘24.10.4.)		`24. 10. 4.	고영준 과장 황여진 팀장 황주영 주무관
○ 주차환경개선사업 사업계획 변경 협의(승인) 요청-전라남도 ※ 주차차량과-24320호(‘24.10.7.)		`24. 10. 7.	고영준 과장 황여진 팀장 황주영 주무관