정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화장동 공영주차장(타워)신축
② 추진배경	○ 원룸 및 주택가 밀집지역으로 주차난이 심각하고 긴급차량(소방차 등) 진입로 확보 등 주민안전을 제고하기 위해 주차여건이 열악한 주거지에 공영주차장 확충
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 화장동 795-1번지(통합관제센터) ○ 사 업 량 : 주차전용건축물 1동 - 부지 3,066㎡㎡, 건물 7,842㎡-3+1층, 주차 292면 ○ 사 업 비 : 99억원(국 20, 특 3, 시 76) ○ 사업기간 : `20. 1. ~ `24. 12. ※ 용역 기간 :‘20. 4. ~ 21. 2.
④ 사업부서	여수시 주차차량과		⑤ 담당자	시설8급 황주영 공업5급 홍주빈
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간	`20. 1 ～ `24. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 공영주차장 주차타워 신축 방침 결정 ※ 교통과-20029호(‘19. 3. 22.)		`19. 3. 22.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 고영준 과장 양준호 팀장 김경열 주무관
○ 설계용역 계약체결 ※ 회계과-17981호(‘20. 3. 30.)		`20. 3. 30.	고영준 과장 서근채 팀장 윤창열 주무관
○ 기술자문위원회 심의 요청 ※ 교통과-111731호(‘20. 12. 23.)		`20. 12. 23.	고영준 과장 서근채 팀장 윤창열 주무관
○ 설계용역 준공 ※ 회계과-7581호(‘21. 2. 18.)		‘21. 2. 18	조계윤 과장 오병구 팀장 김동승 주무관
○ 사업비 증액 검토보고 ※ 교통과-4859호(‘22. 1. 17.)		`22. 1. 17.	권오봉 시장 박현식 부시장 문인기 국장 공주식 과장 김영화 팀장 정은주 주무관
○ 공영주차장 신축공사 시행 ※ 교통과-85816호		`22. 8. 31.	정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 서채훈 과장 박인천 팀장 정은주 주무관
○ 공영주차장 건축물 해체완료 ※ 주차차량과-4220호(23. 01. 30.)		`23. 1. 30.	장지문 과장 문치곤 팀장 최두용 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 주차차량과-4249호(23. 01. 30.)		`23. 1. 30.	장지문 과장 문치곤 팀장 최두용 주무관
○ 화장동 공영주차장 변경계약 ※ 주차차량과-46507호(23. 07. 25.)		`23. 7. 25.	장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 화장동 공영주차장 1차 기성 확정 ※ 회계과-39538호(23. 08. 09.)		`23. 8. 9.	장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 화장동 공영주차장 2차 기성 확정 ※ 회계과-44560호(23. 09. 11.)		`23. 9. 11.	장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 신축공사 설계변경 검토보고 ※ 주차차량과-71087호(‘23. 10. 31.)		`23. 10. 31.	김병완 국장 장광일 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 신축공사 설계변경 검토보고 ※ 주차차량과-84300호(‘23. 12. 23.)		`23. 12. 23.	정기명 시장 김종기 부시장 김병완 국장 한진숙 과장 박형열 과장 김진욱 팀장 서은주 팀장 장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 신축공사 변경계약 및 공기연장 요청 ※ 주차차량과-84733호(‘23. 12. 27.)		`23. 12. 27.	장광일 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 화장동 공영주차장 본인증 신청 ※ 주차차량과-3999호(‘24. 1. 16.)		`24. 1. 16.	고영준 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 건축물 준공에 따른 건축물대장 생성 신청 ※ 주차차량과-8228호(‘24. 2. 2.)		`24. 2. 2.	고영준 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ BF본인증 용역 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 주차차량과-17939호(‘24. 3. 18.)		`24. 3. 18.	고영준 과장 박형열 과장 서은주 팀장 김남영 팀장 김진욱 팀장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ 화장동 공영주차장 소방시설 최초 점검 용역 시행 ※ 주차차량과-33904호(‘24. 5. 21.)		`24. 5. 21.	고영준 과장 문치곤 팀장 김다훈 주무관
○ BF본인증 용역 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-34853호(‘24. 7. 1.)		`24. 7. 1.	강행숙 과장 김진욱 팀장 장지수 주무관
○ BF본인증 현장심사 보완조치계획 심의 결과 보고 ※ 주차차량과-27682호(‘24. 10. 21.)		`24. 10. 21.	고영준 과장 황여진 팀장 황주영 주무관
○ BF본인증 용역 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-55965호(‘24. 10. 25.)		`24. 10. 25.	강행숙 과장 정일권 팀장 장지수 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증서 발급 ※ 한국장애인고용공단-423호(‘25. 2. 24.)		`25. 2. 24.	홍주빈 과장 황여진 팀장 황주영 주무관
○ 화장동 공영주차장 유료 운영에 ᄄᆞ른 행정예고 ※ 주차차량과-22223호(‘25. 4. 4.)		`25. 4. 4.	홍주빈 과장 황여진 팀장 황주영 주무관