정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수 생활문화센터 건립(생활SOC)
② 추진배경	정주 및 유동인구가 많은 도심권 내 문화 공간 부족에 따른 주민 건의 다수 존재
③ 사업개요	사업목적: 인구 밀집지역인 도심권에 시민 문화 수요 충족 및 복합 생활 문화공간 제공을 위해 공동육아나눔터가 포함된 생활문화센터를 건립 추진내용: 생활문화센터(복합화 시설) 건립(4층/1동)
④ 사업부서	여수시 문화예술과		⑤ 담당자	행정5급 김춘수/ 시설8급 윤영상
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	’20. 1 ~ ’22. 12.
<그간 주요 추진내용>
○「여수 생활문화센터 신축공사」준공 ※ 문화예술과-30101호 등		’22.12.19.	김용만 문화예술팀장 대결 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」설계변경 검토보고 ※ 문화예술과-29634호		’22.12.14.	박현식 부시장 나병곤 관광문화교육국장 이동일 기획예산과장 이강 예산팀장 한진숙 회계과장 최철웅 계약2팀장 김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」설계변경 검토보고 ※ 문화예술과-28870호		‘22.12.07.	나병곤 관광문화교육국장 한진숙 회계과장 최철웅 계약2팀장 김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」설계변경 검토보고 ※ 문화예술과-23838호		’22.10.13.	나병곤 관광문화교육국장 한진숙 회계과장 최철웅 계약2팀장 김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」설계변경 검토보고 ※ 문화예술과-18633호		’22.08.16.	정기명 시장 박현식 부시장 나병곤 관광문화교육국장 이동일 기획예산과장 이강 예산팀장 한진숙 회계과장 최철웅 계약2팀장 김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사 감리용역(건축, 기계)」2차분 계약체결 ※ 회계과-19611호		’22.04.26.	김용필 행정지원국장 신숙이 계약심사팀장 김진욱 계약2팀장 김순미 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사 감리(건축,기계) 용역(1차분)」준공검사공무원 지정 알림 ※ 회계과-19225호		’22.04.25.	신숙이 계약심사팀장 김진욱 계약2팀장 김순미 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사(건축, 기계)」1차분 공사기간 연장 검토보고 ※ 문화예술과-9011호		’22.04.21.	나병곤 관광문화교육국장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사 에너지효율등급 및 BF 본인증 용역」계약체결 ※ 회계과-13399호		’22.03.25.	조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 박윤희 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사 감리용역(건축, 기계)」2차분 계약체결 ※ 회계과-12794호		’22.03.23.	조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 김순미 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사 감리용역(건축, 기계)」2차분 시행 ※ 문화예술과-5887호		’22.03.15.	김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」BF, 에너지효율등급, 제로에너지 본인증 용역 시행 ※ 문화예술과-5344호		’22.03.08.	김춘수 문화예술과장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사(건축, 기계)」2차분 시행 ※ 문화예술과-4579호		’22.02.25.	권오봉 시장 박현식 부시장 나병곤 관광문화교육국장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 김춘수 문화예술과장 배영노 문화시설팀장 윤영상 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」일시정지 해제 검토보고 ※ 문화예술과-532호		’22.01.07.	박형열 관광과장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 고영준 문화예술과장 최정일 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」일시정지 검토보고 ※ 문화예술과-27428호		’21.11.16.	김학섭 관광문화교육국장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 고영준 문화예술과장 최정일 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」공사 착공 및 감리용역 착수 ※ 문화예술과-23286호(폐기물처리용역) ※ 문화예술과-23287호(건축․기계 감리) ※ 문화예술과-23319호(건축․기계) ※ 문화예술과-27717호(소방감리) ※ 문화예술과-27718호(소방) ※ 문화예술과-27719호(전기) ※ 문화예술과-27720호(통신) ※ 문화예술과-27721호(통신감리) ※ 문화예술과-27722호(전기감리)		’21.09.30.	고영준 문화예술과장 최정일 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」계약체결 ※ 회계과-47753호(통신, 건축감리) ※ 회계과-47756호(건축․기계, 소방, 전기) ※ 회계과-47807호(전기감리) ※ 회계과-48667호(폐기물처리용역) ※ 회계과-44882호(소방감리) ※ 회계과-49444호(통신감리)		’21.09.24.~ ’21.10.05.	조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 김창희 주무관, 최수지 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」 계약심사 결과 알림 ※ 문화예술과-20698호(건축)		’21.08.30.	조계윤 회계과장 신숙이 계약심사팀장 백현철 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사 감리(건축 외3) 용역」시행 ※ 문화예술과-20447호		’21.08.26.	고영준 문화예술과장 최정일 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」 계약심사 결과 알림 ※ 문화예술과-18807호(전기) ※ 문화예술과-18808호(소방) ※ 문화예술과-19123호(건축) ※ 문화예술과-19873호(통신)		’21.08.09. ~ ’21.08.19.	고영준 문화예술과장 최정일 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 기본 및 실시설계 용역」완료 ※ 문화예술과-15815호		’21.07.05.	고영준 문화예술과장 최정일 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 신축공사」시행 ※ 문화예술과-15433호		’21.06.30.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 관광문화교육국장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 고영준 문화예술과장 정미순 문화시설팀장 김정현 주무관
○ 「여수 생활문화센터 건립 기본 및 실시설계용역」과업 일시정지 해제 검토보고 ※ 문화예술과-15101호		’21.06.28.	김학섭 관광문화교육국장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 고영준 문화예술과장 정미순 문화시설팀장 김정현 주무관
○ 여수 생활문화센터 신축에 따른 공용건축물 협의 요청 ※ 문화예술과-14989호		’21.06.25.	고영준 문화예술과장 정미순 문화시설팀장 김정현 주무관
○ 여수 생활문화센터 신축공사 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-4880호		’21.06.23.	이충현 감사담당관 배도선 기술감사팀장 한태광 주무관
○ 2021년 제3회 여수시건축위원회(서면) 개최 결과 알림 ※ 허가민원과-43371호		’21.06.16.	박창배 허가민원과장 최정일 건축허가팀장 정아영 주무관
○ 2021년도 제3회(2/4)분기 여수시 기술자문위원회 자문결과 알림 ※ 건설과-13614호		’21.06.11	박상훈 건설과장 최종춘 지역개발팀장 오진혁 주무관
○ 여수 생활문화센터 신축공사 건축심의 의뢰 ※ 문화예술과-11452호		’21.05.17.	고영준 문화예술과장 정미순 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 기본 및 실시설계 용역」일시정지 통보 ※ 회계과-17876호		‘21.04.09.	김용필 행정지원국장 장명이 계약심사팀장 오병구 계약2팀장 김창희 주무관
○「여수 생활문화센터 건립 기본 및 실시설계용역」과업 중지 요청에 따른 검토보고 ※ 문화예술과-8044호		’21.04.09.	김학섭 관광문화교육국장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 고영준 문화예술과장 정미순 문화시설팀장 김정현 주무관
○「여수 생활문화센터 건립 기본 및 실시설계 용역」실정보고에 대한 설계변경 검토보고 ※ 문화예술과-4123호		’21.02.22.	고영준 문화예술과장 조계윤 회계과장 김진욱 계약2팀장 정미순 문화시설팀장 김정현 주무관
○ 「여수 생활문화센터 건립」 기본 및 실시설계용역착수보고회 결과 보고 ※ 문화예술과-29286호		’20.12.17.	김지선 문화예술과장(공석) 홍주성 문화예술팀장(대결) 정미순 문화시설팀장 임이슬 주무관
○ 「여수 생활문화센터 건립 기본 및 실시설계 용역」계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-62423호		’20.11.16.	김용필 행정지원국장 조계윤 회계과장 오병구 계약2팀장 김창희 주무관
○ 여수 생활문화센터 건립 건축설계공모 시행 ※ 문화예술과-19327호		’20.08.21.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 관광문화교육국장 (조계윤 회계과과장, 오병구 계약2팀장) 김지선 문화예술과장 정미순 문화시설팀장 임이슬 주무관
○ 2020년 제7회 여수시건축위원회 개최 결과 알림 ※ 허가민원과-57301호		’20.08.05.	김인옥 건축행정팀장 최정일 건축허가팀장 신정환 주무관
○ 여수 생활문화센터 설계공모 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-4523호		’20.06.18.	문승남 감사담당관 김태용 기술감사팀장 한태광 차장
○ 여수 생활문화센터 기본 및 실시설계용역 계약심사 결과 알림 ※ 회계과-29867호		’20.06.15.	박용일 회계과장 문인기 계약심사팀장 백대성 주무관
○ 공유재산 관리계획 의결 ※ 기획예산과-3119호		’20.02.19.	조인천 기획팀장 장명 의회법무팀장 박민선 주무관
○ 여수 생활문화센터 건립 건축기획 용역 계약체결 ※ 회계과-7867호		’20.02.14.	박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 김창희 주무관
○ 국고보조금 교부신청 ※ 문화예술과-2573호		’20.02.03.	김지선 문화예술과장 홍주성 문화예술팀장 김리라 주무관
○ 사업계획 사전검토 신청 ※ 문화예술과-1676호		’20.01.21.	김지선 문화예술과장 이상욱 문화산업팀장 김리라 주무관
○ 2019년 제1차 지방재정 투자 심사 반영(전라남도) ※ 기획예산과-19563호		’19.11.05.	나병곤 기획예산과장 이강 예산팀장 백기광 주무관
○ 생활SOC 복합화 사업 선정 ※ 기획예산과-17537호		’19.10.04.	나병곤 기획예산과장 문치곤 혁신전략팀장 이화석 주무관
○ 생활SOC 사업계획 수정 제출 ※문화예술과-15679호		’19.07.25.	김지선 문화예술과장 홍주성 문화예술팀장 장규현 주무관
○ 여수 생활문화센터 건립 공모사업 계획 ※ 문화예술과-14841호		’19.07.15.	권오봉 시장 서은수 부시장 김용필 관광문화교육국장 김지선 문화예술과장 (나병곤 기획예산과장 차미정 여성가족과장 최윤영 여성회관팀장 이 강 예산팀장 홍주성 문화예술팀장 장규현 주무관