정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업(민간자본보조)
② 추진배경	◦ 학교급식용 유기농 쌀의 일반쌀과의 혼합도정 문제 해결 ◦ 급격한 면적증가로 공급과잉이 예상되는 유기농 쌀의 수급방안 마련 ◦ 쌀 소비시장 변화대응 여수쌀 품질고급화 기초기반 마련 ◦ 유기농 쌀 소비시장별(학교/일반) 맞춤형 대응전략 추진
③ 사업개요	◦ 사업대상 : 여천농업협동조합 ◦ 사업위치 : 여수시 소라면 복산리 1125-2 외 3필지 ◦ 사 업 량 : 건축(644㎡), 도정능력(2.5톤/시간당) ◦ 주요설비 : 정미기, 석발기, 색채선별기, 자동포장기 등 30종
④ 사업부서	미래농업과		⑤ 담당자	미래농업과장 범인숙 주무관 이용혁
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	’20. 7.~’21. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업추진 방침결정 ※ 미래농업과-3165호(‘20.04.08.)		‘20.04.08.	권오봉 시장 서은수 부시장 윤혜옥 소장 윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 유기농 쌀 전용 도정시설 설치사업 예산(민간자본보조) 확보 ※ 제1회 추가경정예산 : 1,600백만원		‘20.06.17.
○ 보조금 교부결정 ※ 미래농업과-9469호(‘20.11.24.)		‘20.11.24.	권오봉 시장 서은수 부시장 윤혜옥 소장 윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 사고이월 검토보고 ※ 미래농업과-9941호(‘20.12.10.)		‘20.12.10.	권오봉 시장 서은수 부시장 윤혜옥 소장 윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 착수신고서 접수 ※ 미래농업과-2438호(‘21.03.17.)	‘21.03.17.	윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 보조금 선지급 ※ 미래농업과-2555호(‘21.03.19.)	‘21.03.19.	윤혜옥 소장 윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 사업계획 변경 신청(여천농협) ※ 미래농업과-3126호(‘21.04.07.)	‘21.04.07.	윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 사업계획 변경요청 검토결과보고 ※ 미래농업과-3160호(‘21.04.08.)	‘21.04.08.	윤혜옥 소장 윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 보조금 선지급(3차) ※ 미래농업과-3648호(‘21.04.22.)	‘21.04.22.	윤혜옥 소장 윤희순 과장 정남기 팀장 김가연 주무관
○ 사업기간 연장(여천농협) ※ 미래농업과-7399호(‘21.08.24.)	‘21.08.24.	범인숙 과장 최윤정 팀장 이용혁 주무관
○ 공사준공보고서 제출 ※ 미래농업과-10272호(‘21.12.07.)	‘21.12.07.	범인숙 과장 최윤정 팀장 이용혁 주무관
○ 건축물 사용승인 ※ 허가민원과-94662호(‘21.12.30.)	‘21.12.30.
○ 보조금 지급(4차) ※ 미래농업과-11014호(‘21.12.30.)	‘21.12.30.	범인숙 과장 최윤정 팀장 이용혁 주무관
○ 실적보고서 제출 ※ 미래농업과-65호(‘22.1.04.)	‘22.1.04.	범인숙 과장 최윤정 팀장 이용혁 주무관
○ 완료 및 정산검사 완료 ※ 미래농업과-118호(‘22.1.05.)	‘22.1.05.	범인숙 과장 최윤정 팀장 이용혁 주무관