정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	양지고가교 철거 및 평면교차로 정비공사
② 추진배경	고가기능이 상실된 양지고가교를 철거하여 도시 미관 개선 및 지역단절 해소
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 둔덕동 428 일원 ○ 사 업 량 : 고가교 철거 1개소(L= 290m, B= 15m) 평면교차로 정비 1식, 지하보도 1식 ○ 사 업 비 : 79억 원 ○ 공사기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.
④ 사업부서	도로시설관리과		⑤ 담당자		황보호
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘20. 1 ~ ’22. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 타당성조사용역 완료 ※ 회계과-57044호(2019. 11. 8.)		‘19. 11. 8.		문태선 단장 심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 실시설계용역 착수 ※ 회계과-26637호(2020. 5. 7.)		‘20. 5. 8.		문태선 단장 심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 신기술·특허공법 선정 ※ 도로시설관리과-18575호(2020. 7. 23.)		‘20. 7.23.		문태선 단장 심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 지하보도 개설공사 시행 ※ 도로시설관리과-24023호(2020. 9. 23.)		‘20. 9. 23.		권오봉 시장 서은수 부시장 문태선 단장 심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 실시설계용역 완료 ※ 회계과-55130호(2020. 10. 6.)		‘20. 10. 5.		심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 지하보도 개설공사 계약체결 ※ 회계과-62509호(2020. 11. 26.)		‘20. 11. 13.		심근하 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 2021년 상반기 정기인사		‘21. 1. 8.		주영근 과장 장현철 팀장 안병현 주무관
○ 2021년 하반기 정기인사		‘21. 7. 7.		주영근 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 양지고가교 정비사업 추진계획 수립 ※ 도로시설관리과-23738호(2021. 8. 30.)		‘21. 8. 30.		권오봉 시장 박현식 부시장 신윤옥 단장 주영근 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 시행 ※ 도로시설관리과-25791호(2021. 9. 17.)		‘21. 9. 17.		권오봉 시장 박현식 부시장 신윤옥 단장 주영근 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 공사 착공		‘21. 11. 12.		주영근 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 2022년 상반기 정기인사		‘22. 1. 10.		김인옥 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 양지고가교 철거 완료 (평면도로 정비공사 추진 중)		‘22. 4. 4.		김인옥 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 일시정지 (지장물 이설 지연)		‘22. 7. 1.		김인옥 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 2022년 하반기 정기인사		’22. 7. 25.		김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 일시정지 해제 및 설계변경(1회)		’22. 8. 16.		권오봉 시장 박현식 부시장 정재호 단장 김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 일시정지 (지장물 이설 지연)		’22. 10. 28.		정재호 단장 김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 일시정지 해제		’22. 11. 24.		정재호 단장 김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비 가로등, 신호등 설치공사 준공		’22. 12. 1.		김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 일시정지 해제 및 설계변경(2회)		’22. 12. 15.		정기명 시장 박현식 부시장 정재호 단장 김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관
○ 양지고가교 철거 및 평면도로 정비공사 준공(총괄 및 2차분)		’22. 12. 16.		김인옥 과장 차용석 팀장 황보호 주무관