정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지방상수도 현대화 사업
② 추진배경	노후로 발생되는 누수 및 탁수발생 등 주민 식생활 불편 해소하고 사업대상지 유수율 85%달성
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 급수구역 전지역 ○ 총사업비 : 513.4억원 (국비 256.7, 시비 256.7) ○ 사업규모 : 관로교체 L = 61.3㎞, 누수탐사 정비 L = 147.5㎞ 유지관리시스템 구축 1식, 상수관로 정밀조사 1식 ○ 사업기간 : ‛20. 1. ~‛25. 12.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설 7급 백종환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‛20. 1. ~‛25. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 2020년 지방상수도 현대화사업 신규 사업계획서 제출 ※ 상수도과-14572		‘19. 8. 6.		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비사업) 국비반영 ※ 상수도과-17601		‘19. 9. 23.		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 주무관
○ 노후 상수관로 정밀조사 지원사업 용역 발주 계획(안) 보고 ※ 상수도과-7454		‛20. 4. 14.		권오봉 시 장 서은수 부시장 정윤수 단 장 김동석 과 장 강 균 과 장 김희경 팀 장 전명수 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 지방상수도 현대화를 위한 여수시 노후 상수관망 정비사업 수행방식 및 추진계획 검토보고 ※ 상수도과-7443		‛20. 4. 14.		권오봉 시 장 서은수 부시장 정윤수 단 장 나병권 과 장 김동석 과 장 강 균 과 장 이 강 팀 장 김희경 팀 장 전명수 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비사업) 수행방식 및 추진계획 수립 ※ 상수도과-7453		‘20. 4. 14.		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 노후 상수관로 정밀조사 계약심사(전남도) 및 고시공고 ※ 상수도과-7556 (계약심사,전남도) ※ 상수도과-10445 (고시공고)		‛20. 5. 29		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 행정절차 이행 ※ 상수도과-11800 (추진계획)		‛20. 6. 18.		정윤수 단 장 강 균 과 장 백동선 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리(CM)용역 행정절차 이행 ※ 상수도과-11799 (추진계획) ※ 상수도과-13350 (계약심사)		‛20. 7. 10.		정윤수 단 장 강 균 과 장 백동선 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 노후 상수관로 정밀조사 계약 및 착수 ※ 상수도과-14377 (계약의뢰) ※ 상수도과-15608 (계약체결)		‛20. 8. 12		정윤수 단 장 오정환 과 장 김승주 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 행정절차 이행 ※ 상수도과-17984 (계약심사)		‛20. 9. 15.		정윤수 단 장 강 균 과 장 주영길 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리(CM)용역 계약 및 착수 ※ 상수도과-21051 (계약의뢰) ※ 상수도과-22500 (계약체결)		‛20. 11. 20.		정윤수 단 장 오정환 과 장 김승주 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 ※ 상수도과-21052 (계약의뢰) ※ 상수도과-23143 (계약체결)		‛20. 12. 1.		정윤수 단 장 오정환 과 장 김승주 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 실정사항에 따른 설계변경 검토보고 ※ 상수도과-18973		‘21. 9. 23		권오봉 시 장 박현식 부시장 김지선 단 장 오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 노후 상수관로 정밀조사 용역 준공검사 ※ 수도행정과-13074		‘21. 11. 17		오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 소블록 유량계 설치공사 계약 및 착수 ※ 상수도과-21802 (계약의뢰) ※ 상수도과-22486 (계약체결)		‘21. 11. 18		오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 유량계실 설치공사 계약 및 착수 ※ 상수도과-23997 (집행계획) ※ 상수도과-24073 (계약심사) ※ 상수도과-24477 (계약의뢰) ※ 상수도과-26006 (계약체결)		‘21. 12. 6		오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 경제성 검토용역 등 2건 행정절차 이행 ※ 상수도과-11939 (시행) ※ 상수도과-11983 (계약의뢰)		‘22. 5. 24		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 우선사업대상 선정 협의 ※ 상수도과-13553 (시행)		‘22. 6. 15		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 설계변경 ※ 상수도과-22112 (검토보고) ※ 상수도과-22148 (계약의뢰) ※ 상수도과-11804 (계약체결)		‘22. 10. 12		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 선금 추가 지급 결정 통보 ※ 수도행정과-12964		‘22. 11. 9.		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 실정사항에 따른 일시정지 검토보고 ※ 상수도과-25679 (검토보고) ※ 상수도과-25686 (계약의뢰) ※ 수도행정과-13126 (계약체결)		‘22. 11. 11.		한광민 단 장 주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유량계실 설치공사 실정사항에 따른 검토보고 ※ 상수도과-27248 (검토보고) ※ 상수도과-27347 (계약의뢰) ※ 수도행정과-14040 (계약체결)		‘22. 12. 5.		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화 사업 사전기술검토 완료에 따른 사업 추진 계획보고		‘23. 1. 12		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화 사업 기본 및 실시설계 용역 실정사항에 따른 일시정지 해지 검토보고		‘23. 1. 18		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 공정만회대책 등 회의개최 계획		‘23. 3. 2		김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○「여수시 지방상수도 현대화사업 유량계실 설치공사」 실정사항에 따른 설계변경 검토보고		‘23. 4. 24		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 발주방식 및 추진계획 보고		‘23. 5. 2		정기명 시 장 김종기 부시장 김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ ｢여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템｣ 계약심의 위원회 심의결과 등 계약방법 검토 보고		‘23. 5. 18		정기명 시 장 김종기 부시장 김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역」준공검사 결과보고		‘23. 5. 31		정준호 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역」사업수행평가 소위원회 운영 및 안건 상정 및 결과보고		‘23. 6. 7. ~ 8.		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망정비공사 등 3건 일상감사 요청		‘23. 6. 12		김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축사업 보안성 검토 신청		‘23. 6. 16		김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사용역」사업수행능력평가위원회 구성등 계획보고		‘23. 7. 14		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리 용역 물가변동으로 인한 계약금액(1,2회) 조정 ※ 여지현-2023-99(접수) ※ 상수도과-18723(검토보고) ※ 상수도과-9979(결과통보) ※ 상수도과-23392(변경계약의뢰) ※ 수도행정과-12527(변경계약체결)		‘23. 7. 3.		김종기 부시장 오정환 단 장 최재영 과 장 명미숙 팀 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 블록구축 및 관망정비공사 도로관리심의회 심의 신청 ※ 상수도과-18595(도로점용 신청) ※ 도로시설관리과-19818(결과회신)		‘23. 7. 28.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사용역 계약의뢰 ※ 상수도과-18754(계약의뢰) ※ 수도행정과-11223(계약체결)		‘23. 7. 31.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망정비공사 계약의뢰(조달청) ※ 상수도과-21303(계약의뢰) ※ 상수도과-18723(검토보고) ※ 상수도과-9979(결과통보) ※ 상수도과-23392(변경계약의뢰) ※ 수도행정과-12527(변경계약체결)		‘23. 9. 1.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관