정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지방상수도 현대화 사업
② 추진배경	노후로 발생되는 누수 및 탁수발생 등 주민 식생활 불편 해소하고 사업대상지 유수율 85% 달성
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 급수구역 전지역 ○ 총사업비 : 513.5억원 (국비 256.7, 시비 256.8) ○ 사업규모 : 관로교체 L = 61.3㎞, 누수탐사 정비 L = 147.5㎞ 유지관리시스템 구축 1식, 상수관로 정밀조사 1식 ○ 사업기간 : ‛20. 1. ~‛26. 12.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설 7급 최영민 시설 5급 이광재
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‛20. 1. ~‛26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 2020년 지방상수도 현대화사업 신규 사업계획서 제출 ※ 상수도과-14572		‘19. 8. 6.		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비사업) 국비반영 ※ 상수도과-17601		‘19. 9. 23.		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 주무관
○ 노후 상수관로 정밀조사 지원사업 용역 발주 계획(안) 보고 ※ 상수도과-7454		‛20. 4. 14.		권오봉 시 장 서은수 부시장 정윤수 단 장 김동석 과 장 강 균 과 장 김희경 팀 장 전명수 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 지방상수도 현대화를 위한 여수시 노후 상수관망 정비사업 수행방식 및 추진계획 검토보고 ※ 상수도과-7443		‛20. 4. 14.		권오봉 시 장 서은수 부시장 정윤수 단 장 나병권 과 장 김동석 과 장 강 균 과 장 이 강 팀 장 김희경 팀 장 전명수 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 지방상수도 현대화사업 (노후 상수관망 정비사업) 수행방식 및 추진계획 수립 ※ 상수도과-7453		‘20. 4. 14.		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 노후 상수관로 정밀조사 계약심사(전남도) 및 고시공고 ※ 상수도과-7556 (계약심사,전남도) ※ 상수도과-10445 (고시공고)		‛20. 5. 29		강 균 과 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 행정절차 이행 ※ 상수도과-11800 (추진계획)		‛20. 6. 18.		정윤수 단 장 강 균 과 장 백동선 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리(CM)용역 행정절차 이행 ※ 상수도과-11799 (추진계획) ※ 상수도과-13350 (계약심사)		‛20. 7. 10.		정윤수 단 장 강 균 과 장 백동선 팀 장 주영길 팀 장 김준권 차 장
○ 노후 상수관로 정밀조사 계약 및 착수 ※ 상수도과-14377 (계약의뢰) ※ 상수도과-15608 (계약체결)		‛20. 8. 12		정윤수 단 장 오정환 과 장 김승주 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 행정절차 이행 ※ 상수도과-17984 (계약심사)		‛20. 9. 15.		정윤수 단 장 강 균 과 장 주영길 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리(CM)용역 계약 및 착수 ※ 상수도과-21051 (계약의뢰) ※ 상수도과-22500 (계약체결)		‛20. 11. 20.		정윤수 단 장 오정환 과 장 김승주 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 ※ 상수도과-21052 (계약의뢰) ※ 상수도과-23143 (계약체결)		‛20. 12. 1.		정윤수 단 장 오정환 과 장 김승주 팀 장 김 혁 차 장
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 실정사항에 따른 설계변경 검토보고 ※ 상수도과-18973		‘21. 9. 23		권오봉 시 장 박현식 부시장 김지선 단 장 오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 노후 상수관로 정밀조사 용역 준공검사 ※ 수도행정과-13074		‘21. 11. 17		오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 지방상수도 현대화사업 소블록 유량계 설치공사 계약 및 착수 ※ 상수도과-21802 (계약의뢰) ※ 상수도과-22486 (계약체결)		‘21. 11. 18		오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 유량계실 설치공사 계약 및 착수 ※ 상수도과-23997 (집행계획) ※ 상수도과-24073 (계약심사) ※ 상수도과-24477 (계약의뢰) ※ 상수도과-26006 (계약체결)		‘21. 12. 6		오정환 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 경제성 검토용역 등 2건 행정절차 이행 ※ 상수도과-11939 (시행) ※ 상수도과-11983 (계약의뢰)		‘22. 5. 24		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 우선사업대상 선정 협의 ※ 상수도과-13553 (시행)		‘22. 6. 15		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 설계변경 ※ 상수도과-22112 (검토보고) ※ 상수도과-22148 (계약의뢰) ※ 상수도과-11804 (계약체결)		‘22. 10. 12		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 선금 추가 지급 결정 통보 ※ 수도행정과-12964		‘22. 11. 9.		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방 상수도 현대화사업 실정사항에 따른 일시정지 검토보고 ※ 상수도과-25679 (검토보고) ※ 상수도과-25686 (계약의뢰) ※ 수도행정과-13126 (계약체결)		‘22. 11. 11.		한광민 단 장 주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유량계실 설치공사 실정사항에 따른 검토보고 ※ 상수도과-27248 (검토보고) ※ 상수도과-27347 (계약의뢰) ※ 수도행정과-14040 (계약체결)		‘22. 12. 5.		주영근 과 장 황용순 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화 사업 사전기술검토 완료에 따른 사업 추진 계획보고		‘23. 1. 12		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화 사업 기본 및 실시설계 용역 실정사항에 따른 일시정지 해지 검토보고		‘23. 1. 18		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역 공정만회대책 등 회의개최 계획		‘23. 3. 2		김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○「여수시 지방상수도 현대화사업 유량계실 설치공사」실정사항에 따른 설계변경 검토보고		‘23. 4. 24		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 발주방식 및 추진계획 보고		‘23. 5. 2		정기명 시 장 김종기 부시장 김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ ｢여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템｣ 계약심의 위원회 심의결과 등 계약방법 검토 보고		‘23. 5. 18		정기명 시 장 김종기 부시장 김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역」준공검사 결과보고		‘23. 5. 31		정준호 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사 용역」사업수행평가 소위원회 운영 및 안건 상정 및 결과보고		‘23. 6. 7. ~ 8.		김태횡 단 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망정비공사 등 3건 일상감사 요청		‘23. 6. 12		김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축사업 보안성 검토 신청		‘23. 6. 16		김정남 과 장 유재영 팀 장 정준호 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사용역」사업수행능력평가위원회 구성 등 계획보고		‘23. 7. 14		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리 용역 물가변동으로 인한 계약금액(1,2회) 조정 ※ 여지현-2023-99(접수) ※ 상수도과-18723(검토보고) ※ 상수도과-9979(결과통보) ※ 상수도과-23392(변경계약의뢰) ※ 수도행정과-12527(변경계약체결)		‘23. 7. 3.		김종기 부시장 오정환 단 장 최재영 과 장 명미숙 팀 장 김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 블록구축 및 관망정비공사 도로관리심의회 심의 신청 ※ 상수도과-18595(도로점용 신청) ※ 도로시설관리과-19818(결과회신)		‘23. 7. 28.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 관망운영관리 및 누수탐사용역 계약의뢰 ※ 상수도과-18754(계약의뢰) ※ 수도행정과-11223(계약체결)		‘23. 7. 31. ~9. 4.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망정비공사 계약의뢰(조달청) - 상수도과-21303(계약의뢰) `23. 9. 1. - 계약체결(2023. 12. 21.)		‘23. 9. 1.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템설치 관급자재(계장제어장치) 구매 - 행정절차이행 : 2023. 4. 18.~5.15. - 계약의뢰 : 2023. 6. 22. - 구매협의 : 2023. 8. 22. - 계약체결 : 2023. 12. 7.(수도행정과-15452)		`23. 6. 22.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 폐기물처리용역 계약의뢰 - 계약심사요청 : 2023. 9. 7. - 계약심사회신 : 2023. 9. 11. - 계약체결 : 2023. 12. 26.		‘23. 11. 30.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 GIS-DB 구축용역 계약의뢰(조달청 제안서평가) - 계약체결 : 2024. 2. 13.		`23. 11. 8.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템설치공사 계약의뢰 - 계약체결 : `23. 12. 26.		`23. 11. 30.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템설치공사 재해예방 기술지도 용역 시행 - 계약체결 : 2023. 12. 26.		`23. 12. 21.		김정남 과 장 유재영 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 검측업무지침 승인 알림		`24. 3. 14.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 안전관리계획서 승인 알림		`24. 4. 18.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 품질관리계획서 승인 알림		`24. 4. 22.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 공사안전보건대장 승인		`24. 5. 2.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 도로점용(굴착) 허가 신청 - 허가완료: 2024. 5. 9.		`24. 5. 7.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 안전점검 수행기관 지정 - 신청 : 2024. 6. 11. - 공고 : 2024. 6. 13. - 결과보고 : 2024. 6. 25. - 지정통보 : 2024. 6. 26.		`24. 6. 26.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 건설기계 안전, 규격 검토 대장 조건부 승인 - 1차 : 2024. 6. 12. - 2차 : 2024. 6. 18. - 3차 : 2024. 7. 8. - 4차 : 2024. 8. 16. - 5차 : 2024. 10. 17.		`24. 6. 11.		장현철 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리 용역 물가변동으로 인한 계약금액(3,4회) 조정 ※ 2024. 7. 12. : 계약금액 조정 신청 ※ 2024. 7. 12. : 검토요구 ※ 2024. 7. 18. : 검토용역 시행 ※ 2024. 8. 13. : 검토용역 완료 ※ 2024. 8. 19. : 검토보고 ※ 2024. 8. 21. : 검토결과 회신 ※ 2024. 8. 21. : 결과알림(수도행정과)		‘24. 8. 21.		최정기 부시장 김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」하도급계약 ※ 2024. 7. 29. : 하도급 검토보고(감리단) ※ 2024. 7. 29. : 검토요청(수도행정과) ※ 2024. 7. 29. : 검토보고 ※ 2024. 7. 31. : 검토회신		‘24. 7. 29.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 공동수급체 중도탈퇴에 따른 검토 ※ 2024. 7. 24. : 검토요구(수도행정과) ※ 2024. 7. 26. : 감리단의견 회신 ※ 2024. 7. 29. : 검토보고 ※ 2024. 7. 31. : 검토회신(수도행정과)		`24. 7. 31.		김문환 단 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 설계변경(총괄 및 1차분) ※ 2024. 7. 26. : 변경도서 제출 ※ 2024. 8. 2. : 검토보고 ※ 2024. 8. 6. : 검토회신 ※ 2024. 8. 6. : 변경통보		`24. 8. 6.		김문환 단 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 사토발생 반입협의 ※ 2024. 7. 6. : 사용여부조회(전부서) ※ 2024. 8. 12. : 반입요청-자원시설과 ※ 2024. 8. 12. : 반입승인		‘24. 8. 12.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 품질시험 계획 변경 ※ 2024. 8. 30. : 변경요청 ※ 2024. 8. 30. : 검토보고 ※ 2024. 8. 30. : 승인통보		`24. 8. 30.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리용역」 설계변경(물가변동 및 인력배치조정) ※ 2024. 8. 23. : 변경도서 제출 ※ 2024. 8. 27. : 검토보고 ※ 2024. 8. 30. : 변경계약의뢰 ※ 2024. 9. 2. : 변경사항 통보		`24. 9. 2.		김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리용역」 실정보고(직접경비 정산) ※ 2024. 9. 4. : 실정보고 접수 ※ 2024. 9. 10. : 검토보고 ※ 2024. 9. 11. : 승인통보		`24. 9. 11.		김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 최우진 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 안전관리 계획서(REV-1)승인요청 ※ 2024. 9. 30. : 변경요청 접수 ※ 2024. 10. 2. : 검토보고 ※ 2024. 10. 2. : 승인통보		`24. 10. 2.		최우진 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 도로점용(굴착) 허가 신청 2차 - 허가완료: 2024. 10. 8.		`24. 9. 26.		최우진 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 도로점용 허가(국유재산 대부신청) ※ 허가완료: 2024. 10. 14.		`24. 10. 4.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리용역」 실정보고(전담 안전관리자, 전기감리원, 준공기한 연장) ※ 2024. 9. 20. : 실정보고 접수 ※ 2024. 9. 30. : 검토보고 ※ 2024. 10. 4. : 승인사항통보		`24. 10. 4.		김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 최우진 팀 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 실정보고(아스콘 인도조건) ※ 2024. 9. 20. : 실정보고 접수 ※ 2024. 9. 30. : 검토보고 ※ 2024. 10. 4. : 승인통보		`24. 10. 4.		최정기 부시장 김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 최우진 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 실정보고(휴일 및 야간작업) ※ 2024. 10. 7. : 실정보고 접수 ※ 2024. 10. 8. : 승인통보 - 2024. 10. 15. : 결과보고(10.12.) - 2024. 10. 21. : 결과보고(10.21.)		`24. 10. 8.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」하도급계약 변경 ※ 2024. 10. 17. : 변경 검토보고(감리단) ※ 2024. 10. 16. : 검토요청(수도행정과) ※ 2024. 10. 18. : 검토보고 ※ 2024. 10. 18. : 검토회신 ※ 2024. 10. 18. : 검토 적정알림		‘24. 10. 18.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 실정보고(제수밸브보호통) ※ 2024. 10. 21. : 실정보고 접수 ※ 2024. 10. 23. : 검토보고 ※ 2024. 10. 24. : 승인통보		`24. 10. 24.		최우진 팀 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 실정보고(GPR탐사) ※ 2024. 10. 23. : 실정보고 접수 ※ 2024. 10. 31. : 검토보고 ※ 2024. 11. 1. : 승인통보		`24. 11. 1.		이광재 과 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 안전관리 계획서(REV-2)승인 ※ 2024. 10. 31. : 변경요청 접수 ※ 2024. 11. 4. : 검토보고 ※ 2024. 11. 7. : 승인통보		`24. 11. 7.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사 도로점용(굴착) 허가 신청 3차 - 허가완료: 2024. 11.25.		`24. 11. 25.		최우진 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 실정보고(설계서의 오류) ※ 2024. 11. 13. : 실정보고 접수 ※ 2024. 11. 18. : 검토보고		`24. 11. 18.		이광재 과 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 실정보고(복합패널밸브실, 감압밸브) ※ 2024. 11. 29. : 실정보고 접수 ※ 2024. 12. 5. : 검토보고		`24. 12. 5.		이광재 과 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 실정보고(가설사무실) ※ 2024. 12. 5: 실정보고 접수 ※ 2024. 12. 6. : 검토보고		`24. 12. 6.		이광재 과 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(1차분, 1회)」 기성금 지급 ※ 2024. 12. 13. : 기성계 접수 ※ 2024. 12. 20. : 기성금 지급 결정		`24. 12. 6.		이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 2차분 시행 ※ 2024. 12. 17 : 시행계획 보고 ※ 2024. 12. 17. : 계약의뢰 ※ 2024. 12. 18. : 계약체결		`24. 12. 18.		정기명 시 장 최정기 부시장 김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리용역」설계변경(총괄3회, 1차분 3회) ※ 2024. 12. 3. : 설계변경 요청(감리단) ※ 2024. 12. 23. : 검토보고 ※ 2024. 12. 24. : 변경계약 의뢰 ※ 2024. 12. 24. : 변경계약 체결		`24. 12. 24.		최정기 부시장 김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(총괄 및 1차분)」 기간연장 ※ 2024. 12. 11. : 연기신청 검토(감리단) ※ 2024. 12. 19. : 검토보고 ※ 2024. 12. 19. : 변경 계약의뢰 ※ 2024. 12. 26. : 변경 계약체결		`24. 12. 26.		김문환 단 장 박영춘 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 전명수 팀 장 백종환 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사」 물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회) ※ 2025. 1. 14. : 검토보고		`25. 1. 14.		정기명 시 장 최정기 부시장 김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(1차분 및 2차분)」하도급계약 ※ 2025. 2. 3. : 하도급 검토보고(감리단) ※ 2025. 2. 3. : 검토요청(수도행정과) ※ 2025. 2. 10. : 검토보고 ※ 2025. 2. 11. : 검토회신		`25. 2. 11.		이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리용역」설계변경(총괄 4회, 1차분 4회) ※ 2025. 3. 2.. : 검토보고(감리단) ※ 2025. 3. 4.. : 검토보고 ※ 2025. 3. 4.. : 변경계약 의뢰 ※ 2025. 3. 5.. : 변경계약 체결		`25. 3. 5.		이광재 과 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 건설사업관리용역」2차분 시행 ※ 2025. 3. 6. : 시행계획 보고 ※ 2025. 3. 7. : 계약의뢰 ※ 2025. 3. 7. : 계약체결		`25. 3. 7.		정기명 시 장 최정기 부시장 김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(총괄 및 1차분)」 기간연장 ※ 2025. 3. 12. : 연기신청 검토(감리단) ※ 2025. 3. 14 : 검토보고 ※ 2025. 3. 14 : 변경계약 의뢰 ※ 2025. 3. 14 : 변경계약 체결		`25. 3. 14.		김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(총괄 및 2차분)」 기간연장 ※ 2025. 5. 28. : 연기신청 검토(감리단) ※ 2025. 5. 29 : 검토보고 ※ 2025. 5. 30 : 변경계약 의뢰 ※ 2025. 6. 9 : 변경계약 체결		`25. 6. 9.		김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(1차분)」 준공 ※ 2025. 7. 8. : 준공검사 ※ 2025. 7. 21. : 준공정산 결과보고		`25. 7. 8.		이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(총괄 및 2차분)」 일시정지 ※ 2025. 8. 8. : 검토보고 ※ 2025. 8. 11. : 일시정지 요청 ※ 2025. 8. 12. : 공사 일시정지		`25. 8. 12.		김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(총괄 및 2차분)」 일시정지 해지 ※ 2025. 8. 21. : 검토보고 ※ 2025. 8. 22. : 일시정지 해지 요청 ※ 2025. 8. 25. : 공사 일시정지해지		`25. 8. 25.		김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관
○ 「여수시 지방상수도 현대화사업 블록구축 및 관망 정비공사(총괄 및 2차분)」 기간연장 ※ 2025. 9. 4. : 실정보고(감리단) ※ 2025. 9. 9. : 검토보고 ※ 2025. 9. 10. : 변경계약 의뢰 ※ 2025. 9. 11. : 변경계약 체결		`25. 9. 11.		김문환 단 장 윤국한 과 장 정은성 팀 장 이광재 과 장 최상록 팀 장 최영민 주무관