정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명

진남테니스장 기능보강 사업

② 추진배경

○ 국제·국내개최를 위한 국제공인 제반시설 정비

○ 생활체육 활성화를 위한 공공체육시설 확충 및 인프라 확충

③ 사업개요

○ 사업위치 : 여수시 진남체육관길 74

○ 사업내용 : 진남테니스장(클레이 6면) 기능보강

구분	코트수	면적(㎡)	비고
메인코트	하드코트 1면	282.41
실내코트	하드코트 4면	2,993.3	막구조

○ 총사업비 : 4,600백만원(균특 1,200 시비 3,400)

○ 사업기간 : 2019. 1. ～ 2020. 9.

④ 사업부서

여수시청 체육지원과

⑤ 담당자

행정5급 류성식

시설6급 하성준

시설7급 위성현

시설9급 임예은

⑥ 선정기준

10억 원 이상 사업

⑦ 사업기간

‘19.01.~’20.09.

<그간 주요 추진내용>

○ 공사 준공

※ 체육지원과-11900(‘20.09.04.)

‘20.09.04.

류성식 체육지원과장

하성준 체육시설팀장

임예은 주무관

○ 케미컬코트 설치 완료

※ 체육지원과-10574(‘20.08.06.)

‘20.08.05.

류성식 체육지원과장

하성준 체육시설팀장

위성현 주무관

○ 소방공사 준공

※ 체육지원과-8543(‘20.06.26.)

‘20.06.24.

서채훈 체육지원과장

하성준 체육시설팀장

서정문 주무관

○ 전기공사 준공

※ 체육지원과-8541(‘20.06.26.)

‘20.06.23.

서채훈 체육지원과장

하성준 체육시설팀장

서정문 주무관

○ 변경계약(건축, 3회) 체결 ※ 회계과-35881(‘20.06.18.)	‘20.06.18.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 오병구 계약2팀장 조민아 차장
○ 막구조 제작설치 완료 ※ 체육지원과-7198(‘20.05.29.)	‘20.05.29.	서채훈 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 임예은 주무관
○ 테니스코트 공인검증(2차) ※ 대한테니스협회-1521(‘20.05.18.)	‘20.05.20.	곽용운 회장 노영수 사무처장 이성재 대리
○ 통신공사 준공 ※ 체육지원과-6736(‘20.5.20.)	‘20.05.12.	서채훈 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 이영곤 주무관
○ 변경계약(건축, 2회) 체결 ※ 회계과-25900(‘20.05.04.)	‘20.05.04.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 조민아 차장
○ 변경계약(막구조, 2회) 체결 ※ 회계과-25577(‘20.05.01.)	‘20.05.01.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 김영선 주무관
○ 스포츠조명설비 준공 ※ 체육지원과-5855(‘20.04.29.)	‘20.04.27.	서채훈 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 서정문 주무관
○ 설계변경 계약심사 완료 ※ 회계과-24242(‘20.04.24.)	‘20.04.24.	박은규 회계과장 한숙영 계약심사팀장 백현철 주무관
○ 변경계약(막구조, 1회) 체결 ※ 회계과-13409(‘20.03.11.)	‘20.03.02.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 김영선 주무관
○ 테니스코트 공인검증(1차) ※ 체육지원과-1576(‘20.02.03.)	‘20.01.31.	서채훈 체육지원과장 하성준 시설팀장 위성현 주무관

○ 변경계약(건축, 1회) 체결 ※ 회계과-68344(‘19.12.26.)	‘19.12.26.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관
○ 공사계약 및 착공 ※ 회계과-40909(‘19.08.12.)	‘19.8.12.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관
○ 기술자문심의 ※ 건설과-10587(‘19.08.09.)	‘19.8.9.	주영근 건설과장 윤대근 지역개발팀장 백종환 주무관
○ 공사 계약 심사 ※ 전남도회계과-33746(‘19.07.16.)	‘19.6.18.	이종희 회계과장 정윤수 계약심사팀장 이중호 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 준공 ※ 회계과-30367(‘19.06.18.)	‘19.6.18.	서채훈 체육지원과장 하성준 시설팀장 신현식 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 최종보고회 ※ 체육지원과-6937호(‘19.06.17.)	‘19.6.14.	양기원 행정안전국장 서채훈 체육지원과장 하성준 체육시설팀장 신현식 주무관
○ 일상감사 ※ 감사담당관-4605호(‘19.06.12.)	‘19.6.12.	문승남 감사담당관 김태용 기술감사팀장 윤창열 주무관
○ 건축위원회(구조) 서면심의(도) ※ 전남도건축개발과-8462호(‘19.05.27.)	‘19.5.27.	김태식 도 건축개발과장 정영수 도 건축관리팀장 방영홍 도 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약 ※ 회계과-63843호(‘18.12.31.)	‘18.12.31.	양기원 행정안전국장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 김성욱 주무관
○ 설계용역 방침결재 ※ 체육지원과-13513호(‘18.10.05.)	‘18.10.05.	고재영 부시장 양기원 행정안전국장 김상태 체육지원과장 김동호 체육시설팀장 신현식 주무관