중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	돌산읍 임포~죽포 도로 확장공사
② 추진배경	돌산읍 죽포~임포간 굴곡 위험도로 구간에 대해 선형개량 및 확장을 통해 주민 및 관광객 교통편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 돌산읍 임포~죽포일원 ○ 사 업 량 : L=858m, B=10m ○ 사 업 비 : 5,300백만원 (공사 3,366, 보상 등 1,934)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 문태영 시설5급 오정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘19. 11. ~‘22. 10.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행 ※ 도로과-511호		‘18.1.15.		최종선 부시장 조일수 국장 장두한 과장 김기채 과장 장지문 팀장 서범규 팀장 황규석 차장
○ 소규모 환경영향평가 용역 시행 ※ 도로과-5489호		‘18. 5.16.		김기채 과장 장두한 회계과장 홍주성 계약2팀장 서범규 팀장 황규석 차장
○ 도로구역결정을 위한 인․허가 협의 ※ 도로과-822호		‘19.1.21.		서유권 과장 이영호 팀장 주기옥 차장
○ 도로구역결정 및 지형도면 고시 ※ 도로과-7481호		‘19.6.14.		서유권 과장 이영호 팀장 주기옥 차장
○ 공사시행 ※ 도로과-11561호		‘19.9.18.		권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 박은규 과장 서유권 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 임영수 주무관

○ 공사착공 ※ 도로과-14198호	‘19.11.18.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 편입용지 및 지장물 실태조사 계획 알림 ※ 도로과-15977호	‘19.12.26.	서유권 과장 이덕연 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-16009호	‘19.12.26.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-830호	‘20. 1.20.	서유권 과장 이덕연 팀장 임영수 주무관 장문희 실무원
○ 토지이동(등록사항정정)신청 ※ 도로과-3421호	‘20. 3.11.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 토지이동(분할)신청 ※ 도로과-5664	‘20. 4.25.	서유권 과장 이영호 팀장 이덕연 팀장 임영수 주무관
○ 토지이동(등록사항 정정) 신청 재협조 ※ 도로과-9733	‘20. 7.21.	강 균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 암파쇄 방호시설 실정보고에 따른 검토보고 ※ 도로과-10051	‘20. 7.21.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 조계윤 과장 강 균 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 편입토지 등에 대한 등기수수료 집행 ※ 도로과-9883	‘20. 7.24.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원
○ 총괄 및 1차분 등 2건 일시정지 해지에 따른 준공예정일 변경 알림 ※ 도로과-10173 ※ 회계과-44639	‘20. 7.30.	김용필 국장 신윤옥 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 임영수 주무관 김동승 주무관
○ 사토발생에 따른 사용여부 조회 ※ 도로과-11374, 11379	‘20. 8.27.	강 균 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○「돌산읍 임포~죽포 도로확장 공사 (1차분)」기성대가(1회) 확정 통보 ※ 도로과-15874	‘20. 12.11.	이영호 팀장 임영수 주무관
○ 2021년 제1회 지방토지수용위원회 수용재결 신청(돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사) ※ 도로과-16037	‘20. 12.18.	장세길 국장 강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원
○ 토지수용 재결신청서 열람공고 (돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사) ※ 도로과-303	‘21. 1.11.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원
○ 토지수용재결신청에 따른 열람공고 게시 알림(돌산읍 임포~죽포간 도로 확장공사) ※ 도로과-304	‘21. 1.11.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원
○「돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사」 편입토지 손실보상비 집행 ※ 도로과-503	‘21. 1.14.	강 균 과장 김희신 팀장 장문희 실무원 황보호 주무관
○「돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사」 2차분 시행 ※ 도로과-3758	‘21. 3.24.	권오봉 시장 서은수 부시장 임광건 국장 조계윤 과장 강 균 과장 오병구 팀장 김정남 팀장 황보호 주무관
○ 「돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사(2차분)」계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-18137	‘21. 4.12.	강 균 과장 황보호 주무관
○ 착공계(돌산읍 임포~죽포 도로확장공사(2차분)) ※ 도로과-4704	‘21. 4.19.	강 균 과장 황보호 주무관
○ 「돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사(총괄 및 1·2차분)」변경계약 의뢰 ※ 도로과-5459	‘21. 5. 6.	강 균 과장 김정남 팀장 황보호 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 토지수용재결에 따른 공탁(경정) 수수료 집행 ※ 도로과-7800	‘21. 6. 29.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 김희신 팀장 장문희 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 토지수용재결에 따른 공탁(경정) 수수료 집행 ※ 도로과-8844	‘21. 7. 22.	강 균 과장 김정아 팀장 장문희 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 (2차분) 기성검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-15056	‘21. 12. 28.	문태영 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 (총괄분)외 1건 변경계약 체결알림 ※ 도로과-5069	‘22. 5. 6.	문태영 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 (3차분)착공계 ※ 도로과-5451	‘22. 5. 16.	문태영 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 관급자재 단가인상 반영 검토보고 ※ 도로과-6570	‘22. 6. 13.	문태영 주무관 명호남 팀장 오정환 과장 오병구 팀장 조계운 과장 문인기 국장 박현식 부시장
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 외 1건 변경계약 의뢰 ※ 도로과-8584	‘22. 8. 2.	문태영 주무관 전명수 팀장 김정아 팀장
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 외 1건 변경계약 체결알림 ※ 도로과-8975, 회계과-39172	‘22. 8. 12.	문태영 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 통신선로 이설공사 시행 ※ 도로과-10970	‘22. 9. 30.	문태영 주무관 배도선 팀장 오정환 과장
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 설계변경 검토보고 및 변경계약 의뢰 ※ 도로과-11162, 11212	‘22. 10. 6.	문태영 주무관 배도선 팀장 오정환 과장
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 외 1건 변경계약 체결알림 ※ 도로과-11430, 회계과-48454	‘22. 10. 13.	문태영 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 준공계 접수 및 준공검사공무원 지정 ※ 도로과-11565, 회계과-48459	‘22. 10. 14.	문태영 주무관
○ 돌산읍 임포~죽포간 도로확장공사 정산준공 검토보고 및 준공 ※ 도로과-12378	‘22. 11. 2.	문태영 주무관 배도선 팀장 오정환 과장