중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	묘도 창촌IC 진입도로 개설
② 추진배경	창촌IC에 상․하행선 진․출입로가 없어 주민들이 불편을 겪고 있어 진․출입도로를 개설하여 주민교통편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 묘도 창촌 IC일원 ○ 사 업 량 : L=202m, B=5m(양안) ○ 사 업 비 : 1,650백만원 (설계 및 공사 1,309, 보상 등 341)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 박성원 시설5급 오정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘19. 1. ~‘21. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행 ※ 도로과-705호		‘19. 1.16.		김기채 국장 박은규 과장 서유권 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 주기옥 차장
○ 실시설계용역 준공 ※ 도로과-10464호		‘19. 8.26.		서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 실시계획인가 신청 ※ 도로과-10849호		‘19. 9. 2.		서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 일상감사 조치결과 제출 ※ 도로과-11417호		‘19. 9.16.		서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 사업인정에 관한 의견청취 결과 제출 ※ 도로과-13090호		‘19.10.23.		서유권 과장 이영호 팀장, 이덕연 팀장 문지환 주무관, 임영수 주무관
○ 기술자문 요청 ※ 도로과-13598호		‘19.11. 5.		서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 기술자문에 따른 조치결과 제출 ※ 도로과-14350호		‘19.11.21.		서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관

○ 실시계획인가 협의의견 조치계획 제출 ※ 도로과-14966호	‘19.12. 4.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-15542호	‘19.12.17.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 가로등 관련 협의 ※ 도로과-15538호	‘19.12.17.	서유권 과장 이영호 팀장 임영수 주무관
○ 지적측량 수수료 집행 ※ 도로과-2411호	‘20.2.24.	서유권 과장 이영호 팀장 강성수 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-3019호	‘20.3. 5.	서유권 과장 이영호 팀장 강성수 주무관
○ 보상계획 열람공고 게시 의뢰 ※ 도로과-4019호	‘20.3.22.	서유권 과장 이영호 팀장 송문종 차장 강성수 주무관 문지환 주무관
○ 편입 토지 등 손실보상비 집행 ※ 도로과-6055	‘20.5.6.	장세길 국장 박은규 과장 서유권 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 이덕연 팀장 강성수 주무관 문지환 주무관
○ 일상감사 의뢰 ※ 도로과-7431	‘20.6.4.	서유권 과장 이영호 팀장 강성수 주무관
○ 일상감사 결과통보 ※ 도로과-7520 ※ 감사담당관-4302	‘20.6.8.	주원평 차장 김태용 팀장 문승남 감사담당관 임영수 주무관 강성수 주무관
○ 폐기물 처리용역 계약의뢰 ※ 도로과-9601	‘20.7.20.	강 균 도로과장 이영호 도로계획팀장 유재영 차장
○ (총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 도로과-10814	‘20.8.14.	김용필 국장 강 균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 유재영 차장 김동승 주무관
○ 폐기물처리용역 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 도로과-11384	‘20.8.27.	강 균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 유재영 차장 심미연 주무관
○ (총괄 및 1차분) 일시정지 검토요청 ※ 도로과-12117	‘20.9.16.	강 균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 유재영 차장 김동승 주무관
○ 토지수용재결신청에 따른 열람공고 게시 의뢰 ※ 도로과-13039	‘20.10.8.	강 균 과장 김희신 팀장 송문종 차장 문지환 주무관
○ 토지수용재결신청에 따른 열람공고 결과 제출 ※ 도로과-13807	‘20.10.27.	강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 2020년도 제6회 지방토지수용위원회 심의·재결을 위한 조서 제출 ※ 도로과-14641	‘20.11.16.	강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 2020년도 제6회 지방토지수용위원회 재결서 공시송달 공고 ※ 도로과-15801	‘20.12.14.	강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 묘도 창촌IC 진출입도로 개설공사 편입 토지 손실 보상비 집행 ※ 도로과-183	‘21.1.6.	강 균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 묘도 창촌IC 진출입도로 개설공사 (전기) 계약의뢰 ※ 도로과-2750	‘21.3.8.	강 균 과장 김정남 팀장 정준호 주무관
○ 묘도 창촌IC 진출입도로 개설공사 (2차분) 계약의뢰 ※ 도로과-3268	‘21.3.18.	강 균 과장 김정남 팀장 정준호 주무관
○ 묘도 창촌IC 진출입도로 개설공사 (총괄 및 2차분) 일시정지 통보 ※ 회계과-36415	‘21.7.7.	강 균 과장 한상범 주무관
○ 이의재결에 따른 보상협의 및 공탁 안내(묘도~창촌IC 진출입도로 개설공사) ※ 도로과-10329	‘21.7.7.	강 균 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 묘도~창촌IC 진출입도로 지하시설물 GIS DB 구축 용역 계약 의회 ※ 도로과-14838	‘21.12.22.	김정아 팀장 김정남 팀장 김평순 주무관
○ 묘도~창촌IC 진출입도로 지하시설물 GIS DB 구축 용역 계약체결 및 감독공무원 지정알림 ※ 회계과-65653	‘21.12.28.	최상록 주무관
○ 묘도~창촌IC 진출입도로 개설공사 설계변경(전체분 3회, 2차분 2회) 시행 ※ 도로과-3426	‘22.3.28.	최상록 주무관 명호남 주무관 오정환 과장
○ 묘도~창촌IC 진출입도로(2차분) 준공계 ※ 도로과-3639	‘22.4.4.	최상록 주무관
○ 묘도~창촌IC 진출입도로(2차분) 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-3803, 회계과-15904	‘22.4.6.	최상록 주무관
○ 묘도~창촌IC 진출입도로 안전시설물 설치공사 시행 ※ 도로과-4151	‘22.4.13.	문태영 주무관 명호남 팀장 오정환 과장
○ 묘도~창촌IC 진출입도로 개설공사 준공에 따른 시설물 이관 ※ 도로과-10349	‘22.9.19.	김평순 주무관 박성원 주무관 배도선 팀장 오정환 과장