중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	광무동 4통 도시계획도로 개설(완료)
② 추진배경	단절된 소방도로 연결로 화재 등 재난대비 및 주민 교통편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 광무동 640-11번지 일원 ○ 사 업 량 : L=230m, B=8m ○ 사 업 비 : 2,100백만원 (공사 1,100, 보상 및 기타 1,000)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 조진우 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18. 4. ~‘21. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 완료 ※ 도로과-6970호		`18. 6.26.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-8407호		`18. 8.10.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 실시계획인가 통보 ※ 도로과-11419호		`18.10.24.		김기채 국장 장세길 과장 문태선 과장 김문환 팀장 서범규 팀장 하인대 주무관 김준현 주무관
○ 지적공부정리 ※ 도로과-11419호		`18. 3.26.		서유권 과장 조헌충 소장 이완용 팀장 배도선 팀장 이화승 주무관 김준현 주무관

○ 실태조사 시행 ※ 도로과-6279호	`19. 5.28.	서유권 과장 이재종 팀장 문지환 주무관
○ 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-8273호	`19. 7. 3.	서유권 과장 이재종 팀장 문지환 주무관
○ 편입토지 등 보상비 산정 및 집행계획 ※ 도로과-10520호	`19. 8. 21.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 박은규 회계과장 서유권 과장 손하진 계약1팀장 이재태 도로계획팀장 이덕연 도로행정팀장 김준현 주무관 문지환 주무관
○ 편입토지 보상협의 요청 ※ 도로과-9983,11576호	`19. 8. 12. `19. 9. 18.	서유권 과장 이재태 도로계획팀장 이덕연 도로행정팀장 김준현 주무관 문지환 주무관
○ 도시계획시설사업(도로) 실시계획(변경) 인가 신청 ※ 도로과-12093호	‘19. 9.30.	이덕연 팀장 이재태 팀장 김준현 주무관
○ 계약심사 완료 ※ 도로과-13686호	`19. 11. 6.	서유권 과장 이재태 도로계획팀장 한상근 주무관 김준현 주무관
○ 토지수용재결신청서 열람공고 ※ 도로과-13822호	‘19.11.11.	서유권 과장 이덕연 팀장 문지환 주무관
○ 편입토지 보상협의 요청(3차) ※ 도로과-15246호	‘19.12.10.	서유권 과장 이재태 팀장 이덕연 팀장 김준현 주무관 문지환 주무관
○ 주택건설사업계획 승인신청 관련사항 검토 ※ 도로과-15296호	‘19.12.11.	서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관
○ 주택사업계획 승인 협약서 체결 계획(안) ※ 도로과-948호	‘20. 1.22.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 시행계획 ※ 도로과-1942호	‘20. 2.14.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정 (변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청 ※ 도로과-2165호	‘20. 2.19.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 계약심사 완료 ※ 도로과-1982호, 도로과-10254호	‘20. 2.17. ‘20. 2.25.	박은규 과장 한숙영 팀장 서병국 주무관 서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 계약의뢰 ※ 도로과-3304호	‘20. 3.10.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관

○ 석면폐기물 철거공사 시행 ※ 도로과-4087호	‘20. 3.25.	박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 계약의뢰 ※ 도로과-4092호	‘20. 3.25.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 폐기물 처리용역 착수계 ※ 도로과-4956호	‘20. 4. 10.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 착수계 ※ 도로과-4956호	‘20. 4. 13.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 도시계획도로 개설공사 착수계 ※ 도로과-5047호	‘20. 4. 13.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 편입토지 보상 협의 ※ 도로과-6146호	‘20. 4. 13.	서유권 과장 이덕연 팀장 이재태 팀장 정준호 주무관 문지환 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정 (변경) 및 실시계획(변경) 인가 ※ 도로과-6630호	‘20. 5. 19.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 변경계약의뢰 ※ 도로과-7917호	‘20. 6. 16.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 석면폐기물 처리 용역 완료계 ※ 도로과-8012호	‘20. 6. 17.	서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 편입토지 손실보상비 집행 ※ 도로과-8099호	‘20. 6. 18.	서유권 과장 박은규 과장 오병구 팀장 이덕연 팀장 이재태 팀장 정준호 주무관 문지환 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 시행 ※ 도로과-11002호	‘20. 8. 20.	강 균 과장 조계윤 팀장 손하진 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 손실보상협의 결과보고 ※ 도로과-11303호	‘20. 8. 26.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 팀장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 광무동4통 도시계획도로 개설공사 지하시설물 GIS DB 구축용역 착수계 ※ 도로과-11925호	‘20. 9. 10.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 「광무동 4통 도시계획도로 개설공사」변경계약 요청 ※ 도로과-14918호	‘20.11. 23.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 하도급 변경계약 적정성 검토제출 ※ 도로과-15810호	‘20. 12. 14.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 공사기간 연장 검토보고 ※ 도로과-3143호	‘21. 3. 16.	임광건 국장 강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 하도급 변경계약(3차) 적정성 검토제출 ※ 도로과-3761호	‘21. 3. 30.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ CCTV 조사용역 시행 ※ 도로과-4630호	‘21. 4. 16.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 현장 실정사항 검토보고(3회) ※ 도로과-6317호	‘21. 5. 26.	강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 준공검사 시정조치사항 통보 ※ 도로과-7221호	‘21. 6. 16.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 「광무동 4통 도시계획도로 개설공사」준공	‘21. 6. 29.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관