정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	율촌교차로~연화마을 도로확장
② 추진배경	연화마을 진입도로 확장과 연계하여 시립공원묘지 방문객의 원활한 교통 흐름 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 율촌면 상봉 ~ 여흥마을 일원 ○ 사 업 량 : L=5,340m, B=16~21.1m(2차→)4차 ○ 사 업 비 : 42,500백만원(설계 887 공사 24,500 보상 14,300 기타 2,813)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설5급 박성식 시설6급 차용석 시설8급 지정인
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		18.6.25.~27.12.23.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수(PQ심사) ※ 도로과-4067호, 4516호, 5839호, 6074호, 7445호		‵18. 6. 25.		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 건설교통국장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 김기채 도로과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 실시설계용역 정지 ※ 도로과-12058호		‵18. 11. 8.		문태선 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 소규모환경영퍙평가 등 용역시행 ※ 도로과-851호, 1012호		‵19. 1. 18.		고재영 부시장 김기채 건설교통국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관

○ 실시설계용역 보고회 개최 ※ 도로과-5511, 5745호	‵19. 5. 8.	김기채 국장 서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-6522호	‵19. 5. 27. ~ ‵19. 5. 31.	서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 소규모환경영향평가 등 분야별 용역 완료 ※ 도로과-11706호	‵19. 9. 9.	서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관
○ 주민설명회 개최(2차) ※ 도로과-12543호	‵19. 10. 8.	서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관
○ 실시설계용역 재개 (전력시설물 설계과업 반영) ※ 도로과-14308, 14438호	‵19. 11. 26.	김기채 국장 서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관
○ 설계경제성검토(VE) 용역 시행 및 계약 ※ 도로과-14424호, 회계과-65532	‵19. 11. 22. ‵19. 12. 16.	서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장
○ 인사발령에 따른 감독공무원 변경 ※ 도로과-363(2020. 1. 9.) ※ 회계과-5805(2020. 2. 5.)	‵20. 1. 8.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 조민아 주무관
○ 도로구역결정을 위한 협의 ※ 도로과-829(2020. 1. 20.)	‵20. 1. 20.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지(행정절차 이행) ※ 도로과-1532(2020. 2. 6.) ※ 회계과-6285(2020. 2. 6.)	‵20. 2. 6.	박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 조민아 주무관 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 설계경제성검토(VE) 용역 완료 ※ 도로과-1576(2020. 2. 7.)	‵20. 2. 7.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로구역결정을 위한 농지전용 협의(전라남도) ※ 도로과-4080(2020. 3. 24.)	‵20. 3. 24.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 건설기술심의 신청(→전라남도) ※ 도로과-4121(2020. 3. 25.)	‵20. 3. 25.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 선형개량공사 변경계약 의뢰 ※ 도로과-5677(2020. 4. 27.)	‵20. 4. 27.	이덕연 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 계약심사 요청 ※ 도로과-7278호	‵20. 6. 2.	이덕연 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 및 사업인정에 관한 의견 청취 공고 ※ 도로과-7360호	‵20. 6. 3.	서유권 과장 이덕연 팀장 송문종 차장
○ 지적공부정리(지목변경 및 합병) 신청 ※ 도로과-8188호	‵20. 6. 22.	이영호 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로 구역결정을 위한 사업인정 의제 협의 ※ 도로과-9976호	‵20. 7. 27.	강 균 과장 김희신 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로구역결정 고시 ※ 도로과-12214호	‵20. 7. 27.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 설계안전성검토 대상여부 재검토 요청 ※ 도로과-14237호	‵20. 11. 9.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 생태계보전협력금 지급 ※ 도로과-14923호	‵20. 11. 24.	손하진 팀장 조계윤 과장 강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 공유재산 무상귀속 협의 ※ 도로과-15859호	‵20. 12. 15.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 일상감사 의뢰 ※ 도로과-16257호	‵20. 12. 24.	김희신 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 하천 및 소하천 점용 협의 ※ 도로과-88호	‵21. 1. 5.	강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-1973호	‵21. 2. 17.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 보상계획 열람 공고 ※ 도로과-2627호	‵21. 3. 4.	강 균 과장 김희신 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관 문지환 주무관
○ 보상계획 열람 공고 ※ 도로과-2627호	‵21. 3. 4.	강 균 과장 김희신 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관 문지환 주무관
○ 보상협의회 구성 및 회의 개최 계획 ※ 도로과-3929호	‵21. 4. 1.	서은수 부시장 임광건 국장 강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 보상협의회 개최 결과 보고 ※ 도로과-4535호	‵21. 4. 13.	서은수 부시장 임광건 국장 강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 실시설계용역 준공 ※ 도로과-7194호	‵21. 6. 15.	강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 실편입토지 등 손실보상비 집행계획 ※ 도로과-7587호	‵21. 6. 22.	권오봉 시장 서은수 부시장 임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 김희신 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관 문지환 주무관
○ 지적측량 수수료 지급 ※ 도로과-8521호	‵21. 7. 14.	임광건 국장 강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지적 분할 및 현황(이지목) 측량 요청 ※ 도로과-539호	‵22. 1. 14.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 지적 분할 측량 요청 ※ 도로과-2152호	‵22. 2. 23.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 편입 토지 등 손실보상비(2차분) 집행 계획 ※ 도로과-4118호	‵22. 4. 12.	박현식 부시장 문인기 국장 오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 도유재산 무상귀속 협의 알림 ※ 도로과-5333호	‵22. 5. 13.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-8026호	‵22. 7. 19.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-8033호	‵22. 7. 19.	오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 감정평가업자 추천 요청 ※ 도로과-732호	‵23. 1. 18.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입토지(지장물 등)에 대한 감정평가 의뢰 ※ 도로과-1003호	‵23. 1. 27.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 분묘이전비 집행(조*호) ※ 도로과-1054호	‵23. 1. 30.	오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 영농보상비 집행(유0상) ※ 도로과-1774호	‵23. 2. 17.	오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지(지장물 등) 감정평가 수수료 집행 ※ 도로과-2420호	‵23. 3. 7.	오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지 등 손실보상비 산정 및 집행계획(3차) ※ 도로과-2580호	‵23. 3. 8.	김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이광재 팀장 박상진 차장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계(보완) 용역 추진 계획 ※ 도로과-3735호	‵23. 4. 5.	이경종 국장 오정환 과장 봉영권 팀장 김진욱 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계(보완) 용역 계약체결 알림 ※ 회계과-18673호, 도로과-4650호	‵23. 4. 27.	박채훈 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계(보완) 용역 착수계 제출 ※ 도로과-4794호	‵23. 5. 2.	박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 전입세대 열람 요청 ※ 도로과-5055호	‵23. 5. 9.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 손실보상(3차분) 협의 요청(3차) ※ 도로과-5454호	‵23. 5. 19.	김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지 등 손실보상비 집행계획(4차) ※ 도로과-5789호	‵23. 5. 30.	김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관 정회주 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 손실보상 협의 요청(4차분) ※ 도로과-5796호	‵23. 5. 30.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지 조서 소유자 변경 ※ 도로과-6430호	‵23. 6. 15.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지 조서(영농보상비) 수정 ※ 도로과-6628호	‵23. 6. 19.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 물건 조서 소유자 변경 ※ 도로과-6805호	‵23. 6. 22.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 편입 토지 조서 소유자 변경 ※ 도로과-7131호	‵23. 6. 29.	오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 손실보상비 지출원인행위액 감액 검토 ※ 도로과-7479호	‵23. 7. 7.	오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관 정회주 주무관
○ 편입토지 조서 소유자 변경 ※ 도로과-8343호	‵23. 7. 27.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 손실보상협의 공시송달 공고 ※ 도로과-9040호	‵23. 8. 11.	심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 이현재 주무관
○ 손실보상협의 공시송달 공고 의뢰 ※ 도로과-9039호	‵23. 8. 11.	심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 이현재 주무관
○ 부동산종합공부 전산자료 요청 ※ 도로과-9654호	‵23. 8. 29.	김정아 팀장 대결 박상진 팀장 백채훈 주무관
○ 부동산종합공부 시스템 전산파일 제공 ※ 도로과-9708호	‵23. 8. 29.	백채훈 주무관
○ 수용재결 신청안내 및 날인요청에 대한 회신 ※ 도로과-10071호	‵23. 9. 7.	이현재 주무관
○ 편입토지 등에 대한 손실보상 협의 요청(4차분-2차) ※ 도로과-11168호	‵23. 10. 11.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 보상협의요청에 따른 관계인에 대한 통지(4차분-2차) ※ 도로과-11179호	‵23. 10. 11.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 제증명 공용 발급 의뢰 ※ 도로과-11178호	‵23. 10. 11.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 도로과-11581호	‵23. 10. 20.	이경종 건설교통국장 심근하 과장 한진숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 토지 등 수용사실 확인서 ※ 도로과-12175호	‵23. 11. 2.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 도로과-12766,12768	‵23. 11. 14.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 제증명 공용 발급 의뢰 ※ 도로과-13169호	‵23. 11. 22.	김정아 팀장 이현재 주무관
○ 협의 및 계약서 ※ 도로과-13612호	‵23. 12. 1.	심근하 과장 김정아 팀장 이현재 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장공사 토지수용재결 신청 ※ 도로과-517호	‵24. 1. 12.	염슬열 건설교통국장 명호남 과장 정진희 팀장 배찬재 주무관
○ 2024년 제1회 지방토지수용위원회 수용재결 신청(율촌교차로~연화마을 도로확장) ※ 도로과-517호	‵24. 1. 11.	명호남 과장 정진희 팀장 이현재 주무관
○ 사업인정(의제)사업 경미한 변경에 따른 추가협의 요청 ※ 도로과-1629호	‵24. 2. 7.	명호남 과장 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 도시관리 계획 경정(변경) 및 실시설계(보완)용역」일시정지 검토보고 ※ 도로과-2118호	‵24. 2. 20.	염승열 건설교통국장 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 명호남 과장 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 토지수용 재결을 위한 상속인 조사의뢰 ※ 도로과-2992호	‵24. 3. 12.	명호남 과장 정진희 팀장 배찬재 주무관
○ 편입 부지 내 건축물 철거 요청 회신 ※ 도로과-3788호	‵24. 3. 27.	명호남 과장 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 제증명 공용 발급 의뢰 ※ 도로과-11178호	‵23. 10. 11.	명호남 과장 정진희 팀장 이현재 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 가장리 861-1번지 건설폐기물 처리용역」착수계 제출 ※ 도로과-5531호	‵24. 5. 8.	명호남 과장 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 문화재 시굴조사 용역」계약심사 요청 ※ 도로과-5737호	‵24. 5. 10.	명호남 과장 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 문화재 시굴조사 용역」계약의뢰 ※ 도로과-6334호	‵24. 5. 24.	명호남 과장 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 토지 등 수용사실 확인서 ※ 도로과-6750호	‵24. 6. 3.	명호남 과장 정진희 팀장 배찬재 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 도로과-7547호	‵24. 6. 20.	명호남 과장 강행숙 회계과장 협조 김진욱 계약1팀장 협조 정진희 팀장 배찬재 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 문화재 시굴조사 용역」일시정지에 대한 검토보고 ※ 도로과-2386호	‵24. 8. 29.	이동일 교통도로국장 강행숙 회계과장 협조 정일권 계약1팀장 협조 명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」 도로구역(변경)결정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-2253호	‵24. 8. 30.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 공석 배찬재 주무관 협조 백두산 주무관
○ 도로구역(변경)결정 및 사업인정에 관한 의견청취 공고 ※ 도로과-2406호	‵24. 9. 4.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 문화재 시굴조사 용역」일시정지 요청 ※ 도로과-2411호	‵24. 9. 4.	정진희 도로행정팀장 대결 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 도로구역결졍(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 게시 의뢰 ※ 도로과-2476호	‵24. 9. 05.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」도로구역결정 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고 알림 ※ 도로과-2475호	‵24. 9. 5.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장 사업 추진계획 보고 ※ 도로과-2708호	‵24. 9. 11.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 교통도로국장 명호남 과장 정진희 도로행정팀장 협조 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 요청(율촌교차로~연화마을도로확장) ※ 도로과-3019호	‵24. 9. 24.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」 공사 시행계획 (총괄 및 1차분) ※ 도로과-3109호	‵24. 9. 24.	정기명 시장 한진숙 총무과장 이동일 교통도로국장 김남영 재산관리팀장 정일권 계약1팀장 명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장 사업인정 의견청취 결과보고 ※ 도로과-11178호	‵24. 10. 7.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 도로구역 결정(변경)에 따른 의제 협의 (율촌교차로~연화마을 도로확장) ※ 도로과-3534호	‵24. 10. 8.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 사업인정(의제)사업 경미한 변경에 따른 추가협의 요청 (율촌교차로~연화마을 도로확장공사) ※ 도로과-3535호	‵24. 10. 11.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 2024년 제4차 계약심의위원회 심의 요청 안건 제출(율촌~연화 도로확장 공사) ※ 도로과-3640호	‵24. 10. 11.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 도로구역 결정을 위한 농지전용(변경)협의 요청(율촌교차로~연화마을 도로확장) ※ 도로과-4044호	‵24. 10. 22.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을도로확장」 일상감사 요청(정정) ※ 도로과-4886호	‵24. 11. 14.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」(총괄 및 1차분) 계약 체결 의뢰 ※ 도로과-5104호	‵24. 11. 20.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 도로구역 결정 및 지형도면 고시(율촌교차로~연화마을 도로확장) ※ 도로과-5356호	‵24. 11. 26.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 도로구역 결정 고시 및 고시문 게재 요청(율촌교차로~연화마을 도로확장) ※ 도로과-5357호	‵24. 11. 26.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 보상계획 변경 열람 공시송달 공고(율촌교차로~연화마을 도로확장공사) ※ 도로과-6125호	‵24. 12. 17.	명호남 과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」지장물(가스관로) 이설 관련 협약 체결(안) ※ 도로과-6149호	‵24. 12. 17.	정기명 시장 최정기 부시장 이동일 교통도로국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌면교차로-연화마을 도로확장공사」 착공계 제출 ※ 도로과-6384호	‵24. 12. 24.	명호남 과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사」 재감정평가 계획 알림 ※ 도로과-85호	‵25. 1. 3.	명호남 과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 재감정평가 계획 알림 공시송달 공고(율촌교차로~연화마을 도로확장공사) ※ 도로과-220호	‵25. 1. 7.	명호남 과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 시공단계의 건설사업관리계획 수립 및 제출(율촌교차로~연화마을 도로확장) ※ 도로과-426호	‵25. 1. 13.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 공사」품질관리자 변경 요청 검토보고 ※ 도로과-652호	‵25. 1. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 여수시 기술자문위원회 기술자문 요청(율촌교차로~연화마을 건설사업관리용역) ※ 도로과-1272호	‵25. 2. 7.	정진희 도로행정팀장 대결 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 토지 등 수용사실 확인서(김*수) 율촌교차로~연화마을 ※ 도로과-1292,1293호	‵25. 2. 10.	박성식 도로과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 토지 등 수용사실 확인서(정*숙)- 율촌교차로~연화마을 ※ 도로과-1554호	‵25. 2. 14.	박성식 도로과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장 건설폐기물 처리용역 시행계획 ※ 도로과-2790호	‵25. 3. 13.	정기명 시장 최정기 부시장 최연호 교통도로국장 김종필 회계과장 협조 정일권 계약1팀장 협조 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 요청(율촌교차로~연화마을 도로확장 건설폐기물 처리용역) ※ 도로과-2858호	‵25. 3. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장공사 토지수용 재결신청(1차) ※ 도로과-3081호	‵25. 3. 25.	최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장 건설폐기물 처리용역(총괄 및 1차분) 계약의뢰 ※ 도로과-3106호	‵25. 3. 26.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 일상감사 및 계약심사 요청(율촌교차로~연화마을 도로확장 건설폐기물 처리용역) ※ 도로과-2858호	‵25. 3. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 2025년 제2회 지방토지수용위원회 수용재결 신청 (율촌교차로~연화마을 도로확장공사) ※ 도로과-2858호	‵25. 3. 19.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역」사업수행능력평가(PQ) 계획 ※ 도로과-3792호	‵25. 4. 10.	최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 황규석 도시도로팀장 협조 곽 원 농어촌도로팀장 협조 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역」집행계획 및 사업수행능력평가 제출 안내 공고 ※ 도로과-4093호	‵25. 4. 17.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역」집행계획 및 사업수행능력평가서 제출 안내 (정정)공고 ※ 도로과-4177호	‵25. 4. 21.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역」소위원회 결과 보고 ※ 도로과-4261호	‵25. 4. 22.	최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역」 업무중복도 공개 및 의견수렴 ※ 도로과-2858호	‵25. 5. 12.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 『율촌교차로~연화마을 도로확장』실정보고 접수에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-5021호	‵25. 5. 13.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장(2차분)」시행계획(발주)보고 ※ 도로과-5028호	‵25. 5. 13.	정기명 시장 최정기 부시장 최연호 교통도로국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역」사업수행능력평가(PQ) 면접 평가위원회 구성 및 계획 ※ 도로과-5029호	‵25. 5. 13.	정기명 시장 최정기 부시장 최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장(1차분)」 변경계약 체결의뢰 ※ 도로과-5033호	‵25. 5. 13.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 공사」 품질관리자 변경 요청 검토보고 ※ 도로과-5034호	‵25. 5. 13.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 공사」품질관리자 변경 요청 검토보고 ※ 도로과-5155호	‵25. 5. 16.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌~연화 도로확장 건설사업관리용역」사업수행능력평가(PQ) 결과 보고 ※ 도로과-5326호	‵25. 5. 22.	최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로-연화마을 도로확장공사(2차분)」 착공계 제출의 건 ※ 도로과-5400호	‵25. 5. 23.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사(1차분)」준공계 제출 ※ 도로과-5401호	‵25. 5. 23.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역(총괄 및 1차분)」 PQ후 계약 의뢰 ※ 도로과-5789호	‵25. 6. 4.	차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 협의 및 계약서(위*복)- 율촌교차로~연화마을 ※ 도로과-5866호	‵25. 6. 5.	박성식 도로과장 정진희 도로행정팀장 배찬재 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장(2차분)」 실정보고 접수에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-6214호	‵25. 6. 13.	최연호 교통도로국장 박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 석면조사 용역」시행 ※ 도로과-6989호	‵25. 7. 1.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 석면조사 용역」계약의뢰 ※ 도로과-7076호	‵25. 7. 2.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 배승호 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」 사업 관련 가스관 저촉구조물 시험굴착 승인 알림 ※ 도로과-5401호	‵25. 7. 7.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 안전관리계획서 검토 의뢰 (율촌교차로~연화마을 도로확장공사) ※ 도로과-7469호	‵25. 7. 11.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 『율촌교차로~연화마을 도로확장공사』 품질관리자 및 안전관리자 변경 승인 알림 ※ 도로과-7627호	‵25. 7. 15.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사(2차분)」 하도급계약 적정성 검토 보고 ※ 도로과-8052호	‵25. 7. 24.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장 가연성폐기물 처리용역」계약의뢰 ※ 도로과-8244호	‵25. 7. 30.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 소규모 환경영향평가 대상사업 착공 통보서 제출 (율촌교차로~연화마을 도로확장공사) ※ 도로과-8449호	‵25. 8. 4.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 일시정지 중인 사업의 선금보증서 갱신을 위한 준공예정일 안내[율촌교차로~연화마을 도로확장 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계(보완) 용역] ※ 도로과-8709호	‵25. 8. 11.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 『율촌면 교차로~연화마을 도로확장 건설사업관리용역』 책임건설사업관리기술인 변경 배치 승인 알림 ※ 도로과-8761호	‵25. 8. 11.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사(총괄 및 2차분)」 설계변경 심의 요청 ※ 도로과-8905호	‵25. 8. 14.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 『율촌교차로~연화마을 도로확장공사(총괄 및 2차분)』 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도로과-9226호	‵25. 8. 25.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사」(총괄 및 2차분) 변경 계약 의뢰 ※ 도로과-9319호	‵25. 8. 27.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사」(총괄 및 2차분) 품질시험계획 승인 알림 ※ 도로과-9441호	‵25. 9. 1.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장」 사업 LNG 배관 저촉구조물 관련 회의 개최 알림 및 이설 협조 요청 ※ 도로과-9469호	‵25. 9. 1.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 「율촌교차로~연화마을 도로확장공사」 토지이동(등록사항 정정) 신청 협조 ※ 도로과-10001호	‵25. 9. 16.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 『율촌교차로~연화마을 도로확장공사(총괄 및 2차분)』 실정보고 승인 요청에 따른 검토보고 ※ 도로과-10778호	‵25. 10. 13.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관
○ 율촌교차로~연화마을 도로확장공사 2차분 지정폐기물 철거공사 등 3건 시행 ※ 도로과-11079호	‵25. 10. 20.	박성식 도로과장 차용석 도로계획팀장 지정인 주무관