정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설
② 추진배경	도시계획도로 개설로 화재 등 재난대비 및 주민교통편의 제공
③ 사업개요	○ 위 치 : 서교동 717번지 일원 ○ 사 업 량 : L=272m, B=6~8m ○ 사 업 비 : 6,300백만원(공사 1,863 보상 및 기타 4,437)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설9급 최지용 시설5급 명호남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵18. 4. ~ ‵25. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수 ※ 도로과-6970호		‵19. 1.17.		서유권 과장 배도선 팀장 김준현 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-3223호		‵19. 3.22.		서유권 과장 배도선 팀장 김준현 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가(1,2공구) ※ 도로과-21660호		‵19. 10. 21.		서유권 과장 이재태 팀장 하인대 주무관 김준현 주무관
○ 지적공부정리(분할) 완료 ※ 도로과-15389호		‵19. 12. 13.		서유권 과장 이재태 팀장 엄정직 차장 김준현 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가(4공구) ※ 도로과-13595호		‵20. 3. 5.		서유권 과장 이재태 팀장 김용환 주무관 박재연 주무관
○ 실태조사 계획 수립(1,2공구) ※ 도로과-3085호		‵20. 3. 6.		서유권 과장 이태재 팀장 이덕연 팀장 박재연 주무관 문지환 주무관
○ 실태조사 결과보고 ※ 도로과-4629호		‵20. 4. 3.		서유권 과장 이태재 팀장 이덕연 팀장 박재연 주무관 문지환 주무관
○ 지적분할 신청 ※ 도로과-6847호		‵20. 5. 22.		서유권 과장 이태재 팀장 박재연 주무관
○ 실시설계용역(4공구) 준공계 ※ 도로과-8538호		‵20. 6. 26.		이덕연 팀장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 구간 토지이동(분할)신청 ※ 도로과-9836호		‵20. 7. 24.		강 균 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 보상협의요청(3차) ※ 도로과-11478호		‵20. 9. 1.		강 균 과장 이재태 팀장 김희신 팀장 박재연 주무관 문지환 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 등기수수료 집행 ※ 도로과-16058호		‵20. 12. 21.		강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 2021년 제1회 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 도로과-16207호		‵20. 12. 23.		장세길 국장 김문환 과장 강 균 과장 이재태 팀장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 수수료 집행 ※ 도로과-16315호		‵20. 12. 28.		강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 토지수용재결 신청서 열람 공고 ※ 도로과-340호		‵21. 1. 11.		강 균 과장 이재태 팀장 김희신 팀장 조태익 주무관 문지환 주무관
○ 지적공부정리(토지이동,분할) 신청 ※ 도로과-1730호		‵21. 2. 10.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 제1회 지방토지수용위원회 재결서 공시송달 공고 ※ 도로과-3119호		‵21. 3. 16.		강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 서교동 중앙교회~다락카페 소방도로 개설 집행계획 보고 ※ 도로과-4724		‵21. 4. 15.		권오봉 시장 서은수 부시장 임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 공사 일상감사 완료 ※ 도로과-5813호		‵21. 5. 13.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 공사 계약심사 완료 ※ 도로과-6260호		‵21. 5. 25.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 총괄 및 1차분 계약 체결 ※ 도로과-7776호		‵21. 6. 29.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 총괄 및 1차분 공사 착공 ※ 도로과-7819호		‵21. 6. 29.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 1차분 선금급 지급 ※ 도로과-7914호		‵21. 6. 29.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 가연성폐기물 처리 용역 착공 ※ 도로과-8084호		‵21. 7. 5.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 착공 ※ 도로과-8085호		‵21. 7. 5.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 건설폐기물처리 용역 착공 ※ 도로과-8087호		‵21. 7. 5.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 착공 ※ 도로과-8087호		‵21. 7. 5.		강 균 과장 이재태 팀장 조태익 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 실정보고 ※ 도로과-10293호		‵21. 8. 26.		강 균 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 변경 계약 ※ 도로과-10731호		‵21. 9. 6.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 변경 계약 ※ 도로과-10732호		‵21. 9. 6.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 석면폐기물 비산정도측정 용역 착공 ※ 도로과-11991호		‵21. 9. 13.		강 균 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 준공 ※ 도로과-12150호		‵21. 10. 14.		강 균 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 준공 ※ 도로과-12978호		‵21. 11. 4.		강 균 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 가연성폐기물 준공 ※ 도로과-14705호		‵21. 12. 17.		강 균 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 공사(1차분) 준공 ※ 도로과-14829호		‵21. 12. 22.		강 균 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 건설폐기물처리용역 실정보고에 따른 검토보고 ※ 도로과-228호		‵22. 1. 7.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 2차분 공사 착공 ※ 도로과-1462호		‵22. 2. 8.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 착수 ※ 도로과-2363호		‵22. 3. 2.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 도시가스배관 이설 공사 착공 ※ 도로과-3728호		‵22. 4. 5.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 도시가스배관 이설 공사 준공 ※ 도로과-4508호		‵22. 4. 22.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 가로등 설치공사 착공 ※ 도로과-5173호		‵22. 5. 10.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 도로개설, 건설폐기물 처리용역, 가로등 설치공사 계약기간 연장의뢰 ※ 도로과-6736호		‵22. 6. 16.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 실정보고 승인 알림 ※ 도로과-6789호		‵22. 6. 20.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 실정보고에따른 검토보고 ※ 도로과-8059호		‵22. 7. 20.		오정환 과장 한진숙 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 「서교동 중앙교회~다락카페 소방도로개설 공사」외 1건 계약기간 연장 의뢰 ※ 도로과-8094호		‵22. 7. 20.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 실정보고 승인 알림 ※ 도로과-8179호		‵22. 7. 22.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 공사기간 연장 검토 보고 ※ 도로과-8356호		‵22. 7. 27.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 공사기간 연장 의뢰 ※ 도로과-8361호		‵22. 7. 27.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 가로등 설치공사 변경 계약 의뢰 ※ 도로과-8734호		‵22. 8. 5.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 가로등 설치공사 준공 ※ 도로과-9012호		‵22. 8. 12.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 총괄분, 2차분 변경계약 체결의뢰(정정) ※ 도로과-9171호		‵22. 8. 18.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 도로개설 공사(총괄분, 2차분)준공계 ※ 도로과-9327호		‵22. 8. 23.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ GIS DB구축 용역 일시정지 요청 ※ 도로과-9378호		‵22. 8. 24.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 건설폐기물처리용역 준공계 ※ 도로과-9427호		‵22. 8. 25.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 지적분할 신청(4공구) ※ 도로과-11202호		‵22. 10. 6.		오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 도시계획시설사업 실시계획인가(4공구) ※ 도로과-13180호		‵22. 11. 22.		오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 편입토지 등 손실보상비 산정 및 집행계획(4공구) ※ 도로과-14672호		‵22. 11. 22.		정기명 시장 김지선 국장 문인기 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 조태익 주무관 김민수 주무관
○ 소화전 설치 알림(1,2공구) ※ 도로과-13354호		‵22. 11. 25.		오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 편입토지(지장물) 감정평가 계획 알림(4공구) ※ 도로과-13569호		‵22. 11. 30.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 소화전 안내 간판 설치(1,2공구) ※ 도로과-13974호		‵22. 12. 9.		오정환 과장 전명수 팀장 조태익 주무관
○ 편입토지 등 손실보상비 산정 및 집행계획(4공구) ※ 도로과-14672호		‵22. 12. 21.		정기명 시장 김지선 국장 문인기 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 김정아 팀장 조태익 주무관 김민수 주무관
○ 편입토지(지장물) 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-452호		‵23. 1. 11.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 편입토지 등 손실보상비 증액 검토 보고 ※ 도로과-1590호		‵23. 2. 14.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이광재 팀장 김정아 팀장 박상진 차장 김민수 주무관
○ 편입토지(지장물 등) 감정평가 수수료 집행(4공구) ※ 도로과-1618호		‵23. 2. 14.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 전입세대 열람 요청(4공구) ※ 도로과-1758호		‵23. 2. 17.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 편입토지(지장물 등) 감정평가 수수료 집행(4공구) ※ 도로과-1618호		‵23. 2. 14.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 편입토지 등 손실보상비 증액 검토 보고 ※ 도로과-1974호		‵23. 2. 23.		오정환 과장 이광재 팀장 김정아 팀장 박상진 차장 김민수 주무관
○ 편입토지 등에 대한 보상협의 요청(추가) ※ 도로과-1987호		‵23. 2. 23.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 보상 대상 관련 의견 회신 ※ 도로과-7550호		‵23. 7. 10.		김민수 주무관
○ 지하시설물 GIS-DB구축용역 일시정지 해지 요청 ※ 도로과-9699호		‵23. 8. 30.		심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 지하시설물 GIS-DB구축용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-43627호		‵23. 9. 5.		배경춘 주무관
○ 지하시설물 GIS-DB구축용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-43838호		‵23. 9. 6.		배경춘 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 도로과-11727호		‵23. 10. 24.		심근하 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 감정평가 세부내역 회신 요청 ※ 도로과-14544호		‵23. 12. 22.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 김민수 주무관
○ 감정평가 계획 알림(4공구) ※ 도로과-5545호		‵24. 5. 8.		명호남 과장 정진희 팀장 검 김진표 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 보상협의 요청(4공구) ※ 도로과-7372호		‵24. 6. 18.		명호남 과장 정진희 팀장 김진표 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 감정평가 수수료 집행(4공구) ※ 도로과-7373호		‵24. 6. 18.		명호남 과장 정진희 팀장 김진표 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 손실보상비 집행(서교동 296-1) ※ 도로과-7691호		‵24. 6. 24.		염승열 국장 강행숙 과장 김진욱 팀장 명호남 과장 정진희 팀장 김진표 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 손실보상비 집행(서교동 355-3) ※ 도로과-7804호		‵24. 6. 24.		염승열 국장 강행숙 과장 김진욱 팀장 명호남 과장 정진희 팀장 김진표 주무관
○ 보상에 따른 등기수수료 집행(4공구) ※ 도로과-7791호		‵24. 6. 26.		명호남 과장 정진희 팀장 김진표 주무관