정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	상세동~원봉두 시도11호선 도로개설
② 추진배경	○ 농촌지역 마을간 접근성 제고를 통한 영농편익 기여 ○ 농어촌지역 도로망 확충으로 주민 교통편익 제공 및 생활환경 개선
③ 사업개요	○ 사업위치 : 여수시 소라면 덕양리 산20-1번지 일원 ○ 사 업 량 : L= 2,294m, B=7.5~8.0m, (기시행 1,000m) ○ 사 업 비 : 5,600백만 원(설계 및 공사 5,300 보상 등 300)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 김현철 시설5급 명호남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵15. 1. ~ ‵24. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 공사 실시설계용역 집행계획 및 계약 ※ 도로과-550호(’19.1.14.) ※ 도로과-764호(’19.1.17.) ※ 회계과-7263호(’19. 2.20.)		‵19. 1. 14. (2. 20.)		양기원 국장 김기채 국장 서유권 과장 박은규 과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 황규석 차장
○ 실시설계용역 중간보고 ※ 도로과-6578호		‵19. 5. 24.		김기채 국장 서유권 과장 배도선 팀장 황규석 차장
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-6439,6782호		‵19. 5. 29.		서유권 과장 배도선 팀장 황규석 차장
○ 실시설계용역 감독변경 ※ 도로과-8443호(’19. 7. 9.) ※ 회계과-35477호(’19. 7. 10.)		‵19. 7. 10.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관 박은규 과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 ※ 도로과-8769호(’19. 7.15.), 8823(’19. 7.16.) ※ 회계과-37461호(’19. 7.22.)		‵19. 7. 15.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관 박은규 과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관
○ 소규모환경영향평가 시행, 계약심사 및 계약 ※ 도로과-9072호(’19. 7.21.), 9127(2019. 7.23.), 9326호(2019. 7.29.) ※ 회계과-38186(2019. 7.25.), 43206(2019. 8.26.)		‵19. 8. 28.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관 박은규 과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관 한숙영 계약심사팀장 한상근 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 요청 ※ 도로과-15416호(’19.12.13..) ⇒ 영산강유역환경청		‵19. 12. 13.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계 설계변경 검토보고 ※ 도로과-2993호(’20.3.4.)		‵20. 3. 4.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관 박은규 과장 손하진 계약1팀장
○ 소규모환경영향평가 협의보완에 따른 검토보고 ※ 도로과-2993호(’20.3.4.)		‵20. 3. 4.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 소규모환경영향평가 협의 취하 요청 ※ 도로과-2987호(’20.3.4.) ⇒ 영상강유역환경청		‵20. 3. 4.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 실시설계용역 사전환경성검토 협의의견 반영요청 ※ 도로과-3144호(’20.3.6.)		‵20. 3. 6.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 도로구역결정을 위한 인·허가 협의 ※ 도로과-5133호(’20.4.14.)		‵20. 4. 14.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 공유재산 무상귀속 협의 ※ 도로과-5790호		‵20. 4. 28.		서유권 과장 이덕연 팀장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 문화재 지표조사 시행 ※ 도로과-5851호		‵20. 4. 29.		서유권 과장 이덕연 팀장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 일상감사 의뢰 ※ 도로과-6153호		‵20. 5. 8.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 계약심사 요청 ※ 도로과-6626호		‵20. 5. 19.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 관급자재선정 심의위원회 심의 의뢰 ※ 도로과-7488호		‵20. 6. 5.		서유권 과장 이덕연 팀장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 폐기물처리용역 착수계 ※ 도로과-8483호		‵20. 6. 25.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 도로개설공사(총괄분) 착공계 ※ 도로과-8484호		‵20. 6. 25.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 소규모 환경영향평가 용역(준공계) ※ 도로과-9384호		‵20. 7. 14.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 도로구역 결정을 위한 농지전용 협의 요청 ※ 도로과-12664호		‵20. 9. 28.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 계약의뢰 ※ 도로과-12704호		‵20. 9. 29.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 도로구역결정(변경) 고시 ※ 도로과-12907호		‵20. 10. 6.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 지적 분할측량 요청 ※ 도로과-13325호		‵20. 10. 16.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 지장물 실태조사 결과보고 ※ 도로과-14915호		‵20. 11. 23.		강 균 과장 이재태 팀장 김희신 팀장 임선진 주무관 문지환 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-15024호		‵20. 11. 26.		강 균 과장 이재태 팀장 김희신 팀장 임선진 주무관 문지환 주무관
○ 지적측량(분할) 종목 변경 신청 ※ 도로과-15168호		‵20. 11. 30.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-16254호		‵20. 12. 23.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 편입토지 등 손실보상비 산정 및 집행(1차) ※ 도로과-1436호		‵21. 2. 3.		임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 김희신 팀장 임선진 주무관 문지환 주무관
○ 하도급계약 적정성 검토보고 ※ 도로과-2370호		‵21. 2. 26.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 관급자재 선고지 요청 ※ 도로과-3760호		‵21. 3. 30.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 1차분 공사 기성대가(1회) 지급 ※ 도로과-3896호		‵21. 4. 1.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 총괄 및 1차분 공사 실정보고 및 변경계약 체결 ※ 도로과-5895호		‵21. 5. 14.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 1차분 공사 기성대가(2회) 지급 ※ 도로과-7559호		‵21. 6. 23.		강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 임목폐기물 처리용역 일시정지 ※ 도로과-8289호		‵21. 7. 9.		강 균 과장 전명수 팀장 황보호 주무관
○ GIS DB 구축용역 실정보고 ※ 도로과-10926호		‵21. 9. 10.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 임목폐기물 처리용역 일지정지 해지 및 변경계약 체결 ※ 도로과-11372호		‵21. 9. 24.		강 균 과장 조계운 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ GIS DB 구축용역 변경계약 체결 ※ 도로과-11403호		‵21. 9. 25.		강 균 과장 조계운 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 공사(총괄 및 1차분), 임폭폐기물처리 용역 일시정지 ※ 도로과-14046호		‵21. 12. 2.		강 균 과장 조계운 과장 오병구 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 일시정지 해지 ※ 도로과-217호		‵22. 1. 7.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 폐기물 처리용역 일시정지 해지 ※ 도로과-225호		‵22. 1. 7.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 공사(총괄 및 1차분) 일시정지 해지 ※ 도로과-1084호		‵22. 1. 27.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 기성대가(3회) 확정 통보 ※ 도로과-1152호		‵22. 1. 28.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 도로노선 변경 검토 보고 ※ 도로과-6529호		‵22. 6. 13.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 공사기간 연장 검토 보고 ※ 도로과-9506호		‵22. 8. 26.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 하도급계약(변경) 체결사항 적정성여부 검토보고 ※ 도로과-10852호		‵22. 9. 28.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 하도급계약 변경 검토결과 회신 ※ 도로과-10898호		‵22. 9. 28.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 설계 변경 검토 보고 ※ 도로과-13012호		‵22.11.17.		정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이동일 과장 이 강 팀장 오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 설계 변경 검토 보고 ※ 도로과-13126호		‵22.11.21.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이동일 과장 이 강 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 변경계약 의뢰 ※ 도로과-13129호		‵22.11.21.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 1차분 공사 준공계 ※ 도로과-13253호		‵22.11.22.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 총괄 및 1차분 변경계약 체결 ※ 도로과-13259호		‵22.11.23.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 편입 국유지 손실보상비 집행 ※ 도로과-13438호		‵22.11.28.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 토지수용 재결에 따른 공탁 대리인 임명 ※ 도로과-13432호		‵22.11.28.		오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 집행계획 보고(2차분) ※ 도로과-14063호		‵22.12.6.		정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 배기봉 팀장 이강 팀장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 계약체결 의뢰(2차분) ※ 도로과-14103호		‵22.12.13.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 도로구역결정을 위한 인허가 협의 회신 ※ 도시계획과-27411호, 도로과-14228		‵22.12.15.		조진우 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 고시 ※ 도로과-14276호		‵22.12.16.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-61817호, 도로과-14369호		‵22.12.20.		조진우 주무관
○ 착공계(2차분) ※ 도로과-14406호		‵22.12.20.		조진우 주무관
○ 편입 토지(국유지)에 대한 등기수수료 집행 ※ 도로과-14478호		‵22.12.22.		오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 품질시험계획 승인(2차분) ※ 도로과-172호		‵23.1.4.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 실정보고 제출 및 용역중지 요청 ※ 도로과-651호		‵23.1.17.		조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 일시정지 검토보고 ※ 도로과-682호		‵23.1.17.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이광재 팀장 조영문 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 일시정지 요청 ※ 도로과-731호		‵23.1.18.		오정환 과장 이광재 팀장 조영문 주무관
○ 일시정지 검토보고(총괄 및 2차분) ※ 도로과-867호		‵23.1.21.		이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이광재 팀장 최영민 주무관
○ 토지수용재결에 따른 공탁 수수료 집행 ※ 도로과-1025호		‵23.1.30.		오정환 과장 김정아 팀장 정회주 주무관
○ 일시정지 알림(총괄 및 2차분) ※ 회계과-3271호, 도로과-1098호		‵23.1.31.		최영민 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축용역 일시정지 알림 ※ 회계과4272호, 도로과-1338호		‵23.2.7.		조영문 주무관
○ 수리계산서 작성 용역 시행 ※ 도로과-4526호		‵23.4.24.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 설계변경 적정성 검토 요청 ※ 도로과-4810호		‵23.5.2.		오정환 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 관련 민원사항 전달 ※ 소라면-9202호, 도로과-4935호		‵23.5.4.		최영민 주무관
○ 일시정지 중인 사업의 선금보증서 갱신(기간연장) 안내 ※ 도로과-8465호		‵23.5.2.		최영민 주무관
○ 추석명절 대비 현장 정비 요청 ※ 도로과-10865호		‵23.9.26.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ (설계변경) 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-11873호		‵23.10.26.		최영민 주무관
○ 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-55406호		‵23.11.7.		최영민 주무관
○ 임목폐기물처리용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-57985호		‵23.11.20.		조영문 주무관
○ 폐기물처리용역 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-58863호		‵23.11.24.		조영문 주무관
○ 재시공 및 보완 지시 ※ 도로과-13780호		‵23.12.6.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 기성대가(1회) 확정 알림 ※ 회계과-62616호		‵23.12.11.		최영민 주무관
○ 실정보고에 대한 검토 결과 알림 ※ 도로과-14056호		‵23.12.12.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 임목폐기물처리용역 변경계약 의뢰 ※ 도로과-14683호		‵23.12.27.		심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 조영문 주무관
○ 관급자재선정 심의위원회 심의 재의뢰 ※ 도로과-2154호		‵24. 2.21.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 용역 시행 검토보고 ※ 도로과-3201호		‵24. 3.14.		명호남 과장 전결 고영백 청사관리팀장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도로구역 결정(변경)을 위한 인·허가 협의 ※ 도로과-4670호		‵24. 4.16.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도로구역 결정(변경)을 위한 인·허가 재협의 ※ 도로과-5353호		‵24. 5. 2.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 고시 ※ 도로과-5626호		‵24. 5. 9.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도로구역 결정(변경) 고시 및 고시문 게재 요청 ※ 도로과-5643호		‵24. 5. 9.		명호남 과장 전결 정진희 팀장 대결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도로개설공사 준공검사조서 제출 ※ 도로과-6533호		‵24. 5.29.		정진희 팀장 대결 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경)용역 준공검사조서 제출 ※ 도로과-6981호		‵24. 6.10.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 시행 ※ 도로과-7110호		‵24. 6.12.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 계약의뢰 ※ 도로과-7134호		‵24. 6.12.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 계약 체결 및 감독공무원 지정 ※ 도로과-7320호		‵24. 6.18.		김남영 재산관리팀장 전대결 김진욱 계약1팀장 장지수 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 착수계 제출 ※ 도로과-7545호		‵24. 6.20.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 완료계 제출 ※ 도로과-161호		‵24. 7.10.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-196호		‵24. 7.11.		강행숙 회계과장 전결 정일권 계약1팀장 장지수 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토보고 ※ 도로과-196호		‵24. 7.16.		이동일 국장 전결 명호남 과장 황규석 팀장 김현철 주무관 조민철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토결과 회신 ※ 도로과-480호		‵24. 7.17.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 계약기간 연장에 따른 계약금액조정 검토용역 준공검사조서 통보 ※ 도로과-519호		‵24. 7.17.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 물가변동(E/S) 정산 검토보고 ※ 도로과-564호		‵24. 7.18.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 황규석 팀장 김현철 주무관 조민철 주무관
○ 물가변동(E/S) 정산 검토결과 회신 ※ 도로과-599호		‵24. 7.18.		명호남 과장 결재 황규석 팀장 조민철 주무관
○ 준공에 따른 시설물 이관 ※ 도로과-1392호		‵24. 8. 8.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 관급자재 선정 심의 요청 ※ 도로과-1392호		‵24. 8. 20.		명호남 과장 결재 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 공공측량 성과심사 의뢰 ※ 도로과-2161호		‵24. 8. 29.		명호남 과장 전결 곽 원 팀장 김현철 주무관
○ 공공측량 성과심사 수수료 납부 ※ 도로과-2559호		‵24. 9. 6.		명호남 과장 전결 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 곽 원 팀장 김현철 주무관