정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼산면 변촌~장촌 도로 확포장
② 추진배경	거문대교(동도~서도) 개통과 관련하여 주민 생활권이 변경됨에 따라 버스 운행을 위한 도로개설로 도서민 정주여건 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 삼산면 서도리 1204-1번지 일원 ○ 사 업 량 : L=1,105m, B=8m ○ 사 업 비 : 6,600백만원(공사 6,142 보상 및 기타 458)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설9급 백두산 시설5급 명호남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 1. ~ ‵24. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 착수 ※ 도로과-3319호		‵19. 3. 18.		서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 요청 및 보완통보 ※ 도로과-7193호 ※ 영산강유역환경청 환경평가과-5773		‵19. 6. 10. ‵19. 7. 18.		서유권 과장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 소규모 환경영향평가 보완 및 협의완료 ※ 도로과-13233, 14094호 ※ 영산강유역환경청 환경평가과-9368호		‵19. 10. 28. ‵19. 11. 14. ‵19. 12. 5.		서유권 과장 이재태 팀장 김종서 주무관
○ 인사발령에 따른 감독공무원 변경 ※ 도로과-363(2020. 1. 9.) ※ 회계과-2519(2020. 1. 15.)		‵20. 1. 8.		박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 박희진 주무관 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 공유수면 매립면허 실시계획승인 신청 ※ 도로과-3812(2020. 3. 19.)		‵20. 3. 19.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시계획인가 신청 ※ 도로과-4827호		‵20. 4. 8.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 공유수면의 점용·사용 허가 대상 여부 검토 요청 ※ 도로과-7100호		‵20. 5. 28.		이영호 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 일상감사 의뢰 ※ 도로과-7146호		‵20. 5. 29.		이영호 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 재해영향평가(보완) 용역 계약체결 의뢰 ※ 도로과-8256호		‵20. 6. 22.		이영호 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 특허 사용협약 체결 요청 ※ 도로과-8848호		‵20. 7. 2.		이영호 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 재해영향평가(보완) 용역 착수계 ※ 도로과-9033호		‵20. 7. 7.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 재해영향평가 검토 협의 ※ 도로과-9292호		‵20. 7. 13.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 특허 사용협약 체결 ※ 도로과-9435호		‵20. 7. 15.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 재해영향평가(보완) 용역 일시정지 ※ 도로과-10080호		‵20. 7. 15.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 소규모 재해영향평가 심의결과(조건부 협의) 알림 ※ 도로과-10294호		‵20. 8. 3.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 관련기관(부서) 협의의견(추가)에 대한 조치계획 제출 ※ 도로과-10300호		‵20. 8. 3.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 재해영향평가(보완) 용역 완료계 ※ 도로과-12298호		‵20. 9. 21.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로확포장공사 시행 계획 ※ 도로과-13204호		‵20. 10. 13.		권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 도로확포장공사 시행 계획 ※ 도로과-14761호		‵20. 11. 19.		권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 계약심사 의뢰 ※ 도로과-15616호		‵20. 12. 9.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 총괄 및 1차분 계약체결 의뢰 ※ 도로과-15773호		‵20. 12. 14.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 관급자재 구매(수의계약) 요청 ※ 도로과-16184호		‵20. 12. 23.		강 균 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 총괄 및 1차분 착공계 ※ 도로과-554호		‵21. 1. 14.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 폐기물처리용역 계약심사 요청 ※ 도로과-1774호		‵21. 2. 10.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 폐기물처리용역 계약체결 의뢰 ※ 도로과-2387호		‵21. 2. 26.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 소규모 환경영향평가 착공 통보 ※ 도로과-2711호		‵21. 3. 8.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 실시설계용역 설계변경 검토보고 ※ 도로과-3384호		‵21. 3. 17.		임광건 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 계약심사 완료 ※ 도로과-3335호		‵21. 3. 19.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시계획(변경) 인가 신청 ※ 도로과-3953호		‵21. 4. 1.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 사업수행능력평가위원회 구성 및 운영 계획 ※ 도로과-4803호		‵21. 4. 20.		임광건 국장 강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 사업수행능력평가 결과 보고 ※ 도로과-5138호		‵21. 4. 28.		임광건 국장 강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사 실정보고 검토보고 ※ 도로과-4803호		‵21. 5. 3.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 착수 ※ 도로과-6338호		‵21. 5. 27.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사 선금 지급 결정 ※ 도로과-6596호		‵21. 6. 2.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사 기성대가(1회) 지급 결정 ※ 도로과-7027호		‵21. 6. 11.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 실시설계용역 준공 ※ 도로과-7432호		‵21. 6. 18.		강 균 과장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사 실정보고 검토보고 ※ 도로과-8160호		‵21. 7. 5.		강 균 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 한상범 주무관
○ 도로확장공사 설계변경(1회) 검토보고 ※ 도로과-8732호		‵21. 7. 19.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 항만개발사업 착수 신고서 제출 ※ 도로과-8733호		‵21. 7. 19.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 공유수면 점․사용 협의 결과 알림 ※ 도로과-9033호		‵21. 7. 26.		강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(총괄분 및 1차분) 변경계약 체결 ※ 도로과-9228호		‵21. 7. 29.		강 균 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 공사(총괄분 및 1차분) 등 3건 일시정지 요청 ※ 도로과-10610호		‵21. 9. 2.		강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-12036호		‵21. 10. 12.		강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 소규모재해영향평가 협의내용 이행 자료 제출 ※ 도로과-12284호		‵21. 10. 18.		강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업인정에 관한 의견청취 결과 제출 ※ 도로과-13698호		‵21. 11. 23.		강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 실시계획(변경)인가 신청 관련부서 협의의견 조치계획 제출 ※ 도로과-14709호		‵21. 12. 17.		강 균 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사(총괄 및 1차분) 일시정지 해지 ※ 도로과-2518호		‵22. 3. 7.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 재착수 ※ 도로과-2631호		‵22. 3. 8.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 소규모재해영향평가 협의내용 이행 자료 제출 ※ 도로과-3309호		‵22. 3. 24.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 안전관리계획서(보완) 검토 보고 ※ 도로과-5131호		‵22. 5. 9.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 공사 재 착공 통보 ※ 도로과-5244호		‵22. 5. 11.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 폐기물처리용역 일시정지 해지 및 변경계약 요청 ※ 도로과-5703호		‵22. 5. 20.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역(1차분) 준공 ※ 도로과-5906호		‵22. 5. 26.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역(2차분) 착공 ※ 도로과-6163호		‵22. 6. 3.		오정환 과장 전명수 팀장 한상범 주무관
○ 사업계획 변경 실정보고 승인 ※ 도로과-8720호		‵22. 8. 4.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회,2회,3회) 검토 용역 계약의뢰 ※ 도로과-8828호		‵22. 8. 8.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 변경계약(공사기간 연장) 요청 ※ 도로과-9043호		‵22. 8. 12.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 설계 누락·정정 사항 등 실정보고 승인 ※ 도로과-9606호		‵22. 8. 30.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 변경계약의뢰(총괄1회, 1차분2회) ※ 도로과-10536호		‵22. 9. 21.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 토지수용 재결신청서 열람공고 의뢰 결과 제출 ※ 도로과-12235호		‵22. 10. 6.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청(1회,2회,3회) 검토 결과 보고 ※ 도로과-11966호		‵22. 10. 25.		정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이동일 과장 이 강 팀장 오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 실정보고(암선변경 및 안벽콘크리트 반영)에 대한 검토 ※ 도로과-12139호		‵22. 10. 28.		박현식 부시장 문인기 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 이동일 과장 이 강 팀장 오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 실정보고(암선변경 및 안벽콘크리트 반영) 승인 ※ 도로과-12167호		‵22. 10. 28.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 주무관
○ 수용재결에 따른 보상협의 및 공탁안내 ※ 도로과-12874호		‵22. 11. 14.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 기성검사 결과보고(1차분 4회) ※ 도로과-13171호		‵22. 11. 22.		김민수 주무관
○ 2022년도 제5회 지방토지수용위원회 재결서 공시송달 공고 ※ 도로과-13176호		‵22. 11. 22.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 재결서 정본 공시송달 공고 게시 의뢰 ※ 도로과-13179호		‵22. 11. 22.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 공탁 및 소유권 이전 대리인 임명 ※ 도로과-13500호		‵22. 11. 29.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 토지수용 재결에 따른 공탁금 위임 집행 ※ 도로과-13522호		‵22. 11. 29.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 김정아 팀장 박상진 차장 김민수 주무관
○ 민원발생 알림 및 조치계획 제출 ※ 도로과-13653호		‵22. 12. 2.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 차장
○ 사업계획 변경에 따른 재해영향평가에 대한 협의 ※ 도로과-13691호		‵22. 12. 2.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 차장
○ 공사기간연장 요청에 대한 검토보고(1차분) ※ 도로과-13720호		‵22. 12. 5.		문인기 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 전명수 팀장 박상진 차장
○ 실정보고(암거변경 및 종점부 접속처리 개선 등)에 대한 검토 ※ 도로과-13845호		‵22. 12. 7.		박현식 부시장 문인기 국장 오정환 과장 이동일 과장 한진숙 과장 이강 팀장 김진욱 팀장 전명수 팀장 박상진 차장
○ 변경계약 체결 알림(총괄 및 1차분) ※ 회계과-59581호, 도로과-13691호		‵22. 12. 13.		박상진 차장
○ 건설사업관리 용역 월간 보고서(11월) 제출 ※ 도로과-14054호		‵22. 12. 13.		박상진 차장
○ 11월 공정보고 제출 ※ 도로과-14056호		‵22. 12. 13.		박상진 차장
○ 편입 토지 수용재결에 따른 공탁 및 소유권이전 완료 안내 ※ 도로과-14343호		‵22. 12. 19.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 하도급 변경계약사항 검토결과 제출 ※ 도로과-14325호		‵22. 12. 19.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 차장
○ 기성검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-62616호, 도로과-14494호		‵22. 12. 22.		박상진 차장
○ 주변환경 피해 저감 대책수립 시행 ※ 도로과-14660호		‵22. 12. 27.		오정환 과장 전명수 팀장 박상진 차장
○ 소규모환경영향평가 환경보전방안 검토용역 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-63269호, 도로과-14632호		‵22. 12. 26.		박상진 차장
○ 계약체결 및 감독공무원 알림 ※ 회계과-63270호, 도로과-14633호		‵22. 12. 26.		박상진 차장
○ 착수계(재해영향평가 변경이행계획수립 용역) ※ 도로과-14789호		‵22. 12. 30.		박상진 차장
○ 착수계(소규모환경영향평가 환경보전방안 검토용역) ※ 도로과-14790호		‵22. 12. 30.		박상진 차장
○ 구간내 기존 폐기물 처리 협조 요청 ※ 도로과-590호		‵23. 1. 16.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 편입(국방부)토지 용도폐지 요청 ※ 도로과-779호		‵23. 1. 19.		오정환 과장 김정아 팀장 김민수 주무관
○ 하도급 변경계약사항 검토결과 제출 ※ 도로과-830호		‵23. 1. 25.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 구간내 기존 폐기물 처리 협조 요청 ※ 도로과-590호		‵23. 1. 16.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 사업계획 변경에 따른 해역이용 재 협의 대상여부 협의 ※ 도로과-1621호		‵23. 2. 15.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 소규모재해영향평가 변경이행계획서 제출 ※ 도로과-1634호		‵23. 2. 15.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 소규모환경영향평가 환경보전방안 검토용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-6219, 도로과-1781호		‵23. 2. 20.		박상진 차장
○ 재해영향평가 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-6221, 도로과-1782호		‵23. 2. 20.		박상진 차장
○ 물가변동으로 인한 조정신청 검토결과보고(4회ES) ※ 도로과-2022호		‵23. 2. 21.		김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 박형열 담당관 김진욱 팀장 서은주 팀장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 물가변동에 의한 계약금액조정(4회) 검토결과 결과 알림 ※ 도로과-2053호		‵23. 2. 27.		오정환 과장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 설계변경(총괄2회, 1차분3회) 검토보고 ※ 도로과-2735호		‵23. 3. 14.		이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 박형열 담당관 김진욱 팀장 서은주 팀장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 설계변경 자료제출(총괄분 2회, 1차분 3회) ※ 도로과-2741호		‵23. 3. 15.		박상진 차장
○ 2월 공정보고 제출 ※ 도로과-2746호		‵23. 3. 15.		박상진 차장
○ 기술지원 기술인 현장점검(2월) 결과보고 ※ 도로과-2747호		‵23. 3. 15.		박상진 차장
○ 건설사업관리용역 월간 보고서(2월) 제출 ※ 도로과-2748호		‵23. 3. 15.		박상진 차장
○ 변경계약 의뢰(총괄 2회, 1차분 3회) ※ 도로과-2755호		‵23. 3. 15.		김정아 팀장 이광재 팀장 박상진 차장
○ 통합건설사업관리용역(2회ES) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토보고 ※ 도로과-3368호		‵23. 3. 28.		오정환 과장 한진숙 과장 박형열 담당관 김진욱 팀장 서은주 팀장 박상진 팀장
○ 통합건설사업관리용역 물가변동에 의한 계약금액조정 검토결과 알림 ※ 도로과-3424호		‵23. 3. 30.		오정환 과장 박상진 팀장
○ 변경계약 체결 알림(총괄분) ※ 회계과-12909호, 도로과-3392호		‵23. 3. 29.		박채훈 주무관
○ 3월 공정보고 제출 ※ 도로과-4084호		‵23. 4. 13.		박채훈 주무관
○ 시행계획 보고(2차분) ※ 도로과-4686호		‵23. 4. 26.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 계약체결 및 감독공무원 지정 통보(2차분) ※ 도로과-4960호		‵23. 5. 8.		박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역 실정보고(설계변경)건 제출 ※ 도로과-5081호		‵23. 5. 9.		박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역 설계변경(총괄2회, 2차분1회) 검토보고 ※ 도로과-5379호		‵23. 5. 15.		김종기 부시장 이경종 국장 박형열 담당관 봉영권 팀장 김진욱 팀장 서은주 팀장 김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 하도급 계약사항 검토결과 제출(2차분) ※ 도로과-5377호		‵23. 5. 17.		김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역(총괄 2회, 2차분 1회) 변경계약 의뢰 ※ 도로과-5381호		‵23. 5. 17.		김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 시행계획 보고 ※ 도로과-5418호		‵23. 5. 17.		이경종 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 준공검사원 제출(통합건설사업관리용역 2차분) ※ 도로과-5592호		‵23. 5. 23.		박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역(총괄 및 2차) 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-24587호, 도로과-5778호		‵23. 5. 30.		박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역(2차분) 준공검사공무원 지정 통보 ※ 회계과-24586호, 도로과-5779호		‵23. 5. 30.		박채훈 주무관
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 통보 ※ 회계과-24588호, 도로과-5780호		‵23. 5. 30.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사(2차분) 기성대가(1회) 확정 통보 ※ 회계과-25209호, 도로과-5883호		‘23. 6. 1.		박채훈 주무관
○ 5월 공정보고 제출 ※ 도로과-6771호		‘23. 6. 21.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 통합건설사업관리용역(3차분) 선금 지급 결정 통보 ※ 회계과-30609호, 도로과-6938호		‘23. 6. 26.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 폐기물처리용역 설계변경 자료검토 보고 ※ 도로과-7246호		‘23. 7. 3.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 폐기물처리용역 설계변경 검토보고 ※ 도로과-7474호		‘23. 7. 4.		김종기 부시장 이영호 과장 오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 서은주 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 폐기물처리용역 변경계약 의뢰 ※ 도로과-7478호		‘23. 7. 7.		오정환 과장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 폐기물처리용역 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-34419호, 도로과-7620호		‘23. 7. 12.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사(2차분) 기성대가(2회) 알림 ※ 회계과-35348호, 도로과-7850호		‘23. 7. 17.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 현장기술자 변경 검토보고 ※ 회계과-35535호, 도로과-7878호		‘23. 7. 17.		박채훈 주무관
○ 삼산면 변촌~장촌 도로확포장 공사 현장대리인 변경 검토사항 회신 ※ 도로과-7970호		‘23. 7. 19.		김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 품질관리자 변경 검토보고 ※ 도로과-7885호		‘23. 8. 7.		김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 품질관리자 변경 검토사항 회신 ※ 도로과-8940호		‘23. 8. 9.		김정아 팀장 박상진 팀장 박채훈 주무관
○ 7월 공정보고 제출 ※ 도로과-9537호		‘23. 8. 25.		박채훈 주무관
○ 기성검사 수행계획보고 2차분 3회 ※ 도로과-10119호		‘23. 9. 8.		배경춘 주무관
○ 기성대가(3회) 확정 알림 ※ 도로과-10551호		‘23. 9. 19.		백두산 주무관
○ 건설사업관리용역 월간 보고서(8월) ※ 도로과-11015호		‘23. 10. 5.		백두산 주무관
○ 기술지원 기술인 현장점검(8월) 결과보고 ※ 도로과-11016호		‘23. 10. 5.		백두산 주무관
○ 8월 공정보고 제출 ※ 도로과-11018호		‘23. 10. 5.		백두산 주무관
○ 공사 기성검사 결과보고(2차분 3회) ※ 도로과-11035호		‘23. 10. 5.		백두산 주무관
○ 도로 확포장 공사에 따른 침수 발생 구간 포장 요청 ※ 도로과-11181호		‘23. 10. 11.		백두산 주무관
○ 손해배상 청구 소송방침 결정(안) ※ 도로과-11461호		‘23. 10. 17.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 박형렬 담당관 화예진 팀장 백영화 변호사 심근하 과장 박상진 팀장 백두산 주무관
○ 폐기물처리용역 준공검사 결과보고 ※ 도로과-11715호		‘23. 10. 24.		백두산 주무관
○ 기술지원기술인 현장점검(9월) 결과보고 ※ 도로과-11824호		‘23. 10. 26.		백두산 주무관
○ 건설사업관리용역 월간보고(9월) ※ 도로과-11825호		‘23. 10. 26.		백두산 주무관
○ 9월 공정보고 제출 ※ 도로과-11826호		‘23. 10. 26.		백두산 주무관
○ (총괄및2차분)변경계약체결 알림 ※ 회계과-53692호		‘23. 10. 31.		백두산 주무관
○ (2차분)기성대가(4회)확정 알림 ※ 회계과-56619호		‘23. 11. 14.		백두산 주무관
○ 건설사업관리용역 월간보고(10월) ※ 도로과-13229호		‘23. 11. 23.		백두산 주무관
○ 기술지원기술인 현장점검(10월) 결과보고 ※ 도로과-13230호		‘23. 11. 23.		백두산 주무관
○ 10월 공정보고 제출 ※ 도로과-13231호		‘23. 11. 23.		백두산 주무관
○ 11월 공정보고 제출 ※ 도로과-13925호		‘23. 12. 8.		백두산 주무관
○ 건설사업관리용역 월간보고(11월) ※ 도로과-13926호		‘23. 12. 8.		백두산 주무관
○ 기술지원기술인 현장점검(11월) 결과보고 ※ 도로과-13927호		‘23. 12. 8.		백두산 주무관
○ 준공검사 결과보고 ※ 도로과-13948호		‘23. 12. 11.		백두산 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림 ※ 도시계획과-2908호		‘23. 12. 11.		백두산 주무관
○ 소규모재해영향평가 협의 사업장 준공 통보서 제출 ※ 도로과-14149호		‘23. 12. 14.		심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 백두산 주무관
○ 소규모 환경영향평가 대상사업 준공 통보 ※ 도로과-14643호		‘23. 12. 27.		심근하 과장 전결 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 백두산 주무관
○ 공사 및 통합건설사업관리용역 물가변동 정산 검토 용역 준공 ※ 도로과-2416호		‘24. 2. 27.		명호남 과장 전결 황규석 팀장 백두산 주무관
○ 비관리청 항만개발사업 준공확인증명서 교부 ※ 여수지방해양수산청-2918호		‘24. 7. 15.		백두산 주무관
○ 편입 국유지 손실보상금 집행 ※ 도로과-3528호		‵24. 10. 8.		명호남 과장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 정진희 팀장 김수정 주무관