정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	학용정수장 정수지 증설공사
② 추진배경	학용정수장 급수구역 확장 및 이상기온 발생으로 인한 생활용수 부족상황 해결방안으로 정배수지 기능 확대
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 학용정수장 일원 ○ 사업비 : 2,000백만 원 ○ 사업규모 : 정수지 1지(5,000㎥) ○ 사업기간 :‘19. 1. ~‘21. 5.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설7급 정상기 시설5급 오정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘19. 1. ~‘21. 5.
<그간 주요 추진내용>
○ 학용정수장 정수지 증설공사 실시설계용역 집행 계획 ※ 상수도과-1027		‘19. 1.17.		고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 실시설계용역 계약심사 요청 ※ 상수도과-1193		‘19. 1.21.		강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 실시설계용역 일상감사 요청 ※ 상수도과-1194		‘19. 1.21.		강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 실시설계용역 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-1643		‘19. 1.28.		강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 실시설계용역 계약체결 ※ 수도행정과-5429		‘19. 3.22.		강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 실시설계용역 일시정지 ※ 수도행정과-4087		‘19. 5.23.		강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장

○ 학용정수장 정수지 증설공사 집행계획 ※ 상수도과-15731	‘19. 8.23.	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사 총괄 및 1차분 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-17749	‘19. 9.25.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 ※ 수도행정과-7567	‘19. 9.26.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 실시설계용역 준공 ※ 상수도과-7632	‘19. 9.30.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사 총괄 및 1차분 공사 착공 ※수도행정과-9673	‘19. 12. 5.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사(2차분) 집행계획 수립 ※상수도과-6011	‘20. 3.20.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사(2차분) 계약체결 ※수도행정과-6362	‘20. 3.30.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사(2차분) 착공 ※상수도과-6935	‘20. 4. 7.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사 자재공급원 승인 통보 ※상수도과-14011	‘20. 7. 20.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사 관급자재 구매의뢰 ※상수도과-18905	‘20. 9. 28.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 차장
○ 학용정수장 정수지 증설공사 총괄(1회) 및 1차분(1회) 변경 계약의뢰 ※상수도과-22654	‘20. 11. 23.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 차장

○ - 학용정수장 정수지 증설공사(1차분 및 2차분) - 실정보고에 따른 설계 변경 검토 보고 ※ 상수도과-2223	‘21. 1. 29.	김지선 단장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장
○ 「학용정수장 정수지 증설공사」 총괄(2회) 및 1차분(2회), 2차분(1회) 변경 계약의뢰 ※ 상수도과-2405	‘21. 2. 3.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장
○ 「학용정수장 정수지 증설공사(총괄 및 1차분)」변경계약 사항 통보 ※ 수도행정과-1224	‘21. 2. 4.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장
○ - 학용정수장 정수지 증설공사(총괄 및 2차분) - 구정수지 정비 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-5020	‘21. 3. 11.	김지선 단장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장
○ 「학용정수장 정수지 증설공사」 총괄(3회) 및 2차분(2회) 변경 계약의뢰 ※ 상수도과-6221	‘21. 3. 29.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장
○ 「학용정수장 정수지 증설공사(총괄 및 2차분)」변경계약 사항 통보 ※수도행정과-6768	‘21. 4. 5.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장
○ 「학용정수장 정수지 증설공사(2차분)」준공검사공무원 지정 통보 ※수도행정과-10251	‘21. 5. 28.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 팀장