정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명

연등천 재해예방사업

② 추진배경

지구온난화 등 기상이변에 따른 침수피해 사전 예방을 위해 도심

지내 하천 최적홍수 방어 사업을 위함

③ 사업개요

○ 위    치: 둔덕동~남산동(연등천 일원)

○ 사 업 비: 38,932백만원(국 19,46650%, 도 5,84015% , 시 13,62635%)

○ 사 업 량 : 하천정비 L=6.14㎞

- 기본 및 실시설계용역 1식

- 둔덕유수지 V=35만㎥, 보축 및 하도정비 1식

□ 연등천 재해예방사업 기본 및 실시설계 용역(추진중)

◦ 용역기간 : ’20. 5. 11. ∼ ’21. 11. 1.

◦ 과업범위 : 연등천 일원(둔덕동 332번지 ∼ 남산동 1190-1번지)

◦ 용역내용 : 조사측량, 토질조사, 기본 및 실시설계, 하천기본계획(변경), 재해영향평가, 도시관리계획(변경)결정

◦ 용 역 비 : 1,910백만원(국비 955 50%, 도비 286.5 15%, 시비 668.5 35%)

◦ 용 역 사 : ㈜삼안 등 5개사

④ 사업부서

여수시 건설과

⑤ 담당자

장현철 과장

김용채 팀장

김동언 차장

박소영 주무관(보상)

⑥ 선정기준

10억 원 이상의 공사(용역)

⑦ 사업기간

ʼ18. 1. ~ ʼ26. 12.

<그간 주요 추진내용>

○ 2018년도 지방하천 정비사업 국고

보조금 및 세부사업 확정

※ 건설과-979호(2018. 1. 29.)

ʼ18. 1. 29.

천춘길 과장

오정환 팀장

김용채 주무관

○ 제1차유역관리협의회 개최

※ 건설과-5762호(2019. 5. 1.)

ʼ19. 5.  1.

주영근 과장

서범규 팀장

위성현 주무관

○ 제2차유역관리협의회 개최

※ 건설과-9752호(2019. 7. 22.)

ʼ19. 7. 22.

주영근 과장

서범규 팀장

위성현 주무관

○ 집행계획 방침결정

※ 건설과-10752호(2019. 8. 14.)

ʼ19. 8. 14.

주영근 과장

서범규 팀장

위성현 주무관

○ 제3차유역관리협의회 개최

※ 건설과-14327호(2019.10.31.)

ʼ19.10.31.

주영근 과장

서범규 팀장

위성현 주무관

○ 사전행정절차 이행

- 지방건설기술심의

※ 건설과-13266호(2019.10.10.)

-일상감사

※ 건설과-14473호(2019.11.05.)

- 계약심의

※ 건설과-15219호(2019.11.18.)

- 계약심사

※ 건설과-16779호(2019.12.20.)

ʼ19.12.31.

주영근 과장

서범규 팀장

위성현 주무관

○ 용역 집행계획

※ 건설과-2148호(2020. 2.19.)

ʼ20. 2.19.

권오봉 시장

서은수 부시장

장세길 국장

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ 사전행정절차 이행

- 사전규격 공개 의뢰

※ 건설과-2176호(2020. 2.19.)

- 집행계획 및 평가서 제출안내 공고

※ 건설과-2972호(2020. 3. 4.)

ʼ20. 3. 4.

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ PQ 평가위원회 구성·운영 계획

※ 건설과-3253호(2020. 3. 10.)

ʼ20. 3.10.

장세길 국장

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ SOQ 평가위원회 구성·운영 계획

※ 건설과-4618호(2020. 4. 2.)

ʼ20. 4. 2.

장세길 국장

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ 연등천 재해예방사업 기본 및 실시설계 용역 계약체결

※ 건설과-5203호(2020. 4.13.)

ʼ20. 4.13.

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ 기본 및 실시설계용역 착공

※ 회계과-26984호(2020. 5. 8.)

ʼ20. 5.11.

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ 전략 및 소규모환경영향평가
용역 계약체결 의뢰

※ 건설과-16080호(2020. 11. 11.)

ʼ20.11.11.

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ 전략 및 소규모환경영향평가
용역 착수

※ 회계과-66739호(2020. 12. 8.)

ʼ20.12.10

주영근 과장

박성식 팀장

김한수 주무관

○ 연등천 재해예방사업 기본 및 실시설계 용역 감독변경

※ 회계과-1575호(2020. 1.12.)

ʼ21. 1.12.

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 공공측량 성과 심사 의뢰

※ 건설과-1394(2021. 1.29.)

ʼ21. 1.29

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 매장문화재 지표조사 용역 착수

※ 회계과-7886(2021. 2.19.)

ʼ21. 2.21.

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 자문(1차) 요청

※ 건설과-2553(2021. 2.22.)

ʼ21. 2.22.

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 자문(1차) 결과 통보

※ 전라남도 자연재난과- 4424(2021. 3.10.)

ʼ21. 3.10

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 자문(1차)조치계획서 제출

※ 건설과-6531(2021. 5.3.)

ʼ21. 5. 3.

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 자문(2차) 요청

※ 건설과-9665(2021. 6.30.)

ʼ21. 6.30.

박상훈 과장

박성식 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 개최

※ 전라남도 자연재난과- 12497(2021. 7.8.)

ʼ21. 7. 8.

박상훈 과장

정종기 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 자문(3차) 요청

※ 건설과-14308(2021. 9.30.)

ʼ21. 9. 3.0

박상훈 과장

정종기 팀장

박가영 주무관

○ 지역수자원관리위원회 개최

※ 전라남도 자연재난과- 18675(2021. 10.15.)

ʼ21.10.15.

박상훈 과장

정종기 팀장

박가영 주무관

○ 하천기본계획변경 수립고시

※ 전라남도 자연재난과- 23269(2021.12.14.)

ʼ21.12.14.

박상훈 과장

정종기 팀장

박가영 주무관

○ 사업인정에 관한 의견정취 공고 ※ 건설과-1041(2022. 1.21.)	ʼ22. 1.24.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 보상열람공고 ※ 건설과-3366(2022. 3.15.)	ʼ22. 3.15.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 감정평가 의뢰 ※ 건설과-5873(2022. 4.29.)	ʼ22. 4.29.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 사업인정(의제) 완료 ※ 중토위-18957(2022. 6.10.)	ʼ22. 6.10.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 완료 ※ 환경평가과-4266(2022. 6.17.)	ʼ22. 6.23.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 산지전용 협의 완료 ※ 건설과-9862(2022. 7. 8.)	ʼ22. 7. 8.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 감정평가 회보 ※ 건설과-10265,10266,10267(2022. 7.18.)	ʼ22. 7.18.	심근하 과장 정종기 팀장 박가영 주무관
○ 보상 추진계획 방침 결정 ※ 건설과-10911(2022. 7.29.)	ʼ22. 7.29.	정기명 시장 박현식 부시장 문인기 국장 심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 보상추진(100% 편입되는 필지 우선) ※ 건설과-10265,10266,10267(2022. 7.18.)	ʼ22. 8. 5.	심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 소규모환경영향평가 협의내용 반영결과 제출 ※ 건설과-10978(2022. 8. 1.)	ʼ22. 8. 1.	심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 총사업비 변경 협의를 위한 출장결과보고 ※ 건설과-13905(2022. 9.26.), 14524(2022. 10.11.)	ʼ22. 9.26.	심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 사업계획 및 총사업비 변경 요청 ※ 건설과-13905(2022. 9.26.), 14524(2022. 10.11.)	ʼ22. 11.10.	심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 전략 및 소규모환경영향평가 일시정지 해지 ※ 건설과-18139(2022. 12.19.) ※ 회계과-63282(2022. 12.26.)	ʼ22. 12.26.	심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 총사업비 조정 승인 통보 ※ 전라남도 자연재난과-26445(2022. 12.26.)	ʼ22. 12.27.	심근하 과장 정종기 팀장 김동언 주무관
○ 편입토지 등 보상협의 요청(2차) ※ 건설과-330(2023. 1. 6.)	ʼ23. 1. 6.	심근하 과장 정종기 팀장 박민혁 주무관
○ 전라남도 건설기술심의 요청 ※ 건설과-1916(2023. 2. 9.)	ʼ23. 2. 9.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 하천공사 시행계획 수립(안) ※ 건설과-3273(2023. 3. 6.)	ʼ23. 3. 6.	이경종 국장 심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 하천공사 시행계획 고시 ※ 건설과-3308(2023. 3. 6.)	ʼ23. 3. 6.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 지적측량(분할, 현황) 의뢰 ※ 건설과-3510(2023. 3. 8.)	ʼ23. 3. 8.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 2023년 시군시행 지방하천 정비사업(연등천) 소요예산 제출 ※ 건설과-4102(2023. 3.17.)	ʼ23. 3.17.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 지적측량 완료 및 수수료 청구 ※ 한국국토정보공사 여수지사-1278 (2023. 3.31.)	ʼ23. 3.31.	최병욱 지사장 장내원 주무관
○ 2023년 제4회 전라남도 건설기술심의위원회 소위원회 심의 결과 알림(연등천) ※ 전라남도 지역계획과-5069(2023. 4. 3.)	ʼ23. 4. 3.	문인기 과장 최의진 팀장 황계선 주무관
○ 지적측량 수수료 집행 ※ 건설과-5161(2023. 4. 4.)	ʼ23. 4. 4.	심근하 과장 봉영권 팀장(협조) 김진욱 팀장(협조) 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 하천공사 시행계획 변경 고시 ※ 건설과-6188(2023. 4.17.)	ʼ23. 4.17.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 편입토지 등 보상협의 요청 ※ 건설과-6905(2023. 4.27.)	ʼ23. 4.27.	심근하 과장 최종춘 팀장 최지명 주무관
○ 매장문화재 지표조사 용역 일시정지 해지 요청 ※ 건설과-7052(2023. 5. 1.)	ʼ23. 5. 1.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 매장문화재 지표조사 용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 ※ 회계과-21921(2023. 5.16.)	ʼ23. 5.16.	한진숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 연등천 재해예방사업부지 내 문화재 보존대책 통보 ※ 문화유산과-5312(2023. 5.19.)	ʼ23. 5.19.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 연등천 재해예방사업 매장문화재 표본조사용역 계약심사 의뢰 ※ 건설과-8608(2023. 5.22.)	ʼ23. 5.22.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 토지 보상 관련 안내 ※ 건설과-8907(2023. 5.25.)	ʼ23. 5.25.	박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 최지명 주무관
○ 연등천 재해예방사업 매장문화재 표본조사용역 계약심사 결과 알림 ※ 감사담당관-5723(2023. 5.25.)	ʼ23. 5.25.	정웅정 담당관 이재태 팀장 송수진 주무관
○ 연등천 재해예방사업 매장문화재 표본조사용역 계약 의뢰 ※ 건설과-8978(2023. 5.26.)	ʼ23. 5.26.	박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 2023년 제4회 전라남도 건설기술심의위원회 소위원회 심의 의견 조치계획서 제출(연등천) ※ 건설과-9034(2023. 5.26.)	ʼ23. 5.26.	박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 국유재산 무상귀속 협의(연등천 재해예방사업) ※ 건설과-10368(2023. 6.15.)	ʼ23. 6.15.	심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 진입도로 옹벽에 대한 신기술·특허공법 선정 시행계획 검토 ※ 건설과-10713(2023. 6.20.)	ʼ23. 6.20.	이경종 국장 한진숙 과장(협조) 김진욱 팀장(협조) 심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 관리용 도로 옹벽 공법 선정을 위한 예비위원 선정 및 공법선정위원회 개최 계획 ※ 건설과-11769(2023. 7. 3.)	ʼ23. 7. 3.	이영호 과장(대결) 심근하 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 관리용 도로 옹벽 공법 선정 관련 신기술 특허 정량평가 및 공법선정위원회 개최 계획 ※ 건설과-17045(2023. 9.18.)	ʼ23. 9.18.	이경종 국장 주영근 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 관리용 도로 옹벽 공법 선정 관련 신기술 특허 공법 선정 결과 보고 ※ 건설과-18108(2023.10. 9.)	ʼ23.10. 9.	이경종 국장 주영근 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 신기술·특허공법 사용에 따른 협의 요청(연등천 재해예방사업) ※ 건설과-18233(2023.10.11.)	ʼ23.10. 9.	박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 관련 신기술·특허 사용협약 체결 ※ 건설과-18459(2023.10.16.)	ʼ23.10.16.	주영근 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 관급자재선정 심의위원회 심의 의뢰 ※ 건설과-22425(2023.12.12.)	ʼ23.12.12.	주영근 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 매장문화재 표본조사 용역 일시정지 해지 검토 ※ 건설과-233(2024. 1. 4.)	ʼ24. 1. 4.	염승열 국장 한진숙 과장(협조) 김진욱 팀장(협조) 박경 팀장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 매장문화재 표본조사 용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-2346(2024. 1.15.)	ʼ24. 1.15.	강행숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 연등천 재해예방사업 편입토지(지장물 등)에 대한 재감정평가 의뢰(추가) ※ 건설과-2038(2024. 1.31.)	ʼ24. 1.31.	김정남 과장 박경 팀장 정용웅 주무관
○ 연등천 재해예방사업 매장문화재 표본조사용역 준공검사조서 제출 ※ 건설과-2519(2024. 2. 7.)	ʼ24. 2. 7.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 재감정평가 손실보상 추진 계획 ※ 건설과-2696(2024. 2.13.)	ʼ24. 2.13.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 국장 강행숙 과장(협조) 김정남 과장 김진욱 팀장(협조) 김용채 팀장(협조) 김동언 주무관(협조) 박경 팀장 정용웅 주무관
○ 연등천 재해예방사업 편입토지 등 보상협의 요청(1차) ※ 건설과-2831(2024. 2.14.)	ʼ24. 2.14.	김정남 과장 박경 팀장 장명순 실무원(협조) 정용웅 주무관
○ 2024년 시군시행 지방하천정비사업(연등천 재해예방사업) 추진계획서 제출 ※ 건설과-3129(2024. 2.19.)	ʼ24. 2.19.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 편입토지 등 보상협의 요청(2차) ※ 건설과-2831(2024. 3.18.)	ʼ24. 3.18.	김정남 과장 박경 팀장 장명순 실무원(협조) 정용웅 주무관
○ 연등천 재해예방사업 추진에 따른 산지전용(변경) 협의 요청 ※ 건설과-5016(2024. 3.18.)	ʼ24. 3.18.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 하천공사실시계획인가 변경 협의 ※ 건설과-5027(2024. 3.18.)	ʼ24. 3.18.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업(토목) 등 3건 일상감사 의뢰 ※ 건설과-5013(2024. 3.18.)	ʼ24. 3.18.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업(토목) 등 3건 일상감사 의견 조치결과 제출 ※ 건설과-5512(2024. 3.25.)	ʼ24. 3.25.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 추진 현황 및 계획 ※ 건설과-5562(2024. 3.25.)	ʼ24. 3.25.	염승열 국장 김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 조달청 공사원가 사전검토 등록 요청 ※ 건설과-5600(2024. 3.25.)	ʼ24. 3.25.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 외 1건 계약심사 요청 ※ 건설과-6297(2024. 4. 3.)	ʼ24. 4. 3.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 편입토지 등 보상협의 요청(3차) ※ 건설과-6321(2024. 4. 4.)	ʼ24. 4. 4.	김정남 과장 박경 팀장 장명순 실무원(협조) 정용웅 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ) 계획 검토 보고 ※ 건설과-6887(2024. 4.12.)	ʼ24. 4.12.	염승열 국장 김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 PQ 소위원회 심의 결과 보고 ※ 건설과-6967(2024. 4.15.)	ʼ24. 4.15.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 구매규격 사전공개 ※ 건설과-6994(2024. 4.15.)	ʼ24. 4.15.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 사업수행능력평가서 제출 안내 공고 게재 의뢰 ※ 건설과-7456(2024. 4.22.)	ʼ24. 4.22.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업(총괄 및 1차분) 등 2건 계약의뢰 ※ 건설과-8260(2024. 5. 2.)	ʼ24. 5. 2.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 사업수행능력평가(면접) 계획 검토 보고 ※ 건설과-8958(2024. 5.13.)	ʼ24. 5.13.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 국장 김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 사업수행능력평가(면접) 계획 알림 ※ 건설과-9197(2024. 5.16.)	ʼ24. 5.16.	김정남 과장 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ) 결과 보고 ※ 건설과-9681(2024. 5.23.)	ʼ24. 5.23.	염승열 국장 김정남 과장 최종춘 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 계약의뢰 ※ 건설과-10027(2024. 5.28.)	ʼ24. 5.28.	박경 팀장(대결) 김용채 팀장 김동언 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설폐기물처리용역 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-29521(2024. 6. 5.)	ʼ24. 6. 5.	김병완 국장 강행숙 과장 우희원 팀장 김대건 주무관
○ 연등천 재해예방사업 토목공사(총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-29606(2024. 6. 7.)	ʼ24. 6. 7.	김병완 국장 강행숙 과장 김진욱 팀장 김대건 주무관
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역(총괄 및 1차분) 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-31891(2024. 6.18.)	ʼ24. 6.18.	김병완 국장 김남영 팀장 김진욱 팀장 김대건 주무관
○ 연등천 재해예방사업 토목공사(총괄 및 1차분) 등 3건 감독(검사)공무원 지정 해지 및 공사관리관 지정 통보 ※ 회계과-32609(2024. 6.20.)	ʼ24. 6.20.	강행숙 과장 김진욱 팀장 김대건 주무관
○ 연등천 재해예방사업 현장대리인 및 품질관리자 변경 검토결과 제출 ※ 건설과-819(2024. 7.17.)	ʼ24. 7.17.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 토목공사(1차분) 하도급관리계획서(변경)에 대한 검토 결과 회신 ※ 건설과-2357(2024. 8. 8.)	ʼ24. 8. 8.	박경 팀장(대결) 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 건설사업관리용역 기술지원기술인(구조) 변경 검토 결과 회신 ※ 건설과-2439(2024. 8. 8.)	ʼ24. 8. 8.	박경 팀장(대결) 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 토목공사(1차분) 하도급 계약 검토 결과 제출 ※ 건설과-3154(2024. 8.21.)	ʼ24. 8.21.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 품질시험계획서 승인 알림 ※ 건설과-4226(2024. 9. 9.)	ʼ24. 9. 9.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 안전관리자 변경 승인 알림 ※ 건설과-4856(2024. 9.20.)	ʼ24. 9.20.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 검측업무지침 승인 알림 ※ 건설과-5371(2024. 9.27.)	ʼ24. 9.27.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 주민 요구사항 검토 ※ 건설과-6256(2024.10.14.)	ʼ24.10.14.	정기명 시장 김종기 부시장 염승열 국장 장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업(1차분) 실정보고(1차분 시공계획 변경) 승인사항 알림 ※ 건설과-6506(2024.10.17.)	ʼ24.10.17.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 안전관리계획서 검토 의뢰(연등천 재해예방사업) ※ 건설과-6774(2024.10.22.)	ʼ24.10.22.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 추진에 따른 농지전용협의(변경) 요청 ※ 건설과-7096(2024.10.28.)	ʼ24.10.28.	장현철 과장 김용채 팀장 김동언 차장
○ 연등천 재해예방사업 지방토지수용위원회 수용재결 신청 ※ 건설과-7243(2024.10.30.)	ʼ24.10.30.	장현철 과장 박경 팀장 박소영 주무관