정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	소하천 정비(계동천, 용수천)사업
② 추진배경	마을 농경지를 관통하고 있는 소하천으로 하천 폭이 협소하여 인명피해 및 재해발생이 높은 지역의 사전 재해예방
③ 사업개요	○ 위 치: 2개소(돌산읍 평사리, 둔덕동) ○ 사 업 비: 9,130백만 원(국비 1,654 도비2,911 시비 4,565) - 계동 소하천 정비공사: 2,936백만 원 (국비 1,468 시비 1,468) - 용수 소하천 정비공사: 6,194백만 원 - 지방이양사업 (국비 186 비용보전 2,911 시비 3,097) ○ 사 업 량 - 하천정비 : L= 2.06km(계동천 1.1㎞, 용수천 0.96㎞) - 교 량 공 : 13개소(계동천 6개소, 용수천 7개소) - 건설기술용역 : 1식(실시설계, 토질조사, 소규모환경영향평가)
④ 사업부서	여수시 건설과		⑤ 담당자		장현철 과장 김용채 팀장 김준현 주무관
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		ʼ17. 1. ~ ʼ25. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 2017년도 소하천정비사업 국고 보조금 교부신청서 제출 ※ 건설과-509호		ʼ17. 1.11.		장세길 과장 송신현 팀장 이민호 주무관
○ 소하천정비사업 사전설계심의 요청 ※ 건설과-1096호		ʼ17. 1.20.		장세길 과장 송신현 팀장 이민호 주무관
○ 소하천정비사업(계동소하천) 사업비 변경요청 ※ 건설과-5719호		ʼ17. 4.11.		장세길 과장 송신현 팀장 이민호 주무관
○ 계약심사 요청 ※ 건설과-7012호		ʼ17. 4.28.		장세길 과장 송신현 팀장 이민호 주무관
○ 계동소하천 1차분 완료 ※ 건설과-15085호		ʼ18.12.10.		천춘길 과장 오정환 팀장 김용환 주무관
○ 계동소하천 2차분 착수 ※ 건설과-15085호		ʼ19. 1.24.		주영근 과장 서범규 팀장 조민철 주무관
○ 용수소하천 실시설계용역 등 착수		ʼ19. 2.25.		주영근 과장 서범규 팀장 조민철 주무관
○ 용수소하천 실시설계용역 일시정지 ※ 건설과-8375호		ʼ19. 6.25.		주영근 과장 서범규 팀장 조민철 주무관
○ 용수소하천 토질조사용역 완료 ※ 건설과-11715호		ʼ19. 9. 4.		주영근 과장 서범규 팀장 위성현 주무관
○ 계동소하천 2차분 일시정지 ※ 건설과-13514호		ʼ19.10.15.		주영근 과장 서범규 팀장 위성현 주무관
○ 용수소하천 사전설계검토 요청 ※ 건설과-15788호		ʼ19.11.29.		주영근 과장 서범규 팀장 위성현 주무관
○ 용수소하천 소규모 환경영향평가 용역 완료 ※ 건설과-16654호		ʼ19.12.18.		주영근 과장 서범규 팀장 위성현 주무관
○ 용수소하천 소규모환경영향평가 협의 요청 ※ 건설과-811호		ʼ20. 1.20.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 여수시 기술자문 요청 ※ 건설과-1507호		ʼ20. 2. 6.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 사전설계검토 완료 ※ 전라남도 자연재난과-3642호		ʼ20. 2.27.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 소규모환경영향평가 협의 완료 ※ 영산강유역청 환경평가과-1705호		ʼ20. 3. 4.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 총사업비 변경 승인 신청 ※ 건설과-1507호		ʼ20. 3.16.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 여수시 기술자문 완료 ※ 건설과-1507호		ʼ20. 3.18.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 일상감사 완료 ※ 건설과-4728호		ʼ20. 4. 6.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 계동소하천 2차분 일시정지 해지 ※ 건설과-5185호		ʼ20. 4.16.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 총사업비 변경 승인 ※ 전라남도 자연재난과-7275호		ʼ20. 5. 6.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 정비사업 시행계획 ※ 건설과-6621호		ʼ20. 5.11.		권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 계약심사 완료 ※ 전라남도 회계과-24557호		ʼ20. 5.13.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 시행계획 공고 ※ 건설과-7063호		ʼ20. 5.18.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 정비공사 계약체결 ※ 회계과-32525호		ʼ20. 6. 3.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 계동소하천 2차분 일시정지 ※ 회계과-39214호		ʼ20. 6.30.		주영근 과장 박성식 팀장 조진우 주무관
○ 용수소하천 정비공사 일시정지 ※ 회계과-46403호		ʼ20. 8.11.		주영근 과장 박성식 팀장 김준현 주무관
○ 계동소하천 2차분 일시정지 해지 및 변경계약 체결 ※ 회계과-56294호		ʼ20.10.13.		주영근 과장 박성식 팀장 김준현 주무관
○ 계동소하천 2차분 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-58741호		ʼ20.10.27.		주영근 과장 박성식 팀장 김준현 주무관
○ 계동소하천 2차분 준공		ʼ20.10.29.		주영근 과장 박성식 팀장 김준현 주무관
○ 용수소하천 매장문화재 표본조사 용역 착수 ※ 건설과-15680호		ʼ20.11.02.		주영근 과장 박성식 팀장 김준현 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 보상계획 열람공고 ※ 건설과-18048호		ʼ20.12.21.		주영근 과장 박성식 팀장 문정현 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 지적공부 정리 신청 ※ 건설과-1305호		ʼ21. 1.27.		박상훈 과장 박성식 팀장 최준홍 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 감정평가 의뢰 ※ 건설과-2254호		ʼ21. 2.22.		박상훈 과장 박성식 팀장 문정현 주무관
○ 용수 소하천 보상협의 통보(1차) ※ 건설과-5449호		ʼ21. 4.14.		박상훈 과장 박성식 팀장 문정현 주무관
○ 용수 소하천 보상협의 통보(2차) ※ 건설과-8002호		ʼ21. 5.31.		박상훈 과장 박성식 팀장 문정현 주무관
○ 용수 소하천 보상협의 통보(3차) ※ 건설과-10295호		ʼ21. 7.12.		박상훈 과장 정종기 팀장 박민혁 주무관
○ 문화재표본조사 준공		ʼ21.12.24.		박상훈 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 용수 소하천 수용재결 신청 ※ 건설과-566호		ʼ22. 1.12.		심근하 과장 정종기 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 수용개시		ʼ22. 4. 8.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 용수 소하천 일시정지 해지 ※ 회계과-24493호		ʼ22. 5.13.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 용수 소하천 2차분 착공 ※ 회계과-33235호		ʼ22. 7. 5.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 추진 촉구 ※ 건설과-10816호		ʼ22. 7.28.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 2차분 선금 지급 결정 통보 ※ 회계과-45717호		ʼ22. 9.26.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 총괄, 1차, 2차분 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 회계과-17832호		ʼ22. 12.13.		심근하 과장 한진숙 과장(협조) 김진욱 팀장(협조) 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 총괄, 1차분 외1건 변경계약 체결 ※ 회계과-62802호		ʼ22. 12.22.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 1차분 기성대가(1회) 확정 통보 ※ 회계과-63339호		ʼ22. 12.26.		심근하 과장 정종기 팀장 최준홍 주무관
○ 국유지 용도폐지 요청 ※ 건설과-32호		ʼ23. 1. 2.		심근하 과장 정종기 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 추진계획 보고 ※ 건설과-3834(2023. 3.13.)		ʼ23. 3.13.		김종기 부시장 이경종 국장 한진숙 과장(협조) 김진욱 팀장(협조) 박형열 과장(협조) 서은주 팀장(협조) 심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토용역 시행 ※ 건설과-4224(2023. 3.20.)		ʼ23. 3.20.		심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 (E/S) 검토 보고 ※ 건설과-4807(2023. 3.29.)		ʼ23. 3.29.		심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토결과 알림 ※ 건설과-4911(2023. 3.30.)		ʼ23. 3.30.		심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 관급자재(사석) 단가 변경 검토 ※ 건설과-5421(2023. 4. 6.)		ʼ23. 4. 6.		이경종 국장 한진숙 과장(협조) 심근하 과장 김진욱 팀장(협조) 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 관급자재(사석) 설계변경에 따른 구매 요청 ※ 건설과-5468(2023. 4. 7.)		ʼ23. 4. 7.		심근하 과장 한진숙 과장(협조) 김진욱 팀장(협조) 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 구간 내 수리검토 용역 시행 및 계약의뢰 ※ 건설과-6903(2023. 4.27.) ※ 건설과-6904(2023. 4.27.)		ʼ23. 4.27.		심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 구간 내 수리검토 용역 계약체결 ※ 회계과-22226(2023. 5.17.)		ʼ23. 5.17.		한진숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 등 2건 일시정지 요청 ※ 건설과-8811(2023. 5.24.)		ʼ23. 5.24.		박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 등 2건 일시정지 알림 ※ 회계과-24456(2023. 5.30.)		ʼ23. 5.30.		한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 용수 소하천 정비공사 물가변동에 의한 계약금액 조정(E/S) 검토 보고 ※ 건설과-9751(2023. 6. 5.)		ʼ23. 6. 5.		김종기 부시장 이경종 국장 한진숙 과장(협조) 김진욱 팀장(협조) 박형열 기획예산담당관(협조) 서은주 팀장(협조) 심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 물가변동에 의한 계약금액 조정(E/S) 검토결과 회신 ※ 건설과-9892(2023. 6. 9.)		ʼ23. 6. 9.		심근하 과장 최종춘 팀장 박민혁 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 구간 내 수리검토 용역 일시정지 요청 ※ 건설과-12657(2023. 7.14.)		ʼ23. 7.14.		박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 정준호 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 구간 내 수리검토 용역 일시정지 알림 ※ 회계과-35295(2023. 7.17.)		ʼ23. 7.17.		한진숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 편입 국유지 보상협의 요청 ※ 건설과-15164(2023. 8.23.)		ʼ23. 8.23.		박경 팀장(대결) 최종춘 팀장 송나민 주무관
○ 용수 소하천 정비공사(2차분) 품질시험계획 승인 ※ 건설과-16078(2023. 9. 6.)		ʼ23. 9. 6.		주영근 과장 최종춘 팀장 정준호 주무관
○ 2024년 제2회 소하천관리위원회 개최계획(안) - 용수 소하천 ※ 건설과-12287(2024. 6.24.)		ʼ24. 6.24.		염승열 국장 김정남 과장 김용채 팀장 김준현 주무관
○ 2024년 제2회 소하천관리위원회 서면심의 결과 보고 – 용수 소하천 ※ 건설과-552(2024. 7.14.)		ʼ24. 7.14.		염승열 국장 장현철 과장 김용채 팀장 김준현 주무관
○ 용수 소하천 정비공사 구간 내 수리검토 용역 준공 ※ 회계과-42081(2024. 8. 2.)		ʼ24. 8. 2.		한태광 팀장(대결) 정일권 팀장 장지수 주무관
○ 연등천 재해예방사업 추진 관련 추가 의제 협의(용수천 농지분야 협의) ※ 건설과-6228(2024.10.14.)		ʼ24.10.14.		장현철 과장 김용채 팀장 김준현 주무관