정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화양면사무소 신축공사(완료)
② 추진배경	준공된 지 35년 이상 경과(‘83년 준공)되어 건축물 구조 안정성 확보 및 다양한 행정수요 반영을 위해 신축 필요
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 화양면 나진리 470-1번지외 4필지 ○ 규 모 : 연면적 1,623.02㎡, 지상3층(2동) ○ 사 업 비 : 4,255백만원(부지 280, 공사비 등3,975)
④ 사업부서	여수시 회계과		⑤ 담당자		시설9급 이아람 행정5급 박은규
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 4. ~‘20. 1.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정 – 화양면사무소 신축 계획 ※ 회계과 - 19156호		‘17. 4.12.		주철현 시장 최종선 부시장 이노철 국장 김용우 과장 이재곤 팀장 정은주 주무관
○ 지방재정 투자사업 도 심사 – 화양면사무소 신축 ※ 전라남도 예산담당관 - 11182호, 기획예산과 - 16595호		‘17.10.19.		김병완 과장 고영준 팀장 백기광 주무관
○ 공유재산심의회 심의 및 의결 – 화양면사무소 신축 ※ 회계과 - 55289호		‘17.11. 1.		김용우 과장 손하진 팀장(교육) 심길선 주무관
○ 화양면사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 시행 ※ 회계과 - 24016호		‘18. 5.15.		최종선 부시장 송병구 국장 장두한 과장 정미순 팀장 김정현 주무관
○ 화양면사무소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 계약체결 ※ 회계과 - 36746호		‘18. 7.20. (‘18. 7.23.착수)		송병구 국장 장두한 과장 장지문 팀장 김성욱 주무관

○ 사업 변경계획 방침 결정 ※ 회계과 - 49989호	‘18.10.19.	권오봉 시장 고재영 부시장 양기원 국장 박은규 과장 정미순 팀장 이아람 주무관
○ 공유재산관리계획 변경의결	‘18.11.20.	박은규 과장 정미순 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 편입부지 보상협의 완료 ※ 회계과 - 62850호	‘18.12.17.	박은규 과장 정미순 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 임시사무소 리모델링 공사 계약 ※ 회계과 - 1480호	‘19. 1.15.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 여수시 경관·건축 공동위원회 심의	‘19. 1.17.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축관련 주민설명회 결과보고 ※ 회계과 - 4210호	‘19. 1.29.	양기원 국장 박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 설계자문 ※ 회계과 - 8822호	‘19. 2.28.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 일상감사 ※ 회계과 - 15140호	‘19. 4. 3.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 계약심사 ※ 회계과 - 15141호	‘19. 4. 3.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사 시행 ※ 회계과 - 17222호	‘19. 4.11.	권오봉 시장 고재영 부시장 양기원국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관

○ 화양면사무소 감리용역 ※ 회계과 - 17297호	‘19. 4.12.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 이사용역 계약의뢰 ※ 회계과 - 21122호	‘19. 5. 2.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 계약의뢰 ※ 회계과 - 21312호	‘19. 5. 3.	박은규 과장 정미순 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 철거·멸실 신고서제출 ※ 회계과 - 21985호	‘19. 5. 8.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축에 따른 석면농도 및 비산농도 측정용역 시행 ※ 회계과 - 22891호	‘19. 5. 13.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사에 따른 지정폐기물 처리용역 계약의뢰 ※ 회계과 - 23556호	‘19. 5. 16.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(건축) 관급자재 계약의뢰 ※ 회계과 - 24075호	‘19. 5. 20.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(전기) 관급자재 계약의뢰 ※ 회계과 - 24073호	‘19. 5. 20.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사 관급자재 선정심의 요청 ※ 회계과 - 24073호	‘19. 5. 28.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(통신) 관급자재 계약의뢰 ※ 회계과 - 28358호	‘19. 6. 10.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(전기감리) 감리원 배치 현황 제출 ※ 회계과 - 29236호	‘19. 6. 13.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(건축) 하도급 계약사항 검토보고 ※ 회계과 - 38177호	‘19. 7. 25.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관

○ 화양면사무소 신축공사(건축) 관급자재(조립식패널)구입계획 ※ 회계과 - 41459호	‘19. 8. 14.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 하주영 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(건축) 실정보고(1차)에 따른 검토보고 ※ 회계과 – 51506호	‘19. 10. 14.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(건축) 금속구조물,창호 하도급 계약사항 검토보고 ※ 회계과 – 52048호	‘19. 10. 16.	박은규 과장 손하진 팀장 정미순 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사 공사기간 연장 검토보고 ※ 회계과 - 57752호	‘19. 11. 12.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사 공사기간 연장 변경계약의뢰 ※ 회계과 - 57823호	‘19. 11. 13.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 장애물없는 생활환경(BF) 본인증 용역 계약의뢰 ※ 회계과 - 65961호	‘19. 12. 17.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(통신) 설계 변경 계약의뢰 ※ 회계과 - 24075호	‘19. 12. 27.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(건축) 계약 연장 및 설계변경(1차) 검토보고 ※ 회계과 - 69363호	‘19. 12. 30.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(건축 외 7) 계약기간 연장 및 설계변경 계약의뢰 ※ 회계과 - 69422호	‘19. 12. 30.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(전기) 계약기간 연장 및 설계변경 계약의뢰 ※ 회계과 - 69422호	‘19. 12. 31.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 신축공사(전기) 설계변경 계약의뢰 ※ 회계과 - 3962호	‘20. 1. 23.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 최준용 주무관

○ 화양면사무소 신축공사(건축) 설계변경(2차) 계약의뢰 ※ 회계과 - 4098호	‘20. 1. 23.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 이사용역 계약의뢰 ※ 회계과 – 4202호	‘20. 1. 23.	박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 개소식 계획 ※ 회계과 – 4391호	‘20. 1. 28.	양기원 국장 박은규 과장 정미순 팀장 이권재 주무관
○ 화양면사무소 준공식(개소식) 변경(약식) 알림 ※ 회계과 – 6278호	‘20. 2. 6.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김현미 팀장 이아람 주무관
○ 화양면사무소 준공 통보 및 건축물 대장 등재 요청 ※ 회계과 - 8605호	‘20. 2. 18.	박은규 과장 김현미 팀장 이아람 주무관