정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지방어항(우학항) 시설사업
② 추진배경	태풍 및 해일 내습시 어항 피해발생을 예방하고 정온 수역 확보하여 어선의 대피장소 확보
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 남면 우학리 우학항 일원 ○ 사 업 량 : 방파제 L=140m ○ 사 업 비 : 10,400백만 원(도비 8944, 시비 1,456) ○ 공사기간 : 2018. 1. ~ 2024.12.
④ 사업부서	여수시 섬발전지원과		⑤ 담당자		행정5급 김정오 시설6급 박동훈
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		’18. 1. ~ ’24. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 2018년도 해양수산사업 심의 확정 ※ 섬자원개발과-2113		’18. 3. 14.		주철현 시장 최종선 부시장 임채성 국장 심근하 과장 박진웅 팀장 임인수 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사 실시설계용역 ※ 섬자원개발과-2782		’18. 4. 4.		최종선 부시장 임채성 국장 심근하 과장 박진웅 팀장 임인수 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사 수심측량, 토질조사 용역시행 ※ 섬자원개발과 - 4686,4687		’18. 6. 1.		최종선 부시장 임채성 국장 심근하 과장 박진웅 팀장 임인수 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사 해역 이용협의 용역 ※ 회계과- 11297		’18. 12. 28		송석주 국장 서재풍 과장 박진웅 팀장 조상우 주무관

○ 지방어항(우학항)시설공사 해역이용협의 용역 준공 ※ 회계과-29798(‘19.6.17)	’19. 6. 17	서재풍 과장 박진웅 팀장 조상우 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사 시행 ※ 섬자원개발과-7422	’19. 8. 19.	권오봉 시장 고재영 부시장 이한곤 국장 서재풍 과장 홍종옥 팀장 조상우 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사 실시설계 용역 준공 ※ 회계과-44886	’19. 9. 4.	서재풍 과장 홍종옥 팀장 조상우 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사 계약체결 ※ 회계과-53969	’19. 10. 25.	서재풍 과장 홍종옥 팀장 조상우 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사(1차분) 변경 검토보고 ※ 섬자원개발과-546	’20. 1. 15.	이한곤 국장 박춘순 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사(1차분) 준공 ※ 섬자원개발과-2142	’20. 2. 26.	박춘순 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사(2차분) 시행 ※ 섬자원개발과-4057	’20. 4. 14.	권오봉 시장 서은수 부시장 이한곤 국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 박춘순 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사 추진 계획보고 ※ 섬자원개발과-186	’21. 1. 6.	권오봉 시장 서은수 부시장 장인호 국장 김태횡 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관

○ 우학항(지방어항)시설공사 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 섬자원개발과-1989	’21. 2. 16.	권오봉 시장 서은수 부시장 장인호 국장 김태횡 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사 설계변경 심사 요청 ※ 섬자원개발과-2738	’21. 3. 9.	김태횡 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(설계변경) 계약심사 결과 알림 ※ 전라남도 회계과-10468	’21. 3. 10.	김성훈 과장 문인기 계약심사팀장 이광열 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 2차분) 변경계약 의뢰 ※ 섬자원개발과-3546	’21. 3. 26.	김태횡 과장 홍종옥 팀장 박 성 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(2차분) 일시정지 해지 검토보고 ※ 섬자원개발과-3697	’21. 3. 29.	장인호 국장 조계윤 회계과장 오병구 계약1팀장 김태횡 과장 홍종옥 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사 일시정지 해지 요청 ※ 섬자원개발과-3726	’21. 3. 31.	김태횡 과장 홍종옥 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄분, 2차분) 일시정지 해지 및 변경계약사항 통보 ※ 회계과-15924	’21. 4. 1.	김용필 행정지원국장 조계윤 과장 오병구 계약1팀장 김동승 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 2차분) 변경(2회)계약 의뢰 ※ 섬자원개발과-4617	’21. 4. 16.	김태횡 과장 홍종옥 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(2차분) 하도급계약 적정성 검토보고 ※ 섬자원개발과-7163	’21. 6. 14.	김태횡 과장 홍종옥 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(2차분) 기성대가(1회) 확정 통보 ※ 회계과-32380	’21. 6. 21.	김용필 행정지원국장 조계윤 과장 오병구 계약1팀장 김동승 주무관

○ 우학항(지방어항)시설공사(2차분) 기성대가(2회) 확정 통보 ※ 회계과-47361	‘21. 9. 16.	김용필 행정지원국장 조계윤 과장 오병구 계약1팀장 임현주 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 2차분) 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 섬자원개발과-14283	’21. 11. 23.	권오봉 시장 박현식 부시장 김병완 국장 김태횡 과장 마동현 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 2차분) 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-58600	’21. 11. 29.	김용필 행정지원국장 조계윤 과장 오병구 계약1팀장 임현주 주무관
○ 지방어항(우학항)시설공사(3차분) 시행 ※ 섬자원개발과-1906	’22. 2. 15.	권오봉 시장 박현식 부시장 김병완 국장 조계윤 회계과장 오병구 계약1팀장 김태횡 과장 마동현 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(3차분) 실정보고에 따른 설계변경 검토보고 ※ 섬자원개발과-5509	’22. 5. 17.	김태횡 과장 조계윤 회계과장 오병구 계약1팀장 마동현 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(3차분) 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-25699	’22. 5. 27.	김용필 행정지원국장 김희영 청사관리팀장 오병구 계약1팀장 여미향 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(3차분) 하도급계약 적정성 검토보고 ※ 섬자원개발과-7137	’22. 6. 29.	김태횡 과장 마동현 팀장 이민호 주무관

○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄분) 일시정지 검토보고 ※ 섬자원개발과-8886	’22. 8. 9.	김용필 국장 한진숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 김정오 과장 김용채 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(3차분)준공 ※ 회계과-38274	’22. 8. 11.	김용필 국장 김정오 과장 김용채 팀장 이민호 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사설계변경 계약심사 ※ 전라남도 회계과-13390	’23. 3. 17.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○ 우학항(지방어항)시설공사(4차분) 착공 ※ 회계과-14608	’23. 4. 6.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○ 우학항(지방어항)시설공사(4차분) 기성대가 확정 통보 ※ 회계과-29116	’23. 6. 20.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○ 우학항(지방어항)시설공사(4차분) 관급자재 계약 변경 ※ 섬발전지원과-7230	’23. 7. 3.	김정오 과장 김용채 팀장 박가영 차장
○우학항(지방어항)시설공사(4차분) 시멘트 경쟁 평가결과 ※ 회계과-34505	’23. 7. 12.	한진숙 과장 최철웅 계약2팀장 윤지애 주무관
○우학항(지방어항)시설공사(4차분) 일시정지 알림 ※ 회계과-56618	’23. 11.14.	한진숙 과장 김진욱 계약1팀장 김주희 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 4차분)설계_변경 검토보고 ※ 섬발전지원과-14513	’23.12.18.	김종기 부시장 정재호 국장 한진숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 주무관
○ 우학항(지방어항)시설공사(4차분) 하도급계약 적정성 검토보고 ※ 섬발전지원과-577	’24. 1.15.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○ 우학항(지방어항)시설공사(5차분) 시행 검토보고 ※ 섬발전지원과-1924	’24. 2.15.	김종기 부시장 정재호 국장 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○우학항(지방어항)시설공사(5차분) 품질시험계획 적정성 검토보고 ※ 섬발전지원과-2788	’24. 3. 8.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○우학항(지방어항)시설공사(5차분) 하도급 계약 적정성 검토보고 ※ 섬발전지원과-3101	’24. 3. 14.	서주용 팀장 박가영 차장
○우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 5차분) 일시정지 검토보고 ※ 섬발전지원과-4093	’24. 4. 8.	정재호 국장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 5차분) 일시정지 해지 검토보고 ※ 섬발전지원과-6011	’24. 6. 3.	신영자 과장 김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장
○우학항(지방어항)시설공사(총괄 및 5차분) 준공	’24. 6. 11.	김정오 과장 서주용 팀장 박가영 차장