정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만흥동 마래2터널 우회도로 개설
② 추진배경	도로 터널로 이용중인 마래터널(등록문화재 제116호)을 문화 관광자원으로 활용될 경우 이를 대체할 우회도로 개설 추진
③ 사업개요	○ 위 치 : 만흥동 산272-6번지 일원 ○ 사 업 량 : L=1,132m, B=10.5m ○ 사 업 비 : 17,200백만 원(설계 및 공사 14,3368 보상 등 2,832)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 박성원 시설5급 심근하
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18. 3 ~‘26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계 용역 집행계획 ※ 도로과-6430호		‘18. 6. 8.		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 계약 체결 ※ 도로과-8900호 ※ 회계과-45731호		‘18. 8.20. (9.19.)		양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김현식 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 일시정지 ※ 도로과-13512, 13514호 ※ 회계과-8900호		‘18.12.17.		권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김현식 주무관

○ 기본 및 실시설계 용역 일시정지 해지 ※ 도로과-3935, 3944호 ※ 회계과-4197호	‘19. 4. 4.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 김성욱 주무관 박 성 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 1차분 준공 ※ 도로과-3935, 3944호 ※ 회계과-4197호	‘19. 6.11.	서유권 과장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 2차분 착수 ※ 도로과-7270호	‘19. 6.11.	㈜신명건설기술공사
○ 주민설명회 개최 결과보고 ※ 도로과-11763호	‘19.9.23.	서유권 과장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE 시행 ※ 도로과-12141호	‘19.9.30.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 중간보고회 개최 계획 ※ 도로과-12492호	‘19.10.8	김기채 국장 서유권 과장 이영호 팀장 박 성 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 도로과-13087호	‘19.10.23.	서유권 과장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 건설사업관리(설계단계) 및 VE용역 착수 ※ 도로과-13480호	‘19.11. 1.	서유권 과장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 소규모환경영향평가 용역 실정보고에 대한 검토보고 ※ 도로과-13480호	‘19.12. 6.	서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 선설사업관리 및 설계VE용역 일시중지 검토 보고 ※ 도로과-965호	‘20. 1.23.	장세길 국장 서유권 과장 이영호 팀장 유재영 차장

○ 교통안전진단용역 계약 의뢰 ※ 도로과-2298	‘20. 2.21.	서유권 과장 이영호 팀장 유재영 차장
○ 교통안전진단용역 계약체결 및 감독 공무원 지정 알림 ※ 도로과-3025 ※ 교통과-18578	‘20. 3.5.	서유권 과장 유재영 차장 김현희 주무관
○ 소규모환경영향평가 용역 소규모 환경영향평가서 제출 ※ 도로과-5444	‘20. 4.21.	서유권 과장 유재영 차장
○ 소규모 환경영향 평가 협의 요청 ※ 도로과-6925	‘20. 5.25.	서유권 과장 이덕연 팀장 이영호 팀장 유재영 차장 영산강유역환경청장(환경평가과장)
○ 교통안전진단용역 검사(검수) 공무원 지정 알림 ※ 도로과-7509	‘20. 6.8.	박은규 과장 서유권 과장 손하진 팀장 유재영 차장 정선영 주무관
○ 소규모환경영향평가 협의내용(사업계획 조정) ※ 도로과-9064 ※ 영산강유역환경청 환경평가과-4864	‘20. 7.7.	서유권 과장 유재영 차장 영산강유역환경청 최종인 과장 윤유리 주무관 박경진 주무관
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설공사 소규모 환경영향평가 변경 협의 요청 ※ 도로과-14974	‘20. 11.24.	강 균 과장 이영호 팀장 유재영 차장
○ 출장결과보고서(마래2터널 소규모 환경영향평가 협의 관련) ※ 도로과-2367	‘21. 2.25.	강 균 과장 김정남 팀장 정준호 주무관
○ 소규모 환경영향평가 보완서 제출(마래2터널 우회도로 개설) ※ 도로과-7402	‘21. 6.21.	강 균 과장 김정남 팀장 정준호 주무관
○ 소규모 환경영향평가(변경) 협의내용 (사업계획 조정) 보냄[만흥동 마래2터널 우회도로 개설] ※ 영산강유역환경청 환경평가과-4740	‘21. 7.13.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 소규모환경영향평가(변경) 협의내용 재검토 요청(여수 만흥동 마래2터널 우회도로 개설) ※ 영산강유역환경청 환경평가과-4740	‘21. 12. 28.	박현식 부시장 임광건 건설교통국장 김정아 팀장 김정남 팀장 최상록 주무관
○ 소규모환경영향평가(변경) 협의내용 재검토 요청에 따른 회신(여수 만흥동 마래2터널 우회도로개설) ※ 도로과-1030 ※ 영산강유역환경청 환경평가과-600	‘22. 1. 26.	최상록 주무관
○ 출장결과보고서(마래2터널 우회도로 개설 협의) ※ 도로과-5983	‘22. 5. 27.	오정환 과장 명호남 팀장 최상록 주무관
○ 출장결과보고서(마래2터널 우회도로 개설 협의) ※ 도로과-11904	‘22. 10. 24.	오정환 과장 배도선 팀장 박성원 주무관
○ 소규모환경영향평가(변경) 협의 내용 재검토 요청 회신에 따른 진행사항 협의 ※ 도로과-12218	‘22. 10. 31.	오정환 과장 배도선 팀장 박성원 주무관
○ 출장결과보고서(마래2터널 우회도로 개설 협의) ※ 도로과-14279	‘22. 12. 16.	오정환 과장 배도선 팀장 박성원 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 설계변경 계약 의뢰 ※ 도로과-1238	‘23. 2. 3.	오정환 과장 배도선 팀장 박성원 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-6061	‘23. 2. 17.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 소규모환경영향평가용역 설계변경 계약 의뢰 ※ 도로과-5178	‘23. 5. 11.	김정아 팀장 배도선 팀장 박성원 주무관
○ 소규모환경영향평가용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-21798	‘23. 5. 15.	봉영권 팀장 김진욱 팀장 김진수 주무관
○ 만흥동 마래2터널 기본 및 실시설계용역(2차) 기성검사공무원 지정 및 확정 ※ 회계과-28513, 29498	‘23. 6. 21.	한광민 국장 이동일 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설 소규모환경영향평가용역 기성검사공무원 지정 및 확정 ※ 회계과-30089, 31068	‘23. 6. 27.	한진숙 과장 김진욱 팀장 김진수 주무관
○ 여수 만흥동 마래2터널 우회도로 개설 관련 협의 요청 및 회신 ※ 도로과-9314, 9400 국가철도공단 시설관리단-8470	‘23. 8. 22.	심근하 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설공사 기본 및 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 도로과-11533	‘23. 10. 18.	심근하 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설공사 소규모환경영향평가 용역 일시정지 요청 ※ 도로과-11532	‘23. 10. 18.	심근하 과장 윤대근 팀장 박성원 주무관
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설공사 기본 및 실시설계용역 일시정지 알림 ※ 도로과-11597	‘23. 10. 20.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관
○ 만흥동 마래2터널 우회도로 개설공사 소규모환경영향평가 용역 일시정지 알림 ※ 도로과-119603	‘23. 10. 20.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김주희 주무관