중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	율촌면 연화마을 진입도로 확장
② 추진배경	협소한 도로 확장으로 주민 교통불편 해소 및 주거환경 개선
③ 사업개요	○위 치 : 율촌면 가장리 산192-2번지 일원 ○ 사 업 량 : L=627m, B=8m ○ 사 업 비 : 1,500백만 원
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 박동훈 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		’18. 1. ~ ’19. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 도시관리계획(변경) 용역 집행계획 수립 및 계약체결 ※ 도로과-10520호 ※ 회계과-50082호		’17. 9.13. (9.26.)		조일수 국장 김기채 과장 김용우 과장 윤석호 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 주무관
○ 도로구역 결정(변경)을 위한 주민의견 청취공고		’18. 3.16.		조일수 국장 김기채 과장 서범규 팀장 황규석 주무관
○ 도로구역 결정고시 ※ 도로과-4371호		’18. 4.20.		조일수 국장 김기채 과장 서범규 팀장 황규석 주무관
○ 실태조사 및 보상 협의 ※ 도로과-4414, 7160, 8091, 8859호		’18. 4.20. ~ 11.		김기채 과장 이돈주 팀장 김숙진 실무원
○ 공사 집행계획 수립 ※ 도로과-4696호		’18. 4.24.		주철현 시장 최종선 부시장 김기채 과장 장세길 도시계획과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 황규석 차장

○ 공사 계약 의뢰 ※ 도로과-4810호	’18. 5. 2.	김기채 과장 서범규 팀장 황규석 팀장
○ 공사 일시중지 ※ 도로과-6514, 6533호	’18. 6.16. (6.18.)	조일수 국장 송병구 행정안전국장 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 편입토지 등 손실보상비 집행계획 수립 ※ 도로과-8100호	’18. 7.26.	고재영 부시장 김기채 과장 장세길 도시계획과장 김정아 계약심사팀장 장지문 계약1팀장 이돈주 팀장 김숙진 실무원
○ 공사 일시중지 해지 및 변경계약 ※ 도로과-11936, 11960호 ※ 회계과-12228호	’18.11. 7. (11.14.)	김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 홍주성 계약2팀장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 설계변경 시행 및 계약 ※ 도로과-13323, 13350호 ※ 회계과-60341호	’18.12.11. (12.14.)	이 경우 국장(대결) 김기채 국장 양기원 행정안전국장 박은규 과장 장지문 계약1팀장 손용봉 도로행정팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 황규석 팀장
○ 공사 일시중지 ※ 도로과-2382호 ※ 회계과-8642호	’19. 2. 26. (2.27.)	양기원 행정안전국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 황규석 차장

○ 토지수용재결 신청 ※ 도로과-2853호	’19. 3. 7.	서유권 과장 이재종 팀장 배 경 실무원
○ 공사 일시정지 해지 ※ 도로과-7658,7705호 ※ 회계과-7912호	’19. 6.25.	김기채 국장 서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김성욱 주무관 황규석 차장
○ 공사 감독공무원 변경 ※ 도로과-8443(’19. 7. 8.) ※ 회계과-35477(’19. 7. 10.)	’19. 7.10.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관
○ 1회 기성대가 지급 ※ 회계과-44923(’19. 9. 4.) ※ 회계과-45667(’19. 9. 9.)	’19. 9. 9.	양기원 국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관
○ 공사 계약기간 연장 ※ 도로과-13248(’19.10.28.), 13283(’19.10.28.) ※ 회계과-56239(’19.11. 6.)	’19. 9. 9.	양기원 국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관 김기채 국장 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 공사 일시정지 ※ 도로과-14764(2019.11.29.), 14779(2019.11.29.) ※ 회계과-62064(’19.12. 2.)	’19. 11. 29.	양기원 국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관 김기채 국장 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 공사 일시정지 해지 및 변경계약 ※ 도로과-15859(2019.12.23.), 15875(2019.12.24.) 도로과-16052(2019.12.27.), 16054(2019.12.27.) ※ 회계과-69710(2019.12.30.)	’19. 12. 30.	양기원 국장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 고숙재 주무관 장세길 과장 서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 공사 준공	’19. 12. 30.	서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관