정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 (특수상황지역개발-기초생활기반확충(화정면 개도 화산))
② 추진배경	마을을 연결하는 도로 개설로 주민 및 관광객 이동 편의 제공과 동시에 주민불편해소 및 도서민 정주여건 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 전남 여수시 화정면 개도리 일원 ○ 사 업 량 : 도로개설 L=1,400m ○ 사 업 비 : 4,600백만원(국 3,680, 도 460 시 460)
④ 사업부서	여수시 섬발전지원과		⑤ 담당자	시설6급 김한수 행정5급 김정오
⑥ 선정기준	10억 원 이상 공사		⑦ 사업기간	’18. 1. ~’23. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 환경영향평가용역 시행 ※ 섬자원개발과-1854호		‘18. 3. 6.	심근하 과장 배도선 팀장 정을룡 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 실시설계용역 시행 ※ 섬자원개발과-1940호		‘18. 3. 8.	최종선 부시장 임채성 국장 심근하 과장 배도선 팀장 정을룡 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 환경영향평가용역 일시정지 요청 ※ 섬자원개발과-10516호		‘18. 5.29.	심근하 과장 배도선 팀장 정을룡 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 섬자원개발과-10323호		‘18. 5.29.	심근하 과장 배도선 팀장 정을룡 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 시행 ※ 섬자원개발과-9408호		‘19.10.17.	권오봉 시장 고재영 부시장 이한곤 국장 조희순 팀장 명주완 팀장 문효순 주무관

○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 실시설계용역 일시정지 해지 검토보고 ※ 섬자원개발과-10063호	‘19.11. 8.	이한곤 국장 서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 환경영향평가용역 일시정지 해지검토보고 ※ 섬자원개발과-10165호	‘19.11.12.	서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 실시설계용역 준공 ※ 섬자원개발과-10323호	‘19.11.18.	서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 환경영향평가용역 준공 ※ 섬자원개발과-10516호	‘19.11.22.	서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(총괄 및 1차분) 계약의뢰 ※ 섬자원개발과-10609호	‘19.11.26.	조희순 팀장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(총괄 및 1차분) 일시정지 요청 ※ 섬자원개발과-3053호	‘20. 3.18.	박춘순 과장 이광재 팀장 문효순 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 변경 계약 의뢰 ※ 섬자원개발과-11679호	‘20.10.27.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(총괄 및 1차분) 일시정지 검토보고 ※ 섬자원개발과-12348호	‘20.11.10.	장인호 국장 김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관

○ 지적공부정리(분할) 신청(화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사) ※ 섬자원개발과-12684호	‘20.11.19.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 E/S보고서 검토 용역 시행 ※ 섬자원개발과-291호	‘21.1.10.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가용역 시행 ※ 섬자원개발과-1026호	‘21.1.26.	김희경 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 탄성파탐사 및 사면안정검토 용역 시행 ※ 섬자원개발과-2260호	‘21.2.24.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가용역 일시정지 요청 ※ 섬자원개발과-4216호	‘21. 4. 8.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 보상계획 열람 공고(화정면 개도화산 운구지~여석 도로개설공사) ※ 섬자원개발과-4817호	‘21. 4.21.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 감정평가 계획 알림 ※ 섬자원개발과-6532호	‘21. 5.31.	김태횡 과장 이광재 팀장 강호권 주무관 신나영 실무원

○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(1차분) 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 회계과-65686호	‘21.12.28.	김용필 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 임현주 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(2차분) 계약체결 ※ 섬자원개발과-1059호	‘22. 1.24.	김용필 국장 조계윤 과장 김진욱 팀장 여미향 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 도시관리 계획 결정(변경) 용역 시행 ※ 섬자원개발과-1566호	‘22. 2. 7.	김태횡 과장 이광재 팀장 김강혁 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 폐기물처리용역 시행 ※ 섬자원개발과-4740호	‘22. 4.27.	김태횡 과장 이광재 팀장 김강혁 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 임목폐기물처리용역 시행 ※ 섬자원개발과-5033호	‘22. 5. 4.	김태횡 과장 이광재 팀장 김강혁 차장
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가(변경) 신청 ※ 섬자원개발과-5557호	‘22. 5.18.	김태횡 과장 이광재 팀장 김강혁 차장
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 및 지형도면 고시 ※ 섬자원개발과-12674호	‘22. 5.18.	김문화 과장 김명근 팀장 정동현 주무관

○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(3차분) 계약체결 ※ 섬발전지원과-4362호	‘23. 4. 25.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(3차분) 일시정지 요청 ※ 섬발전지원과-6016호	‘23. 6. 5.	이귀자 팀장(대결) 정종기 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사(3차분) 일시정지 알림 ※ 섬발전지원과-6040호	‘23. 6. 7.	한광민 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 여미향 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 도시관리계획 결정(변경) 용역 일시정지 검토보고 ※ 섬발전지원과-9899호	‘23. 9. 1.	정재호 국장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 도시관리계획 결정(변경) 용역 일시정지 알림 ※ 섬발전지원과-10728호	‘23. 9. 19.	한진숙 과장 김진욱 팀장 김수현 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 시행 ※ 섬발전지원과-11465호	‘23.10. 11.	김정오 과장 정종기 팀장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모환경영향평가 용역 시행 ※ 섬발전지원과-11463호	‘23.10. 11.	김정오 과장 정종기 팀장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김한수 차장

○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 계약체결 ※ 섬발전지원과-11804호	‘23.10.18.	한진숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 환경영향평가 용역 계약체결 ※ 섬발전지원과-11803호	‘23.10.18.	한진숙 과장 김진욱 팀장 송용석 주무관
○ 소규모 재해영향평가 심의 자료 제출(화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사) ※ 섬발전지원과-199호	‘24. 1. 5.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 일시정지 요청 ※ 섬발전지원과-280호	‘24. 1. 9.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 일시정지 알림 ※ 섬발전지원과-360호	‘24. 1.10.	강행숙 과장 김진욱 팀장 장지수 주무관
○ 소규모 재해영향평가 심의결과 통보(화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설) ※ 섬발전지원과-3129호	‘24. 3.15.	황예진 팀장(대결) 정종기 팀장 김한수 차장
○ 소규모 재해영향평가 협의 완료 통보(화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설) ※ 섬발전지원과-3155호	‘24. 3.15.	박희우 과장 박상진 팀장 임영수 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 일시정지 해지 요청 ※ 섬발전지원과-3586호	‘24. 3.27.	김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 섬발전지원과-3668호	‘24. 3.29.	강행숙 과장 김진욱 팀장 장지수 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로개설공사 소규모 재해영향평가 용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 섬발전지원과-4044호	‘24. 4. 5.	강행숙 과장 우희원 팀장 장지수 주무관
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로 개설공사 소규모 환경영향평가 용역 일시정지 요청 ※ 섬발전지원과-4250호	‘24. 4. 12.	황예진 팀장(대결) 정종기 팀장 김한수 차장
○ 화정면 개도 화산 운구지~여석 도로 개설공사 소규모 환경영향평가 용역 일시정지 알림 ※ 섬발전지원과-4320호	‘24. 4. 15.	강행숙 과장 김진욱 팀장 장지수 주무관
○ 「화정면 개도 화산 운구지~여석 도로 개설공사」 주민요구사항 반영에 따른 노선변경 계획안 보고 ※ 섬발전지원과-4615호	‘24. 10. 28.	정기명 시장 최정기 부시장 김상태 국장 김정오 과장 정종기 팀장 김한수 차장