정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시청소년해양교육원 건립(완료)
② 추진배경	○ 청소년 해양교육 및 진로탐색을 위한 전문 교육기관 설립 ○ 체계적 해양안전교육에 대한 사회적 수요 대비 공급부족 해소 ○ 여수세계박람회 시설 연계를 통한 박람회장 사후활용 활성화
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 수정동 776번지(2012여수세계박람회장 내) ○ 사업내용 : 해양 안전체험 및 교육시설 건립 - 수영장, 안전체험 및 교육장, 다목적강당, 생활관, 부대시설 ○ 사업규모 : 대지면적 4,710㎡, 건축 연면적 6,238㎡, 4층/1동 ○ 사 업 비 : 18,000백만 원(국비 9,800, 도비 2,100, 시비 6,100)
④ 사업부서	여수시 여성가족과		⑤ 담당자		복지5급 류갑선 복지7급 신은주
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		’17. 2. ~ ’21. 4. (4.30. 준공)
<그간 주요 추진내용>
○ 건축설계공모 시행 ※ 투자유치박람회과-1383호		’17. 2. 27.		주철현 시장 최종선 부시장 이경우 국장 노정열 과장 오병태 팀장 권미선 팀장
○ 건축설계공모 심사 결과 ※ 투자유치박람회과-3539호		’17. 5. 26.		이경우 국장 노정열 과장 오병태 팀장 권미선 팀장
○ 경제성 등 검토(VE) 용역 시행 ※ 투자유치박람회과-3897호		’17. 6. 12.		이경우 국장 노정열 과장 오병태 팀장 권미선 팀장
○ 실시계획승인용역 시행 ※ 투자유치박람회과-5739호		’17. 8. 21.		이경우 국장 노정열 과장 오병태 팀장 배영노 팀장

○ 기본계획 수정(안) 검토 보고 ※ 투자유치박람회과-6341	’17. 9. 12.	주철현 시장 최종선 부시장 이경우 국장 노정열 과장 오병태 팀장 배영노 팀장
○ 설계용역 중간보고회 계획 보고 ※ 투자유치박람회과-6514	’17. 9. 18.	이경우 국장 노정열 과장 오병태 팀장 배영노 팀장
○ 설계용역 중간보고회 결과 및 기본설계 변경계획 보고 ※ 투자유치박람회과-7914	’17. 11. 16	주철현 시장 최종선 부시장 이경우 국장 노정열 과장 배영노 팀장
○ 녹색건축, 에너지효율등급, BF 등 예비인증 시행 ※ 투자유치박람회과-8564	’17. 12. 18.	노정열 과장 오병태 팀장 배영노 팀장
○ 설계용역 추진상황(문제점 및 대책) 보고 ※ 투자유치박람회과-987	’18. 2. 22.	주철현 시장 최종선 부시장 이경우 국장 노정열 과장 정후엽 팀장 배영노 팀장
○ 전시․체험시설 설계결과 및 발주계획 보고 ※ 투자유치박람회과-1371	’18. 3. 14.	최종선 부시장 이경우 국장 노정열 과장 정후엽 팀장 배영노 팀장
○ 청소년해양교육원 건립․운영을 위한 업무 협약 체결 ※ 여수시, 2012여수세계박람회재단	’18. 3. 23.	주철현 시장 송대수 이사장
○ 건설기술심의 신청 ※ 투자유치박람회과-2126 →‘18. 5. 3. 심의(조건부 채택)	’18. 4. 23.	노정열 과장 정후엽 팀장 배영노 팀장
○ 건축위원회 구조안전심의 신청 ※ 투자유치박람회과-2387 →‘18. 5. 24. 심의(원안가결)	’18. 5. 8.	노정열 과장 정후엽 팀장 배영노 팀장

○ 건립공사 일상감사 요청 ※ 투자유치박람회과-4080 →‘18. 8. 28. 일상감사 완료	’18. 8. 22.	신윤옥 과장 장혜숙 팀장 배영노 팀장
○ 건립공사 계약심사 요청 ※ 투자유치박람회과-4238 →‘18. 9. 27. 계약심사 완료	’18. 8. 29.	신윤옥 과장 장혜숙 팀장 배영노 팀장
○ 건립공사 계약의뢰 ․※ 건축 : 2019. 1. 18. 개찰 ※ 전기․통신․소방 : 2019. 1. 8. 개찰	’18. 12. 14.	신윤옥 과장 장혜숙 팀장 배영노 팀장
○ 건축협의 및 도시관리계획(지구단위계획) 변경 요청	’18. 12. 19.	신윤옥 과장 장혜숙 팀장 배영노 팀장
○ 공사 계약체결 (건축, 전기, 소방, 통신) ※ 회계과-4945(‘19 .2. 7.)	’19. 1. 22. ~ ’19. 2. 7.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장
○ 공사감리 계약체결 (전기, 건축, 소방, 통신) ※ 회계과-8899(‘19 .2.28.)	’19. 2. 21. ~ ’19. 2. 28.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장
○ 건축협의 및 도시관리계획 (지구단위계획)결정변경 ※ 도시계획과-4263(‘19 .3. 4.)	’19. 3. 4.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장
○ 공사 착공 ○ 공사 기공식 행사 ※ 회계과-9546(‘19 .3. 6.)	’19. 3. 4. ’19. 3. 7.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장
○ 청소년해양교육원 건립․운영을 위한 사업시행 실시협약서 체결 ※ 여수시, 2012여수세계박람회재단	’19. 4. 20.	권오봉 시장 송대수 이사장
○ 청소년해양교육원 전시시설 제작․설치 여수시계약심의위원회 심의통과 ※ 회계과-26211(‘19 .5.29.)	’19. 5. 28.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장
○ 청소년해양교육원 폐합성수지 폐기물 처리용역 계약체결 ※ 회계과-31886(‘19 .6.25.)	’19. 6. 25.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장
○ 녹색건축에너지효율 등급․BF 본인증 용역 계약체결 ※ 회계과-32576(‘19 .6.27.)	’19. 6. 27.	신윤옥 과장 김종준 팀장 권미선 팀장

○ 여수 청소년해양교육원 전시 시설 제작 설치 입찰공고 ※ 투자유치박람회과-4413(‘19.8.13.)	’19. 8.14. ~ ’19. 8.26.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 건축공사(2차분) 계약체결 ※ 회계과-42490(‘19 .8.22.)	’19. 8.22. ~ ’20. 8. 5.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 기계공사(수영장설비) 계약 체결 ※ 회계과-43338(‘19. 8.27.)	’19. 8.26. ~ ’19.12.28.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 전시시설 제작 설치사업 제안서 평가위원 모집 공고 ※ 투자유치박람회과-5228(‘19.9.23.)	’19. 9.24. ~ ’19.10.11.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 전시시설 제작 설치사업 제안서 평가위원회 개최 결과 보고 ※ 투자유치박람회과-5998(‘19.10.28.)	’19.10.28.	신윤옥 과장 정귀준 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 전시시설 제작 설치 우선협상대상자와의 협상 ※ 투자유치박람회과-6325(‘19.11.12.)	’19.11.12.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 건축공사 실정보고(4차) 검토 결과에 따른 처리계획 ※ 투자박람회과-6640(‘19.11.27.)	’19.11.27.	성동범 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 건축공사 실정보고(5차) 검토 결과에 따른 처리계획 ※ 투자박람회과-6779(‘19.12. 3.)	’19.12. 3.	성동범 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 전시 시설 제작 설치 계약체결 ※회계과-6783(‘19.12. 3.)	’19.12. 3. ~ ’20. 9.28.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관

○ 여수 청소년해양교육원 건립 공사 (건축)설계변경 시행 계획 ※ 투자유치박람회과-7138(‘19.12.19.)	’19.12.19.	권오봉 시장 고재영 부시장 성동범 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 총괄 및 1차분 변경계약 ※ 회계과-68343(‘19.12.26.)	’19.12.26.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 운영계획 수립용역 추진 계획 ※ 투자유치박람회과-435(‘20. 1.22.)	’20. 1.22.	김병완 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 유광희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 운영계획 수립용역 입찰공고 ※ 투자유치박람회과-615(‘20. 2. 3.)	’20. 2. 3.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 유광희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 운영계획 수립용역 입찰 재공고 ※ 투자유치박람회과-936(‘20. 2.18.)	’20 .2.18.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 유광희 주무관
○ 건축공사(3차분) 계약체결 ※ 회계과-11266(‘20. 3. 2.)	’20. 2.25.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 운영계획 수립 용역 계약 체결 ※ 회계과-16337(‘20. 3.24.)	’20. 3.25. ~ ’20. 7.22.	신윤옥 과장 배기봉 팀장 유광희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 설치 및 운영 조례안 수정 제정 계획 ※ 투자유치박람회과-2725(‘20. 5.16.)	’20. 5.16.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장
○ 여수 청소년해양교육원 민간위탁 추진계획 ※ 투자유치박람회과-2726(‘20. 5.16.)	’20. 5.16.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장

○ 여수 청소년해양교육원 건립관급자재 설계변경 검토 보고 ※ 투자박람회과-3241(’20. 6. 12.)	’20. 6. 12.	김병완 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 물가변동에 따른 계약금액 조정 계획 ※ 투자박람회과-3481(’20. 6. 25.)	’20. 6. 25.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(1차) 실정보고 처리계획 ※ 투자박람회과-3461	’20. 6. 24.	김병완 국장 신윤옥 과장 배기봉 팀장 박규연 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축, 기계, 통신) 관급자재 구입 시행 ※ 투자박람회과-4510	’20. 8. 10.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축, 2차분) 변경계약 검토보고 ※ 투자박람회과-4415	’20. 8. 5.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 관급자재 구입 시행 ※ 투자박람회과-4691	’20. 8. 20.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 관급자재 구입 시행 ※ 투자박람회과-4756	’20. 8. 24.	서은수 부시장 김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(통신) 관급자재 구입 시행 ※ 투자박람회과-5347	’20. 9. 23.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관

○ 여수 청소년해양교육원 건립공사 도시가스 공급계약 체결 및 시설분담금 납부 ※ 투자박람회과-5170	’20. 9. 14.	이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 운영사무 이관 검토보고 ※ 투자박람회과-5194	’20. 9. 15.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장
○ 여수 청소년해양교육원 운영 계획 ※ 투자박람회과-5195	’20. 9. 15.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 유광희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(통신) 관급자재 구매 계약 의뢰 ※ 투자박람회과-5376	’20. 9. 24.	이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사 변경(기간연장) 계약 ※ 투자박람회과-5439	’20. 9. 28.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 박스민 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 상주감리용역 설계변경 검토보고 ※ 투자박람회과-5886	’20. 10. 23.	이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 전시시설 설치관련 선진지 벤치마킹 추진계획 ※ 투자박람회과-6054	’20. 11. 2.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(통신) 관급자재 구입 시행 ※ 투자박람회과-6133	’20. 11. 5.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립에 따른 급수공사비 납부 ※ 투자박람회과-6372	’20. 11. 17.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관

○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(전기) 설계변경 검토 ※ 투자박람회과-6710	’20. 12. 4.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(소방) 설계변경 검토 ※ 투자박람회과-6786	’20. 12. 9.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 관급자재 구입 시행 ※ 투자박람회과-6819	’20. 12. 10.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 설계변경 검토 보고 ※ 투자박람회과-7086	’20. 12. 23.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(통신) 설계변경 검토 ※ 투자박람회과-7114	’20. 12. 24.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 청소년해양교육원 건립공사(건축) 설계변경에 따른 계약심사 요청 ※ 투자박람회과-7111	’20. 12. 24.	이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관
○ 여수 소년해양교육원 건립공사 설계변경(기간연장) 검토보고 ※ 투자박람회과-376	’20. 1. 21.	김병완 국장 이병호 과장 최용진 팀장 손소희 주무관

○ 「여수청소년해양교육원 건립공사(건축)」관급자재 변경 구매 ※ 여성가족과-6122	’21. 2. 8.	장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○「여수시청소년해양교육원」내 3D영상물 지정기탁 심사 의뢰 ※ 여성가족과-7519 → 기부심사위원회 심사결과 접수가결(가결 10명), 제2021-1호	’21. 3. 4.	장병연 과장 서정택 팀장 김유민 주무관
○ 여수시청소년해양교육원 자가전기설비 안전관리 대행용역 시행 ※ 여성가족과-12134	’21. 3. 10.	장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○「여수시청소년해양교육원 건립공사」설계변경(기간연장) 검토 보고 ※ 여성가족과-13456	’21. 3. 16.	박은규 국장 장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○ 여수시청소년해양교육원 건립공사(건축) 설계변경 검토 보고 ※ 여성가족과-20729	’21. 4. 22.	장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○「여수청소년해양교육원 건립공사」폐합성수지 폐기물처리용역 계약변경 요청 ※ 여성가족과-21422	’21. 4. 28.	장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○ 여수시청소년해양교육원 준공 ※ 회계과-22553	’21. 4. 30.	장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○ 여수시청소년해양교육원 건립공사(녹색건축, 에너지효율등급, BF본인증 용역) 기간연장 검토 보고 ※ 여성가족과-27643	’21. 6. 10.	장병연 과장 서정택 팀장 손소희 주무관
○「여수시청소년해양교육원」 운영 위·수탁 협약 체결 ※ 여성가족과-28631	’21. 6. 28.	장병연 과장 서정택 팀장 김유민 주무관