정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-12	담당부서 작성자	경제해양수산국/지역경제과 하성준/061-659-4536
정 책 명	서시장주변시장 아케이드 설치사업
사업개요	○ 추진배경 - 일일 2만여 명이 이용하는 여수 최대 전통시장인 서시장주변시장의 아케이드 설치사업을 통하여 시장 환경을 개선 - 방문 고객들의 불편을 해소하여 전통시장 활성화에 기여 ○ 위 치 : 여수시 좌수영로 16-6(서교동) ○ 사업기간 : 2017. 6. ~ 2018. 4. ○ 사 업 비 : 1,500백만 원 ○ 사업내용 : 상․하수도 공사 및 아케이드 1,305㎡ 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 주요 추진경과 및 사업관련자 현황 ○‘17. 4. 30. : 설계용역 완료 - 관련자 : 지역경제과 주무관 김지아, 팀장 조계완, 과장 고재익 ○‘17. 7. 11. : 공사 착공 - 관련자 : 지역경제과 팀장 하성준, 팀장 조계완, 과장 고재익 ○‘17. 12. 27. : 상․하수도 공사 및 아케이드 기초 공사 완료 - 관련자 : 지역경제과 팀장 하성준, 팀장 조계완, 과장 고재익 ○‘18. 4. 30. : 아케이드(부대공사 포함) 공사 완료(예정) - 관련자 : 지역경제과 팀장 하성준, 팀장 조계완, 과장 정재호