정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시 신덕지구 연안정비공사
② 추진배경	태풍 해일 등에 노출되어 훼손이 우려되는 연안을 보호하고, 침식된 연안은 호안재정비를 통해 안전한 연안구역 조성
③ 사업개요	○ 사업목적 : 연안정비 ○ 위 치 : 여수시 신덕해수욕장 및 모사금 해수욕장 일원 ○ 사 업 비 : 2,977백만 원(국비 1,665, 시비 1,312) ○ 사업내용 : 호안정비 L=375m, 해안연결로 L=768m
④ 사업부서	여수시 해양항만레저과		⑤ 담당자		시설9급 황보호 행정5급 오영록
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘16. 2. ~‘19. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 제2차 연안정비기본계획(변경) 반영		‘14. 9.23.		-
○ 실시설계용역 시행(용역 착수) ※ 해양항만레저과-665호(2016.1.26.)		‘16. 1.19. (‘16. 2.23.)		이승옥 부시장 강승원 국장 노정열 과장 심근하 팀장 정동섭 주무관
○ 실시계획 승인 초안 사전협의 실시(해양수산부)		‘17. 2.23.		-
○ 해역이용협의 용역 계약 의뢰 ※ 해양항만레저과-1222호(2017.2.14.)		‘17. 2.14.		이영철 과장 최창용 팀장 정준호 주무관
○ 해역이용협의 용역 착수 ※ 해양항만레저과-1865호(2017.3.7.)		‘17. 3. 8.		이영철 과장 최창용 팀장 정준호 주무관
○ 해역이용협의 용역 완료 ※ 해양항만레저과-3160호(2017.4.12.)		‘17. 4.15.		이영철 과장 최창용 팀장 정준호 주무관
○ 여수시 기술자문위원회 개최 ※ 해양항만레저과-1984호(2017.3.10.)		‘17. 4.20.		임채선 팀장 정준호 주무관
○ 실시계획협의회신(해양수산부→여수시) * 접수 해양항만레저과-4612(2017. 5. 29.)		‘17. 5.29.		해양수산부

○ 전라남도 계약심사 완료 * 접수 해양항만레저과-4763(2017. 6. 2.)	‘17. 6. 2.	전라남도
○ 실시계획 수립 승인고시 관보 * (여수시고시 제2017-138호)	‘17. 6. 8.	-
○ 신덕지구 연안정비사업 착공 (총괄 및 1차분) ※ 해양항만레저과-5609호(2017.6.26.)	‘17. 6. 8. (‘17. 6.26.)	주철현 시장 최종선 부시장 송병구 국장 이영철 과장 최창용 팀장 정준호 주무관
○ 연안정비사업 실시설계용역 준공 ※ 해양항만레저과-5446호(2017.6.22.)	‘17. 6.28.	이영철 과장 최창용 팀장 정준호 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 착공(2차분) ※ 해양항만레저과-1583호(2018.3.5.)	‘18. 2.22. (‘18. 3. 8.)	주철현 시장 최종선 부시장 임채성 국장 오영록 과장 정종기 팀장 박수현 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 해양환경영향조사 용역 착수 ※ 해양항만레저과-2629호(2018.4.10.)	‘18. 3. 8. (‘18. 4. 17.)	오영록 과장 정종기 팀장 박수현 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 준공(1차분) ※ 해양항만레저과-4209호(2018.6.7.)	‘18. 6. 4.	오영록 과장 정종기 팀장 박수현 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 준공(2차분) ※ 해양항만레저과-9063호(2018.12.12.)	‘18. 12. 11.	오영록 과장 정종기 팀장 박수현 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 착공(3차분) ※ 해양항만레저과-189호(2019. 1. 11)	‘19. 1. 14.	권오봉 시장 고재영 부시장 송석주 국장 오영록 과장 정종기 팀장 박수현 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 준공(3차분) ※ 해양항만레저과-5855호(2019. 6. 23)	‘19. 6. 21.	오영록 과장 정종기 팀장 황보호 주무관
○ 신덕지구 연안정비사업 해양환경영향조사 용역 준공	‘19. 7. 9.	오영록 과장 곽춘호 팀장 황보호 주무관