중점관리대상 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-19	담당부서 작성자	(경제해양수산국/해양항만레저과) (박수현/☎ 3972)
정 책 명	여수시 우두지구 연안정비공사
사업개요	○ 추진배경 - 태풍 해일 등에 노출되어 훼손이 우려되는 연안을 보호하고, 침식된 연안은 호안재정비를 통해 안전한 연안구역을 조성 하는데 그 목적이 있음. ○ 추진기간 : 2016. 2 ~ 2018. 8. ○ 총사업비 : 685백만 원 ○ 주요내용 : 호안정비 L=325.71m
추진경과 및 사업 관련자	□ 추진경과 및 사업관련자 현황 ○ ‘14.9.23 : 제2차 연안정비기본계획(변경) 반영 ○ ‘16.1.22 : 실시설계용역 시행 - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 정동섭, 팀장 심근하, 과장 노정열, 국장 강승원 ○ ‘17.4.6 : 우두지구 실시계획 협의 완료(전라남도/해수부) * 접수 해양항만레저과-2948(2017. 4. 6.) ○ ‘17.4.12 : 전라남도 계약심사 완료 * 접수 해양항만레저과-3136(2017. 4. 12.) ○ ‘17.4.18 : 우두지구 연안정비사업 시행 - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 정준호, 팀장 최창용, 과장 이영철, 국장 송병구, 부시장 최종선, 시장 주철현 ○ ‘17.4.28 : 우두지구 연안정비사업 실시설계용역 준공 - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 정준호, 팀장 최창용, 과장 이영철, 국장 송병구, 부시장 최종선, 시장 주철현 ○ ‘17.8.8 : 우두지구 연안정비사업 일시정지 - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 정준호, 팀장 최창용, 과장 이영철, 국장 송병구 ○ ‘17.10.30: 피해보상 관련 주민회의 실시 - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 정준호, 팀장 최창용, 과장 이영철 * 해양항만레저과-7196(2017. 8. 8.)

※ 추진실적은 필요한 경우 별첨으로 등록 가능

추진경과 및 사업 관련자	○ ‘17.11.22: 우두지구 연안정비사업 일시정지 해지 * 해양항만레저과-10240(2017. 11 .21) - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 정준호, 팀장 최창용, 과장 이영철, 국장 송병구 ○ ‘18.4.23 : 우두지구 연안정비사업 일시정지(행정절차 이행) * 해양항만레저과-2432(2018. 04. 03) - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 박수현, 팀장 정종기, 과장 오영록, 국장 임채성 ○ ‘18.7.17 : 우두지구 연안정비사업 일시정지 해지(행정절차 완료) * 해양항만레저과-5239(2018. 07. 17) - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 박수현, 팀장 정종기, 과장 오영록 ○ ‘18. 8.11 : 우두지구 연안정비사업 준공 - 관련자 : 해양항만레저과 주무관 박수현, 팀장 정종기, 과장 오영록