정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2017년도 도서종합개발사업 (완료)
② 추진배경	열악한 도서지역의 기반시설 확충으로 쾌적한 생활환경 구축 및 지역경제 활성화를 도모하고 정주여건 개선
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 11. ○ 위 치 : 여수시 남면, 화정면, 삼산면 등 도서지역 ○ 사 업 량 : 28건 / 28건 준공 (방파제 14, 접안시설 1, 물양장 2, 월파방지시설 2, 도로확장 3, 탐방로 4, 부잔교 1, 방풍가공시설 1) ○ 사 업 비 : 15,068백만 원 (국비 11,716, 도비 1,676, 시비 1,676)
④ 사업부서	여수시 섬자원개발과		⑤ 담당자		시설8급 강호권 행정5급 김태횡
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 1. ~‘19. 11.
<그간 주요 추진내용>
○ 2017년 도서종합개발사업 추진 계획(안) ※ 섬자원개발과-3842		‘16. 4.27.		주철현 시장 이승옥 부시장 강승원 국장 이영택 과장 고희승 팀장 마동현 주무관
○ 2017년 도서종합개발사업 실시 설계용역 시행 ※ 섬자원개발과-8136, 8137, 8225		‘16. 9. 1. ‘16. 9. 5.		최종선 부시장 강승원 국장 임채성 과장 고희승 팀장 마동현 주무관
○ 2017년 도서종합개발사업 실시설계용역 준공 (남, 삼산) ※ 섬자원개발과-1129, 1384		‘17. 2. 3. ‘17. 2. 9.		임채성 과장 고희승 팀장 마동현 주무관
○ 남면 직포해수욕장 기반시설 (방파제) 정비공사 등 시행 ※ 섬자원개발과-286, 287, 383, 1893, 1894, 2107, 2108, 2312, 2313, 3826		‘17. 4. 6. ~ ‘17.10. 2.		주철현 시장 최종선 부시장 송병구 국장 임채성 과장 고희승 팀장 마동현 주무관

○ 남면 안도 이야포마을 월파 방지시설 설치공사 등 시행 ※ 섬자원개발과-2730	‘17. 4.11. ~ ‘17.10. 7.	최종선 부시장 송병구 국장 임채성 과장 고희승 팀장 마동현 주무관
○ 남면 학동 방파제 보강공사 등 시행 ※ 섬자원개발과-93, 90, 2233, 2234	‘17. 1.11. ~ ‘17. 9.18.	송병구 국장 임채성 과장 고희승 팀장 마동현 주무관
○ 화정면 제도지구 연안시설 정비공사 등 시행 ※ 섬자원개발과-2751, 4423	‘17. 3.15. ‘17. 4.26.	송병구 국장 임채성 과장 고희승 팀장 임인수 주무관
○ 백야항 접안시설 주차장 개설 공사 등 시행 ※ 섬자원개발과-4572, 4695, 4696	‘17. 5. 1. ‘17. 5. 8.	주철현 시장 최종선 부시장 송병구 국장 임채성 과장 고희승 팀장 임인수 주무관
○ 화양면 운두도 마을 진입도로 확장공사 등 시행 ※ 섬자원개발과-2778, 2779, 2780, 3826, 4428	‘17. 4.19. ~ ‘17.10. 7.	최종선 부시장 송병구 국장 임채성 과장 고희승 팀장 임인수 주무관
○ 2017년 도서종합개발사업 실시설계용역 준공 (화정) ※ 섬자원개발과-9760	‘17. 9.26.	심근하 과장 고희승 팀장 임인수 주무관
○ 백야마을 진입도로 정비공사 등 사업 시행 ※ 섬자원개발과-4740	‘18. 6. 4.	최종선 부시장 임채성 국장 심근하 과장 배도선 팀장 정을룡 주무관
○ 몽돌해수욕장 진입도로 확포장 및 백야마을 진입도로 정비 공사 시행 ※ 섬자원개발과-11276	‘17. 6.21.	서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 몽돌해수욕장 진입도로 확포장공사 설계변경 ※ 섬자원개발과-9634	‘18.12.27.	서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관
○ 몽돌해수욕장 진입도로 확포장공사 일시정지 ※ 섬자원개발과-1767	‘19. 2.27.	서재풍 과장 명주완 팀장 문효순 주무관