정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(완료)화양면 화동도로 확장
② 추진배경	협소한 도로 개량으로 교통사고 예방 및 지역 균형발전 도모
③ 사업개요	○ 위 치 : 화양면 화동리 763번지 일원 ○ 사 업 량 : L=840m, B=10m ○ 사 업 비 : 3,450백만 원 (공사 1,150,보상 및 기타 2,300)
④ 사업부서	여수시 도로과	⑤ 담당자			시설8급 김종서 시설5급 서유권
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사	⑦ 사업기간			‘15. 1. ~‘19. 1.
<그간 주요 추진내용>
○ 도로구역결정 고시			‘15. 1.29.	조일수 과장 편우평 팀장 최종광 주무관
○ 확장공사 추진계획 수립 ※ 도로과-3696호			‘15. 4.10	주철현 시장 이승옥 부시장 전동호 국장 김회근 과장 서유권 팀장 최종광 주무관
○ 보상계획 열람 공고 ※ 도로과-3922호			‘15. 4.17.	김회근 과장 윤국한 팀장 김형출 주무관
○ 보상협의 ※ 도로과-5732 ~ 8377호			‘15. 6. 1. ~ 8. 5.	김회근 과장 윤국한 팀장 김형출 주무관
○ 보상협의 ※ 도로과-8579호 ~ 10833호			‘15. 8.11. ~ 10. 8.	김회근 과장 정채윤 회계과장 김지주 계약1팀장 김석순 팀장 주선미 주무관

○ 손실보상(4차) ~ 추가분 ※ 도로과-3174호(4차) 5349, 5735호(5차/5.20, 5.30.) 6816호(추가분)	‘16. 3.24. ~ 6.22.	이승옥 부시장 전동호 국장 문태선 과장 양기원 회계과장 김지주 계약1팀장 김석순 도로행정팀장 서유권 팀장 전세용 주무관 정춘균 주무관
○ 보완설계용역 시행 ※ 도로과-13578호	‘16.12. 9.	문태선 과장 서유권 팀장 전세용 주무관
○ 공사 집행계획 수립 ※ 도로과-1936호	‘17. 2.16.	주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 문태선 과장 서유권 팀장 김동언 주무관
○ 공사 계약 의뢰 및 체결 ※ 도로과-3042호 ※ 회계과-18605호(4.10.)	‘17. 3.14. (4. 6.)	이노철 안전행정국장 문태선 과장 김용우 과장 윤석호 계약1팀장 서유권 팀장 박미영 주무관 김동언 주무관
○ 공사 착공 ※ 도로과-4496호(4.14.)	‘17. 4.13.	문태선 과장 서유권 팀장 김동언 주무관
○ 공사(2차분) 시행 ※ 도로과-6114호	‘17. 5.25.	최종선 부시장 조일수 국장 문태선 과장 김용우 회계과장 윤석호 계약1팀장 서유권 팀장 주무관 김동언

○ 1차분 준공 ※ 도로과-1000호(1.26.)	‘18. 1.25.	김기채 과장 서범규 팀장 김현식 주무관
○ 2차분 설계변경 시행 및 계약 의뢰 ※ 도로과-10738, 10742호 ※ 회계과-48213호(10.10.)	‘18.10. 8. (10.11.)	양기원 안전행정국장 문태선 과장 박은규 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김현식 주무관
○ 일시정지(2차분) ※ 도로과-11964, 12043호 ※ 회계과-53509호	‘18.11. 6.	김기채 국장 양기원 행정안전국장 문태선 과장 박은규 회계과장 홍주성 계약2팀장 서범규 팀장 김성욱 주무관 김현식 주무관
○ 공사 일시정지 해지 ※ 도로과-921호 ※ 회계과-3079호	‘19. 1.23.	서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김종서 주무관
○ 총괄 및 2차분 준공 ※ 회계과-3819호	‘19. 1.28.	서유권 과장 박은규 회계과장 손하진 계약1팀장 배도선 팀장 김종서 주무관