중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	웅천~소호간 도로개설
② 추진배경	웅천택지 준공에 따른 시가지 교통체증 해소 및 진출입차량 분산으로 원활한 교통소통 환경 제공
③ 사업개요	○ 사업위치 : 웅천 ~ 소호 일원 ○ 사 업 량 : L=1,154m(해상교량 550m), B=22.5~26m ○ 사 업 비 : 71,309백만원(공사 66,547 설계 및 감리 3,106 보상 1,656)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 박성원 시설5급 오정환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18. 7. ~‘22. 7.
<그간 주요 추진내용>
○ 도로개설공사 추진 보고 ※ 도로과-6520호		‘16. 6.17.		주철현 시장 전동호 국장 문태선 과장 유경상 팀장 강성욱 주무관
○ 일괄입찰 방법 심의완료 및 계약 ※ 도로과-7131, 7235호 ※ 회계과-33244호		‘16. 6.30. (7. 6)		문태선 과장 김용우 회계과장 김지주 계약1팀장 유경상 팀장 박연주 주무관 강성욱 주무관
○ 공사 집행계획 수립 ※ 도로과-2765호		‘17. 3. 7.		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 문태선 과장 유경상 팀장 주기옥 주무관
○ 공사 계약 ※ 도로과-2819호		‘17. 3. 8.		문태선 과장 유경상 팀장 주기옥 주무관
○ 기본설계 심의 토론 및 평가위원회 개최 ※ 전남도 지역계획과-19691호		‘17. 9.28. (9.22.)		김정선 건설도시국장 김홍남 지역계획과장 김정남 산단조성팀장 홍일권 주무관

○ 실시설계적격자 선정 ※ 조달청 시설총괄과-8829호	‘17.10.13.	김기채 과장 유경상 팀장 주기옥 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-13884호	‘17.12.26. (12.19.)	조일수 국장 김기채 과장 유경상 팀장 주기옥 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 신청 ※ 도로과-7382호	‘18. 7. 5.	김기채 과장 유경상 팀장 마동현 주무관
○ 시설공사 계약 및 착공 ※ 도로과-7821, 8852호 ※ 회계과-36211호(‘18.7.18.)	‘18. 7.11. (8.19.)	권오봉 시장 고재영 부시장 고재익 과장(대결) 김기채 국장 문태선 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 유경상 팀장 최홍식 팀장 김성욱 주무관 마동현 주무관
○ 실시계획인가 고시 ※ 도시계획과-21416호	‘18.10.11.	문태선 과장 최홍식 팀장 마동현 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-12767호	‘18.11.28.	문태선 과장 최홍식 팀장 이혜진 주무관
○ 사후환경영향조사용역 집행계획 ※ 도로과-1404호	‘19. 2. 1.	고재영 부시장 김기채 국장 박은규 과장 서유권 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 1차분 기성대가 지급 ※ 도로과-1110호 ※ 회계과-3541호(‘19.1.26.)	‘19.1.26.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김성욱 주무관
○ 2차분 계약체결 및 착공 ※ 회계과-29978호(‘19.6.17.)	‘19. 6.17.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 김성욱 주무관

○ 정기안전점검 과업수행계획서 적정성여부 검토결과 ※ 도로과-7937호(‘19.6.25.)	‘19. 6.25.	서유권 과장 이재종 팀장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 하도급 변경계약(종점부 제작장 및 적출장 조성)적정성 검토 결과 제출 ※ 도로과-10783호(‘19.8.30.)	‘19. 8.30.	서유권 과장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 공유수면매립 기본계획 반영 관계기관 협의의견 대한 조치계획 제출(여수 웅천~소호간) ※ 도로과-13323호(‘19.10.29.)	‘19.10.29.	서유권 과장 이영호 팀장 마동현 차장
○ 어업보상계획 공고 ※ 도로과-15801호	‘19.12.23.	서유권 과장 이덕연 팀장 마동현 차장
○ 어업피해조사용역 준공금 집행 ※ 도로과-16111호	‘19.12.30.	장세길 과장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이덕연 팀장 송문종 차장
○ 어업권 피해 손실보상비 집행 ※ 도로과-1941호	‘20. 2.14.	권오봉 시장 서은수 부시장 장세길 국장 박은규 과장 손하진 팀장 서유권 과장 이덕연 팀장 이영호 팀장 유재영 차장 송문종 차장
○ 사후환경영향조사용역계획변경 실정보고 검토보고 ※ 도로과-3739호	‘20. 3.18.	서유권 과장 박은규 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 유재영 차장
○ 기성대가(7회) 확정 통보 ※ 회계과-17341호	‘20. 3.27.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 조민아 차장
○ 소규모환경영향평가 용역 일시정지 해지 및 변경계약 사항 통보 ※ 도로과-6007	‘20. 5.6.	양기원 국장 박은규 과장 서유권 과장 손하진 팀장 유재영 차장 박희진 주무관
○ 건설사업관리용역(총괄 및 2차분) 변경계약 사항 통보 ※ 도로과-8446 ※ 회계과-37647	‘20. 6.25.	양기원 국장 김학섭 과장 박은규 과장 손하진 팀장 이영호 팀장 유재영 차장 조민아 차장
○ 편입 토지 확인 결과 제출 ※ 도로과-11476	‘20. 8.31.	강 균 과장 이영호 팀장 유재영 차장
○ 웅천~소호간 도로개설공사 건설사업관리용역(2차분) 기성대가(2회) 확정 통보 ※ 도로과-16161, 회계과-69942	‘20.12.22.	강 균 과장 유재영 차장
○웅천~소호도로개설공사 어업권 보상이의신청 조치계획 ※ 도로과-16204	‘20.12.22.	강 균 과장 김희신 팀장 이영호 팀장 유재영 차장 송문종 차장
○ 웅천~소호간 도로개설공사(2차분) 기성대가(16회) 확정 통보 ※ 도로과-16260	‘20.12.24.	강 균 과장 유재영 차장
○웅천~소호간 도로개설공사 해양환경영향 조사 결과 통보서(2020년도) 제출 ※ 도로과-1235	‘21.1.29.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사(2차분) 기성대가(18회) 확정 통보 ※ 도로과-2506, 회계과-9466	‘21.3.8.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사 직접구매 대상(관급자재) 구입 검토보고 ※ 도로과-3759	‘21.3.29.	권오봉 시장 서은수 부시장 임광건 국장 조계운 과장 오병구 팀장 강 균 과장 김정남 팀장 정준호 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사(2차분) 기성대가(19회) 확정 통보 ※ 도로과-5322, 회계과-22732	‘21.5.3.	강 균 과장 정준호 주무관
○ 사전 컨설팅감사 신청(웅천~소호 간 도로개설공사) ※ 도로과-7025	‘21.6.11.	강 균 과장 김정남 팀장 정준호 주무관
○ 웅천~소호 간 도로개설공사 재실정보고 재보완 지시 결과보고 ※ 도로과-9154	‘21.7.27.	강 균 과장 한상범 주무관
○ 웅천~소호 간 도로개설공사 2021년 3분기 현장 합동점검 결과보고 ※ 도로과-11019	‘21.9.13.	최상록 주무관
○ 웅천~소호 간 도로개설공사 2021년 3분기 현장 합동점검 결과보고 ※ 도로과-11019	‘21.9.13.	최상록 주무관
○ 웅천~소호 간 도로개설공사 2021년 현장 합동점검 및 지자체 현장밀착 안전점검 계획보고 ※ 도로과-14617	‘21.12.16.	최상록 주무관
○ 웅천~소호 간 연결교량 명칭 공모안내 및 홍보 협조 ※ 도로과-2546	‘22.3.7.	최상록 주무관 명호남 팀장 오정환 과장
○ 웅천~소호 간 연결교량 명칭 선정 및 시상(여수사랑상품권 지급) ※ 도로과-4799	‘22.4.28.	최상록 주무관 명호남 팀장 김은희 팀장 이동일 과장 오정환 과장
○ 웅천~소호 간 도로개설 구간 임시개통 예정알림 ※ 도로과-6014	‘22.5.30.	최상록 주무관 명호남 팀장 오정환 과장
○ 웅천~소호 도로사용(임시개통)개시 알림 ※ 도로과-6531	‘22.6.13.	최상록 주무관 명호남 팀장 오정환 과장
○ 웅천~소호간 도로개설공사 예비준공검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-6745, 회계과-29481	‘22.6.17.	최상록 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사(2차분) 외 2건 변경계약 체결알림 ※ 도로과-8022, 회계과-35604	‘22.7.21.	최상록 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사 폐기물처리용역 준공검사 공무원 지정 통보 ※ 도로과-8293, 회계과-36570	‘22.7.26.	박성원 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사 준공에 따른 시설물 이관 ※ 도로과-9828	‘22.9.2.	박성원 주무관
○ 웅천~소호간 도로개설공사 건설사업관리용역(2차분) 준공검사공무원 지정 통보 ※ 도로과-10036, 회계과-43140	‘22.9.7.	박성원 주무관