정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(완료)여문공원 공영주차장 신축
② 추진배경	○ 여서․문수지구의 주차공간 협소로 주차시설 확보를 통한 주차난 해소 ○ 주차공간 부족에 따른 상가주변 불법주차 해소로 상가 이용 활성화 도모 ○ 주거밀집지역의 주차난 해소로 주민 삶의 질 향상
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 문수동 169번지 ○ 사 업 비 : 5,500백만 원(국 1,750, 시 3,750) ○ 사업내용 : 주차전용건축물 신축 - 대지 2,800㎡, 철골조 3+1층, 주차 250면 ○ 사업기간 :‘17. 1. ~‘19. 3.
④ 사업부서	여수시 교통과		⑤ 담당자		시설7급 김경열 행정5급 고영준
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 1. ~‘19. 3.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업계획 변경(35억 → 55억) ※ 교통과-17419호		‘16. 3.25.		주철현 시장 이승옥 부시장 전동호 국장 장인호 과장 박희우 팀장 강한빛 주무관
○ 지방재정 투자사업 도 심사 ※ 전라남도 예산담당관-10194호 ※ 기획예산과-16243호		‘16. 8.12.		김병완 과장 고영준 팀장 백기광 주무관
○ 공유재산 관리계획 변경 ※ 기획예산과-5780호		‘17. 4. 4.		김태횡 팀장 서민형 팀장 박난실 주무관
○ 실시설계 용역 계약 의뢰 ※ 교통과-24187호		‘17. 4.17.		김용필 과장 김춘수 팀장 강한빛 주무관
○ 실시설계 용역 계약 - 용역기간 : `17. 5. 24. ~ 8. 21. ※ 회계과 - 27241호		`17. 5.24.		김용우 과장 윤석호 팀장 박미영 주무관

○ 공사 계약 의뢰 ※ 교통과-78102호	‘17.12.15.	김용필 과장 김춘수 팀장 김지아 주무관
○ 실시설계 용역 완료 ※ 회계과-64212호	`17.12.18.	김용필 과장 김춘수 팀장 김지아 주무관
○ 공사 착공 ※ 교통과-17419호 회계과-204호	‘18. 1. 5.	조일수 국장 김용필 과장 김춘수 팀장 김지아 주무관
○ 공사일시 정지	‘18.10.23.	김기채 국장 장광일 과장 천민호 팀장 김지아 주무관
○ 공사 준공 ※ 회계과-10623호	‘19. 3.22.	고영준 과장 양준호 팀장 김경열 주무관