정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명

행복주택사업

② 추진배경

서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 국민의 쾌적한 주거생활에 이바지하기 위하여 서교지구 행복주택 건설사업 추진

③ 사업개요

○ 사업목적 :서민의 주거안정 및 주거수준 향상 도모

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	계	수정지구(완료)	관문지구(완료)	서교지구(완료)
위 치	3	수정동 167 (구 시민아파트)	관문동 251-2 (동시장 일원)	서교동 153 (서교동 공영주차장)
사 업 비	61,200	17,500	20,800 (시비 1,900)	23,100 (시비 3,100)
사업기간		‘15. 3.~18.11.	‘16. 4.~20. 12.	‘17. 9.~23. 5.
규 모	600호	행복주택 200호	행복주택 200호	행복주택 200호

④ 사업부서

여수시 허가과

⑤ 담당자

시설7급 신현식

시설5급 김인옥

⑥ 선정기준

10억 원 이상의 공사

⑦ 사업기간

`15. 3. ~ `23. 1.

<그간 주요 추진내용>

○ 수정지구(완료)

- 행복주택 후보지 선정

※ 행복주택개발과-287호

- 주택건설사업계획 승인

※ 행복주택기획과-1822호

‘15. 3.24.

‘15.12.11.

국토교통부 행복주택정책과

이상주   과장

이중기 사무관

하태아 사무관

○ 착공

※ 허가민원과-68174호

‘16.11.23.

전동호 국장

이준형 과장

박성재 팀장

하성준 주무관

○ 입주자 모집공고

※ 허가민원과-62688호

‘17.9.28.

강동규 과장

박상훈 팀장

이정희 주무관

○ 사용검사(LH) ※｢한국토지주택공사법｣제19조에 따라 LH공사 자체 사용검사	‘18.12. 5.	한국토지주택공사 광주전남주택사업1부 김성범 과장 박춘웅 부장
○ 입주 ※ 광주전남임대공급운영부-11436호	‘18.12.20.	한국토지주택공사 광주전남임대공급운영부 주선요 사원 박민석 부장대우 이칠성 부장
○ 관문지구 - 행복주택 후보지 선정 ※ 행복주택정책과-490호 - 주택건설사업계획 승인 ※ 국토교통부고시제2016-898호 - 주택건설사업계획 변경 승인 ※ 국토교통부고시제2018-83호	‘16. 4.25. ‘16.12.16. ‘18. 1.31.	국토교통부 행복주택정책과 김용수 사무관 김강식 주무관
○ 착공	‘18. 1.25.	강동규 과장 박상훈 팀장 김경열 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 허가민원과-58370호	‘18. 9.17.	강동규 과장 박상훈 팀장 김경열 주무관
○ 입주자모집공고 ※ 허가민원과-556호	‘19. 1. 4.	박상훈 팀장 김경열 주무관
○ 서교지구 - 행복주택 후보지 선정 ※ 행복주택정책과-1218호 - 주택건설사업계획 승인 ※ 국토교통부고시제2017-929호	‘16. 9.13. ‘18. 1. 3.	국토교통부 행복주택정책과 김용수 사무관 정수영 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 허가민원과-55948호	‘18. 9.17.	강동규 과장 박상훈 팀장 김경열 주무관
○ 건축물(주택 등) 철거 설계 용역 계약 의뢰 ※ 허가민원과-59894호	‘18.10. 1.	강동규 과장 박상훈 팀장 김경열 주무관

○ 전라남도 지방토지수용위원회 심의 ※ 허가민원과-64676호	‘18.11. 2.	강동규 과장 박상훈 팀장 김경열 주무관
○ 착공	‘18.12.31.	강동규 과장 박상훈 팀장 김경열 주무관
○ 석면해체공사 계약체결 ※ 회계과-6829호	`19. 2.15.	박은규 회계과장 손하진 팀장 홍예랑 주무관
○ 지장물 철거공사 계약체결 ※ 회계과-8997호	`19. 2.28.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 팀장 김성욱 주무관
○ 폐기물 처리용역 계약체결 ※ 회계과-8997호	`19. 2.28.	양기원 행정지원국장 박은규 회계과장 손하진 팀장 김성욱 주무관
○ 석면해체공사 준공	`19. 6.11.	김인석 허가민원과장 김종승 팀장 안준성 주무관
○ 가연성폐기물 처리 계약 ※ 회계과-31417호	`19. 6.21.	박은규 회계과장 손하진 팀장 박희진 주무관
○ 지장물 및 폐기물 처리 준공	`19. 7.19.	김인석 허가민원과장 김종승 팀장 안준성 주무관
○ 가연성폐기물 처리 준공	`19. 7.31.	김인석 허가민원과장 김종승 팀장 안준성 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 허가민원과-44218호	`19. 8. 9.	김인석 허가민원과장 김종승 팀장 안준성 주무관

○ 가연성폐기물 처리 계약(추가) ※ 회계과-43486호	`19. 8.27.	박은규 회계과장 손하진 팀장 정선영 주무관
○ 가연성폐기물 처리 준공(추가)	‘19. 9. 6.	김인석 허가민원과장 김종승 팀장 안준성 주무관
○ 중앙토지수용위원회 수용재결 (서교지구) ※ 중토위 사무국-15800호	‘20. 5. 8.	김인석 허가민원과장 최정일 팀장 신현식 주무관
○ 관문지구 행복주택 행정준공 ※ 광주전남주택사업1부-62호	‘20.12.18.	한국토지주택공사 광주전남주택사업1부 김성범 과장 박춘웅 부장
○ 관문지구 행복주택 입주(완료)	‘20.12.28.	한국토지주택공사 광주전남임대공급운영부 오혜수 사원 송금영 차장 최종웅 부장
○ 입주자모집공고 ※ 서교지구 행복주택	‘21. 6. 24.	배영노 팀장 신현식 주무관
○ 입주자추가모집공고 ※ 서교지구 행복주택	‘22. 9. 28.	하성준 팀장 신현식 주무관
○ 입주자추가모집공고 ※ 서교지구 행복주택	‘22.12. 12.	하성준 팀장 신현식 주무관
○ 서교지구 행복주택 행정준공 ※ 광주전남주택사업부-1516호	‘23.05.04.	한국토지주택공사 광주전남주택사업부 심혜진 대리 김윤성 부장