정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시 충무지구 새뜰마을사업
② 추진배경	대통령 직속 지역발전위원회에서 생활여건이 취약한 지역을 개선하고자 2016년 공모에 선정됨.
③ 사업개요	○ 사업목적 : 취약지역의 개조사업을 통해 정주여건 조성 ○ 위 치 : 여수시 연등동 207-48 일원 ○ 사 업 비 : 4,693백만 원(국비 3,201, 도비 448, 시비 1,044) ○ 사업내용 : 재해위험시설, 우,오수관 정비, 상수도 정비, 옹벽경관 및 쉼터조성, 다목적 커뮤니티센터, 순환형 임대주택, cctv설치, 집수리 등
④ 사업부서	여수시 도시재생과		⑤ 담당자	시설7급 최원혁 행정5급 정수환
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦사업기간	‘16. 2. ~ ’22. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 충무지구새뜰마을사업 마스터 플랜 수립 및 실시설계용역 시행 계획 ※ 도시재생과-7269호		‘16. 6. 9.	주철현 시장 이승옥 부시장 전동호 국장 김학섭 과장 김문환 팀장 박가영 주무관
○ 충무지구새뜰마을사업 총괄 코디 및 마을활동가 위촉(계약) 체결 계획 ※ 도시재생과-828호		‘17. 1.19.	최종선 부시장 조일수 국장 김학섭 과장 정일석 팀장 박가영 주무관
○ 충무지구새뜰마을사업 휴먼 케어 및 주민역량강화용역 시행 및 계약체결 ※ 도시재생과-11476호		‘17. 9.12.	정재호 과장 정일석 팀장 박가영 주무관
○ 충무지구새뜰마을사업 마스터 플랜 수립 및 실시설계용역 완료 ※ 도시재생과- 호		‘18. 7.10.	박형욱 과장 정일석 팀장 황용순 주무관
○ 충무지구새뜰마을사업 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 준공 ※ 도시재생과-8961호		‘18. 8.29.	박형욱 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 충무지구 새뜰마을사업 건축공사 시행 계획 ※ 도시재생과-11831호	‘18.11. 6.	권오봉 시장 고재영 부시장 김기채 국장 박형욱 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축에 따른 건축허가 신청 ※ 도시재생과-12464호	‘18.11.20.	박형욱 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 순환형 임대주택 리모델링 공사 착공 ※ 도시재생과-13886호	‘18.12.18.	박형욱 과장 정일석 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 착공 ※ 도시재생과-14056호	‘18.12.20.	박형욱 과장 정일석 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 집수리선정위원회 위원 구성결과 보고 ※ 도시재생과-14249호	‘18.12.28.	김기채 국장 박형욱 과장 정일석 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 집수리선정위원회 위원 선정 알림 ※ 도시재생과-14364호	‘18.12.31.	박형욱 과장 정일석 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 커뮤니티센터 신축공사 추진에 따른 지장물(한전주) 이설 요청 ※ 도시재생과-228호	‘19. 1.11.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 커뮤니티센터 신축공사 실정보고 검토의견 제출 요청 ※ 도시재생과-260호	‘19. 1.11.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 실정보고 검토 ※ 도시재생과-1175호	‘19. 1.29.	문태선 국장 박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관

○ 충무지구 새뜰마을사업 순환형 임대주택 리모델링 공사 실정보고 검토 ※ 도시재생과-1147호	‘19. 1.29.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 순환형 임대주택 리모델링 공사 실정보고 승인사항 알림 ※ 도시재생과-1259호	‘19. 1.30.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 실정보고 승인사항 알림 ※ 도시재생과-1337호	‘19. 2. 1.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 일상감사 요청 ※ 도시재생과-2084호	‘19. 2.20.	박형욱 과장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 집수리선정위원회 개최 계획 ※ 도시재생과-2562호	‘19. 3. 4.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 집수리선정위원회 결과보고 ※ 도시재생과-2893호	‘19. 3. 8.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 순환형 임대주택 리모델링 전기공사 시행 ※ 도시재생과-3376호	‘19. 3.18.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 관급자재선정 심의위원회 심의요구 ※ 도시재생과-4479호	‘19. 3.22.	박형욱 과장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 기간연장 검토 ※ 도시재생과-4330호	‘19. 4. 3.	박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 편입토지 등 보상 실태조사 실시 ※ 도시재생과-4567호	‘19. 4. 9.	박형욱 과장 오병태 팀장 김대건 주무관

○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 보상 실태조사 및 협의보상 알림 ※ 도시재생과-5206호	‘19. 4.23.	박형욱 과장 오병태 팀장 김대건 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 집수리지원사업 시공업체 선정계획 ※ 도시재생과-6283호	‘19. 5.16.	문태선 국장 박형욱 과장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 커뮤니티센터 신축공사 기간연장 검토 ※ 도시재생과-6747호	‘19. 5.27.	문태선 국장 오병태 팀장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 계약심사 요청 ※ 도시재생과-6968호	‘19. 5.30.	오병태 팀장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 시행 ※ 도시재생과-7047호	‘19. 6. 1.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 국장 오병태 팁장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업 시공업체 선정 모집 재공고 ※ 도시재생과-7136호	‘19. 6. 3.	오병태 팀장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 계약의뢰 ※ 도시재생과-7295호	‘19. 6. 6.	오병태 팀장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업 선금 지급 결정 통보 ※ 도시재생과-7620호	‘19. 6.12.	오병태 팀장 김명근 팀장 이유진 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업 위수탁 계약체결 ※ 도시재생과-7847호	‘19. 6.15.	고재영 부시장 문태선 국장 오병태 팀장 김명근 팀장 이유진 주무관

○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 건설폐기물 처리용역 계약심사 요청 ※ 도시재생과-7995호	‘19. 6.19.	오병태 팀장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 주민역량강화 사업 행사운영비(일상경비) 교부 통보 ※ 도시재생과-8251호	‘19. 6.24.	오병태 팀장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 건설폐기물 처리용역 계약의뢰 ※ 도시재생과-8327호	‘19. 6.25.	오병태 팀장 김명근 팀장 김동언 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 휴먼케어및주민역량강화용역 사업시행검토보고 ※ 도시재생과-11972호	‘19. 9.4.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 방범용 CCTV시행 ※ 도시재생과-12730호	‘19. 9.18.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설 및 수밀조사 CCTV조사용역시행 ※ 도시재생과-12730호	‘19. 9.18.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 휴먼케어 및 주민역량강화용역 추진계획 ※ 도시재생과-13760호	‘19.10.10.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 보안등 시설공사 시행 ※ 도시재생과-14185호	‘19.10.16.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 경관정비사업 추진계획 ※ 도시재생과-15620호	‘19.11.11.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 기반시설공사 편입토지 보상계획 ※ 도시재생과-15746호	‘19.11.13.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김대성 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 편입토지 보상액 산정 및 집행계획 ※ 도시재생과-15746호	‘19.12.2.	문태선 국장 박성재 팀장 오병태 팀장 최용훈 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 집수리 지원사업 위수탁계약 변경 검토보고 ※ 도시재생과-17666호	‘19.12.16.	문태선 국장 박성재 팀장 김명근 팀장 김창오 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 편입토지 등 실태조사 및 감정평가 추진계획 ※ 도시재생과-1553호	‘20.2.4.	김동호 과장 박영화 팀장 최용훈 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 등 현장 실정에 따른 공기연장 검토보고 ※ 도시재생과-6895호	‘20.5.26.	문태선 국장 김동호 팀장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설공사 현장실정사항 반영 설계변경 시행 ※ 도시재생과-12373호	‘20.9.21.	권오봉 시장 서은수 부시장 문태선 국장 김동호 팀장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설 등 현장 실정에 따른 공기연장 검토보고 ※ 도시재생과-15916호	‘20.12.8.	문태선 국장 김동호 팀장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 과업연기 검토보고 ※ 도시재생과-4752호	‘21. 4. 1.	신윤옥 국장 김동호 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 박영화 팀장 강병욱 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설 등 현장 실정에 따른 설계변경 검토보고 ※ 도시재생과-7579호	‘21. 5.20.	신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 김동호 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 기반시설 수밀조사 및 CCTV용역 현장여건에 따른 검토보고 ※ 도시재생과-9387호	‘21. 6.10.	김동호 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설 수밀조사 및 CCTV조사용역 변경계약 의뢰 ※ 도시재생과-9457호	‘21. 6.10.	김동호 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설 건설폐기물 처리용역 변경계약 의뢰 ※ 도시재생과-9963호	‘21. 6.17.	김동호 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 기반시설 가연성폐기물 처리용역 변경계약 의뢰 ※ 도시재생과-9962호	‘21. 6.17.	김동호 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을사업 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 준공 및 정산보고 ※ 도시재생과-10118호	‘21. 6.21.	김동호 과장 박영화 팀장 강병욱 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 우수관로 정비공사 시행 ※ 도시재생과-11691호	‘21. 7.15.	박창배 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 휀스 설치공사 시행 ※ 도시재생과-13235호	‘21. 8.9.	박창배 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 커뮤니티센터 온수기 설치공사 시행 ※ 도시재생과-16402호	‘21. 10.5.	박창배 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 경관조성사업 변경계약 의뢰 ※ 도시재생과-16685호	‘21. 10.8.	박창배 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 커뮤니티센터 간판설치공사 시행 ※ 도시재생과-16787호	‘21.10.12.	박창배 과장 장진만 팀장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 순환형임대주택2 신축공사 시행 ※ 도시재생과-17758호	‘21.10.27.	신윤옥 국장 조계윤 과장 오병구 팀장 박창배 과장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 순환형임대주택1 리모델링공사 시행 ※ 도시재생과-20032호	‘21.12.06.	박창배 과장 조계윤 과장 오병구 팀장 김명근 팀장 최원혁 주무관
○ 충무지구 새뜰마을 사업완료	‘22.1.	정수환 과장 윤개근 팀장 최원혁 주무관