정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-36	담당부서 작성자	건설교통국/도로관리사업소 김 혁/659-5111
정 책 명	제56회 전남체전 대비 도로정비
사업개요	○ 추진배경 - 2017년 4월에 개최되는 『제56회 전라남도 체육대회』의 완벽한 준비를 위해 3월말까지 도로정비를 완료하여 성공적인 개최에 이바지하고자 함. ○ 추진기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 3. ○ 총사업비 : 2,000백만원 ○ 주요내용 - 위 치 : 여수시 일원 - 사 업 량 : 도로 재포장 L= 8.4㎞ - 사업방식 : 시내구간 - 절삭 후 덧씌우기, 외곽구간 - 덧씌우기
추진경과 및 사업 관련자	□ 주요 추진경과 및 사업관련자 현황 ○ 17. 1. 2. : "제56회 전라남도 체육대회 대비 도로 정비공사" 계약심사 요청 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 강성욱, 팀장 강균, 과장 장익 ○ 17. 1. 9. : 2017년도 도로정비사업(재포장) 시행 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 강성욱, 팀장 강균, 과장 장익 국장 조일수, 부시장 최종선, 시장 주철현 ○ 17. 1. 9. : "제56회 전라남도 체육대회 대비 시청로, 여수산단로, 흥국로, 여문2로 등 4개소, 가곡길 등 3개소, 좌수영로, 대통로 재포장공사” 계약 의뢰 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 강성욱, 팀장 강균, 과장 장익 ○ 17. 2. 1. : "제56회 전라남도 체육대회 대비 대통로, 좌수영로, 여문2로 등 4개소, 가곡길 등 3개소 재포장공사” 착공 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 강성욱, 팀장 강균, 과장 장익 ○ 17. 2. 6. : "제56회 전라남도 체육대회 대비 시청로, 여수산단로, 흥국로 재포장공사” 착공 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 강성욱, 팀장 강균, 과장 장익 ○ 17. 3.22. : "제56회 전라남도 체육대회 대비 도로정비공사” 준공 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 강성욱, 팀장 강균, 과장 장익