정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-37	담당부서 작성자	건설교통국/도로관리사업소 김 혁/659-5111
정 책 명	둔덕주민센터∼둔덕삼거리 보도개설
사업개요	○ 추진배경 - 둔덕주민센터∼둔덕삼거리 간 보도가 설치되어 있지 않아 둔덕삼거리 용수마을 및 라온유․중앙하이츠․한려아파트 주민 이동 시 갓길 이용으로 사고 위험에 노출되어 있어 교통사고 발생 예방을 위한 보도 개설 ○ 추진기간 : 2015. 3. ∼ 2017. 4. ○ 총사업비 : 1,900백만원(공사비 1,530, 보상비 300, 기타 70) ○ 주요내용 - 위 치 : 여수시 둔덕동 주민자치센터 앞 ～ 둔덕삼거리 구간 - 사 업 량 : 보도개설 L=1.43㎞, B=3.95m
추진경과 및 사업 관련자	□ 주요 추진경과 및 사업관련자 현황 ○ 15. 3. 4. : 둔덕11호광장～둔덕삼거리 보도설치 검토 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 서병국, 팀장 명호남, 과장 문태선 국장 전동호, 부시장 이승옥, 시장 주철현 ○ 15. 3.27. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 실시설계 용역 시행 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 서병국, 팀장 명호남, 과장 문태선 ○ 15. 3.27. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 실시설계 용역 계약의뢰 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 서병국, 팀장 명호남, 과장 문태선 ○ 15. 4.16. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 서병국, 팀장 명호남, 과장 문태선 ○ 15.12.27. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 김한수, 팀장 명호남, 과장 문태선 ○ 16. 1.28. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 집행계획 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 박동훈, 팀장 명호남, 과장 문태선 국장 전동호, 부시장 이승옥, 시장 주철현 ○ 16. 1.29. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 계약의뢰 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 박동훈, 팀장 명호남, 과장 문태선 ○ 16. 3. 9. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 착공 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 김한수, 팀장 명호남, 과장 문태선 ○ 17. 4.28. : 둔덕주민센터～둔덕삼거리 보도개설공사 준공 - 관련자 : 도로관리사업소 주무관 김혁, 팀장 강균, 과장 장익