정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화양지구 농어촌 상수도 확충사업
② 추진배경	○ 농어촌 및 도서지역 미급수 지역에 양질의 수돗물 공급으로 도․농지역 균형개발 촉진 ○ 수원고갈 및 식수난을 겪고 있는 농어촌․도서지역에 안정적인 용수공급
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 화양면 일원 ○ 사 업 량 : 관로 L=53.01㎞(배수 17.54㎞, 급수 35.47㎞) ○ 급수구역 : 24개 마을, 2,256세대(4,328명) ○ 총사업비 : 7,500백만 원 (국비 4,350 도비 1,459 시비 1,691) ○ 사업기간 : 2017. 6. ~ 2020. 8.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설7급 최성주 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘17. 6. ~‘20. 8.
<그간 주요 추진내용>
○ 계약심사 의뢰(전라남도) ※ 상수도과-3166		‘17. 2.13.		하헌옥 과장 서범규 팀장 김강혁 주무관
○ 수도사업인가 신청 ※ 상수도과-5215		‘17. 3.10.		하헌옥 과장 서범규 팀장 김강혁 주무관
○ 총괄 및 1차분 시행 ※ 상수도과-8825		‘17. 4.25.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 단장 하헌옥 과장 서범규 팀장 김강혁 주무관
○ 총괄 및 1차분 계약체결 ※ 수도행정과-5337		‘17. 6.12.		하헌옥 과장 서범규 팀장 김강혁 주무관
○ 1차분 준공 ※ 상수도과-28097		‘17.12.22.		하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관

○ 2차분 시행계획보고 ※ 상수도과-841	‘18. 1.11.	주철현 시장 최종선 부시장 최인규 단장 하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관
○ 2차분 계약의뢰 ※ 상수도과-852	‘18. 1.12.	하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관
○ 2차분 계약체결 ※ 수도행정과-581	‘18. 1.22.	하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관
○ 2차분 준공 ※ 수도행정과-9716	‘18.12.21.	하헌옥 과장 김승주 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 시행계획보고 ※ 상수도과-636	‘19. 1.11.	권오봉 시장 고재영 부시장 정종태 단장 강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 계약의뢰 ※ 상수도과-1188	‘19. 1.21.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 계약체결 ※ 수도행정과-858	‘19. 2. 1.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 착공 ※ 상수도과-2223	‘19. 2. 7.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 폐기물처리용역 계약체결 ※ 수도행정과-1002	‘19. 2. 11.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 폐기물처리용역 착수 ※ 상수도과-2798	‘19. 2. 13.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 폐기물처리용역 선급금 지급 ※ 수도행정과-1657	‘19. 3. 5.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관

○ 3차분 공사 선급금 지급 ※ 수도행정과-2125	‘19. 3. 20.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 공사 1회 기성금 지급 ※ 수도행정과-5154	‘19. 6. 27.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 변경계약 체결(공사, 폐기물 처리용역) ※ 수도행정과-9988	‘19.12.13.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3차분 준공 ※ 수도행정과-10411	‘19.12.26.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 4차분 집행계획 보고 ※ 상수도과-2262	‘20. 2. 4.	권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관
○ 4차분 계약의뢰(공사,폐기물 처리용역) ※ 상수도과-2316	‘20. 2. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관
○ 4차분 공사 및 폐기물처리용역 계약체결 ※ 수도행정과-1240	‘20. 2.10.	강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관
○ 4차분 착공 ※ 상수도과-3054	‘20. 2.14.	강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관
○ 4차분 폐기물처리용역 착공 ※ 상수도과-3055	‘20. 2.14.	강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관
○ 4차분 공사 선급금 지급 ※ 수도행정과-2781	‘20. 3.18.	강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관
○ 4차분 폐기물처리용역 선급금 지급 ※ 수도행정과-3328	‘20. 3.31.	강 균 과장 명호남 팀장 최성주 주무관