정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화정면 도서지역 상수도 확충사업
② 추진배경	○ 도서민의 열악한 급수문제 해결을 위하여 지방상수도 확충 사업 추진 필요 ○ 국도77호선 연륙․연도교 건설과 병행한 사업추진으로 예산 절감 및 적기 수돗물 공급
③ 사업개요	○ 사 업 명 : 화정면 도서지역 지방상수도 확충사업 ○ 사 업 량 : L=25.081km (교량 2.954 본선도로 9.727 마을 12.4) ○ 사 업 비 : 9,355백만 원 (국비 5,380 도비 463 지방비 3,512) ○ 급수구역 : 4개 도서 306세대 491명 (급수량 : Q=207㎥/일) ○ 사업기간 : 2016. 12. ~ 2020. 6.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설6급 최상록 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘16. 12. ~‘20. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 용역추진계획 검토 ※ 상수도과-14396		‘16. 7.26.		주철현 시장 이승옥 부시장 송병구 단장 김기채 과장 김정남 팀장 이재태 주무관
○ 도로점용 의뢰(익산국토관리청) ※ 상수도과-15895		‘17. 7.20.		하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관
○ 일상감사, 계약심사 의뢰 ※ 상수도과-4927		‘18. 3. 9.		하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관
○ 4공구 공사착공 ※ 상수도과-11585		‘18. 6.25.		정종태 단장 하헌옥 과장 명주완 팀장 유재영 주무관
○ 3공구 공사착공 ※ 상수도과-5993		‘18. 8.10.		정종태 단장 하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장

○ 3공구 사업기간 연장 요청 ※ 상수도과-22972	‘18.12.28.	하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장
○ 4공구 사업기간 연장 요청 ※ 상수도과-23079	‘18.12.31.	하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장
○ 3공구 2차분 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-1646	‘19. 1.28.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 3공구 2차분 계약체결 ※ 수도행정과-3234	‘19. 4.23.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 2공구 계약심사 의뢰 ※ 상수도과-9328	‘19. 5.20.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 2공구 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-9710	‘19. 5.27.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 3공구 일시정지 ※ 상수도과-10121	‘19. 6. 2.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 2공구 계약체결 ※ 수도행정과-4640	‘19. 6.13.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 4공구 준공 ※ 수도행정과-5384	‘19. 7. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 팀장
○ 3공구 일시정지 해지 및 변경 계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-16696	‘19. 9. 6.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3공구 2차분 변경계약 체결 ※ 수도행정과-8220	‘19.10.18.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관

○ 3공구 2차분 준공 ※ 수도행정과-8363	‘19.10.23.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3공구 일시정지 해지 및 변경 계약 체결 ※ 수도행정과-9558	‘19.12. 3.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 3공구 1차분 준공 ※ 수도행정과-10195	‘19.12.19.	강 균 과장 명호남 팀장 조진우 주무관
○ 둔병도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 계약체결 ※ 수도행정과-9716	‘19.12. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 적금도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 계약체결 ※ 수도행정과-9798	‘19.12. 9.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 조발도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 계약체결 ※ 수도행정과-9959	‘19.12.12.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 낭도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 계약체결 ※ 수도행정과-10533	‘19.12.20.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 둔병도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 착공	‘19.12.10.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 적금도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 착공	‘19.12.13.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 조발도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 착공	‘19.12.18.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 낭도 급수관 설치 공사 및 폐기물처리 착공	‘19.12.23.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 2공구 공사 및 폐기물처리 용역 변경 계약체결 ※ 수도행정과-2069	‘20. 3. 2.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 2공구 준공 ※ 수도행정과-4857	‘20. 3. 6.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장