정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	돌산읍 군내마을 하수도 시설공사(완료)
② 추진배경	농어촌지역에서 발생된 생활하수를 적정 처리하여 남해안의 적조 발생예방 및 청정해역 보존 및 주민 생활환경개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 돌산읍 군내마을 일원 ○ 사 업 비 : 5,925백만 원 ○ 사업내용 : 처리장 Q=240㎥/일, 관로정비 L=4.9km, 배수설비 370가구
④ 사업부서	여수시 하수도과		⑤ 담당자		시설7급 김동언 시설5급 최홍식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘16. 6. ~‘19. 8.
<그간 주요 추진내용>
○ 추진 방침 ※ 하수도과-10375호		‘17. 5.31.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 국장 김기채 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 전기 및 계측제어 시행 ※ 하수도과-138호		‘18. 1. 3.		주철현 시장 최종선 부시장 최인규 국장 송신현 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 문화재 발굴 검토보고 ※ 하수도과-4706호		‘18. 3.13.		정종태 국장 박성재 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 준설공사 시행 ※ 하수도과-9182호		‘18. 5.17.		박성재 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 제1회 기성검사 ※ 하수도과-11994호		‘18. 6.27.		박성재 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정 신청사항 승인(1회) ※ 하수도과-18797호		‘18.10.17.		심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관

○ 실정보고 승인(노선변경에 따른 물량 증가) ※ 하수도과-22468호	‘18.12.18.	심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정신청사항 승인(2회) ※ 하수도과-22404호	‘18.12.18.	심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 설계변경 검토(노선변경, 물가변동) ※ 하수도과-1291호	‘19. 1.22.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 실정보고 검토(시운전) ※ 하수도과-2060호	‘19. 2. 7.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 실정보고 승인 통보 ※ 하수도과-2105호	‘19. 2. 7.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 하수도 시설공사(전기) 현장 요약 보고 ※ 하수도과-5570호	‘19. 3.26.	고재영 부시장 김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 하수도 시설공사(전기) 실정보고 승인 통보 ※ 하수도과-5957호	‘19. 4. 1.	심근하 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 공기연장 실정보고에 따른 요약보고 ※ 하수도과-7949호	‘19. 4.11.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 실정보고에 따른 요약보고 ※ 하수도과-7918호	‘19. 4.27.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 실정보고 승인 통보 ※ 하수도과-8126호	‘19. 5. 1.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 설계변경(2차) 계약체결 의뢰 ※ 하수도과-11055호	‘19. 6.13.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 변경 계약 사항 알림 ※ 하수도과-11165호	‘19. 6.14.	심근하 과장 김용만 팀장 홍경안 주무관
○ 준공	‘19. 8.29.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관