정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	화양면 소장마을 하수도 시설공사
② 추진배경	농어촌지역에서 발생된 생활하수를 적정 처리하여 남해안의 적조발생 예방 및 청정해역 보존
③ 사업개요	○ 사업목적 : 농어촌거주 주민들의 생활환경 개선 ○ 위 치 : 화양면 소장마을 ○ 사 업 비 : 11,024백만 원(국비 6,941, 도비 306, 시비 3,777) ○ 사업내용 : 하수처리장 Q=150㎥/일, 관로 10.3㎞
④ 사업부서	여수시 하수도과		⑤ 담당자		시설8급 박지윤 시설5급 윤대근
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 1. ~‘24. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 추진 방침 ※ 하수도과-1381호		‘17. 1.18.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 국장 김기채 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약 의뢰 ※ 하수도과-5494호		‘17. 3.21.		김기채 과장 윤대근 팀장 박 성 주무관
○ 하수도정비 기본계획 부분변경 승인 요청 ※ 하수도과-5494호		‘18. 3.21.		박성재 과장 윤대근 팀장 고영란 주무관
○ 기술자문요청 ※ 하수도과-22503호		‘18.12.19.		심근하 과장 윤대근 팀장 강성욱 주무관
○ 재원협의 및 설계자문요청 ※ 하수도과-1017호		‘19.1.17.		심근하 과장 정일석 팀장 강성욱 주무관

○ 공법선정에 따른 의견 조회 ※ 하수도과-4565호	‘19.3.14.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 공법자재 설계단가 적용에 따른 의견 조회 ※ 하수도과-4990호	‘19.3.20.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 기술자문위원회 자문결과 보완사항 제출 ※ 하수도과-7207호	‘19.4.18.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 재원의 조달 및 사용에 관한 협의 보완자료 제출 ※ 하수도과-8365호	‘19.5.5.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 공유재산 등 허가신청서 제출 ※ 하수도과-10709호	‘19.6.9.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 설계변경 검토보고 ※ 하수도과-11259호	‘19.6.17.	김정남 단장 심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 일상감사 의뢰 ※ 하수도과-11483호	‘19.6.19.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 재원의 조달 및 사용에 관한 협의 자료 제출 ※ 하수도과-11580호	‘19.6.19.	심근하 과장 정일석 팀장 김대성 주무관
○ 농업생산기반시설 사용 허가계약 및 사용료 납부 ※ 하수도과-13303호	‘19.7.16.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 농업생산기반시설 사용 허가계약서 송부 ※ 하수도과-13545호	‘19.7.16.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설치인가에 따른 협의(촉구) ※ 하수도과-13892호	‘19.7.22.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 농지보전부담금 납부 ※ 하수도과-13946호	‘19.7.22.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 도로점용(굴착) 허가 신청 ※ 하수도과-14043호	‘19.7.24.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설치인가에 따른 협의(촉구) ※ 하수도과-15065호	‘19.8.7.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 시행 ※ 하수도과-15087호	‘19.8.8.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-15133호	‘19.8.8.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계안전성 검토 용역 계약체결 ※ 하수도과-15576호	‘19.8.14.	최홍식 과장 정일석 팀장(협조) 김동언 주무관(협조) 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 전기공사 계약심사 요청 ※ 하수도과-16370호	‘19.8.27.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시설공사 외 1건 계약심사 요청 ※ 하수도과-16802호	‘19.9.2.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 계약심사 보완자료 제출 ※ 하수도과-17102호	‘19.9.5.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계안전성검토보고서 검토 의뢰 ※ 하수도과-17451호	‘19.9.9.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 전기공사 계약심사 보완자료 제출 ※ 하수도과-17487호	‘19.9.9.	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계안전성 검토보고서 검토비용 납부 ※ 하수도과-17915호	‘19.9.18.	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설치인가(공유재산, 하천) 협의 촉구 ※ 하수도과-20454호	‘19.10.22	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 설계안전성 검토보고서 제출 ※ 하수도과-21079호	‘19.10.29	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 시행 ※ 하수도과-22082호	‘19.11.11	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 계약심의위원회 심의 요청 ※ 하수도과-23457호	‘19.11.27	최홍식 과장 정일석 팀장 조윤희 주무관(협조) 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가 시행 ※ 하수도과-23523호	‘19.11.27	최홍식 과장 김용만 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-23595호	‘19.11.28	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가 용역 계약체결 ※ 하수도과-23675호	‘19.11.29	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 시설공사 및 폐기물처리용역 총괄 및 1차분 계약의뢰 ※ 하수도과-24647호	‘19.12.11	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가 재대행 계약 승인 검토 ※ 하수도과-25211호	‘19.12.19	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 재대행 계약 검토 결과 회신 ※ 하수도과-25233호	‘19.12.19	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시설공사(총괄 및 1차분) 계약체결 ※ 하수도과-25798호	‘19.12.26	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 폐기물처리용역(총괄 및 1차분) 계약체결 ※ 하수도과-25908호	‘19.12.27	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관

○ 건설기술자 배치 변경 검토 ※ 하수도과-1229호	‘20.01.20	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재 심의 요구서 제출 ※ 하수도과-1396호	‘20.01.22	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재 배정요청 ※ 하수도과-2668호	‘20.02.12	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 검측업무지침서 승인 알림 ※ 하수도과-2757호	‘20.02.13	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계도서 검토에 대한 의견 회신 요청 ※ 하수도과-2756호	‘20.02.13	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의 요청 ※ 하수도과-3095호	‘20.02.18	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 품질시험계획서(1차분) 승인 알림 ※ 하수도과-3354호	‘20.02.21	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재 추가 구입 계획 ※ 하수도과-4095호	‘20.02.29	최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재 추가 구입 요청 ※ 하수도과-4206호	‘20.03.03	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 총괄 및 1차분 하도급 계약 검토 ※ 하수도과-4961호	‘20.03.12	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 총괄 및 1차분 하도급 계약 검토 결과 제출 ※ 하수도과-4982호	‘20.03.12	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재(조립식PC맨홀) 검사기관 변경 요청 ※ 하수도과-5330호	‘20.03.17	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 관급자재 추가 구입 요청(2차) ※ 하수도과-5422호	‘20.03.18	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 편입토지 대부 신청 ※ 하수도과-5893호	‘20.03.25	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 하도급관리계획서(변경) 검토 ※ 하수도과-5994호	‘20.03.26	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 현장대리인 변경 검토 ※ 하수도과-7420호	‘20.04.16	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 안전관리계획서 검토 의뢰 ※ 하수도과-7757호	‘20.04.21	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 안전관리계획서 검토 결과 통보 ※ 하수도과-8383호	‘20.04.29	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 설계도서 검토 결과 통보 ※ 하수도과-8382호	‘20.04.29	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시공검사 용역 등 2건 일상감사 요청 ※ 하수도과-8928호	‘20.05.08	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시공검사 용역 등 2건 계약심사 의뢰 ※ 하수도과-9257호	‘20.05.14	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 시공검사 용역 시행 ※ 하수도과-9330호	‘20.05.15	서은수 부시장 정윤수 단장 최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 김동언 주무관
○ GIS DB 구축 용역 시행 ※ 하수도과-9331호	‘20.05.15	서은수 부시장 정윤수 단장 최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 김동언 주무관
○ 법정보호종 조사용역 시행 ※ 하수도과-9511호	‘20.05.18	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 해양물리확산모델링용역 계약심사 의뢰 ※ 하수도과-9524호	‘20.05.18	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 법정보호종 조사용역 계약 의뢰 ※ 하수도과-9588호	‘20.05.19	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 해양물리확산모델링 용역 시행 ※ 하수도과-9645호	‘20.05.19	정윤수 단장 최홍식 과장 김동석 과장 정일석 팀장 김희경 팀장 김동언 주무관
○ 시공검사 용역 및 GIS DB 구축 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-9685호	‘20.05.20	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 해양물리확산모델링 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-9862호	‘20.05.22	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 안전관리계획서 검토 보완에 따른 재검토 요청 ※ 하수도과-10166호	‘20.05.27	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 하도급 현장대리인 변경 검토 ※ 하수도과-10334호	‘20.05.28	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 안전관리계획서(보완) 검토 결과 통보 ※ 하수도과-10961호	‘20.06.05	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 현장 실정보고 및 설계변경 (1회) 검토 ※ 하수도과-11790호	‘20.06.16	서은수 부시장 정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(총괄 및 1차분) 및 폐기물처리용역(총괄 및 1차분) 변경계약 요청 ※ 하수도과-11892호	‘20.06.19	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 공공측량작업계획서 검토 요청 ※ 하수도과-12375호	‘20.06.25	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 하도급관리계획서(변경) 검토 ※ 하수도과-14820호 ○ 하도급 계약 변경 검토 ※ 하수도과-14821호	‘20.07.27	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 우천으로 인한 공사기간 연장 검토 ※ 하수도과-16642호	‘20.08.20	정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 총괄 및 1차분 변경계약(기간연장) 요청 ※ 하수도과-16654호	‘20.08.21	지홍섭 팀장(대결) 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 현장 실정보고 검토 ※ 하수도과-18075호	‘20.09.09	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 실정보고 승인사항 알림 ※ 하수도과-18379호	‘20.09.14	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 1차분 변경계약 요청 ※ 하수도과-18831호	‘20.09.18	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 폐기물 처리용역 1차분 변경계약 요청 ※ 하수도과-18888호	‘20.09.21	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가서 보완 제출 ※ 하수도과-19056호	‘20.09.22	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소규모 환경영향평가 협의내용 반영결과 제출 ※ 하수도과-22012호	‘20.11.09	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 설치인가 신청 ※ 하수도과-23383호	‘20.11.26	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 공용건축물 협의 요청 ※ 하수도과-23803호	‘20.12.02	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 법정보호종(기수갈고둥) 모니터링 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-23911호	‘20.12.03	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분) 시행 ※ 하수도과-24384호	‘20.12.07	권오봉 시장 서은수 부시장 정윤수 단장 김동석 과장(협조) 최홍식 과장 김희경 팀장(협조) 정일석 팀장 김동언 주무관

○ 2차분 관급자재 심의 요구서 제출 ※ 하수도과-24223호	‘20.12.08	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 2차분 계약의뢰 ※ 하수도과-24393호	‘20.12.10	최홍식 과장 정일석 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 설계변경 용역 시행 검토 ※ 하수도과-584호	‘21.01.11	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(3차분) 등 시행 ※ 하수도과-566호	‘21.01.11	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 이돈주 과장(협조) 이영호 과장 송향자 팀장(협조) 장명이 팀장(협조) 조정선 팀장 윤선태 차장(협조) 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 설계변경 용역 계약의뢰 ※ 하수도과-630호	‘21.01.12	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(3차분) 및 폐기물처리용역(2차분) 계약의뢰 ※ 하수도과-884호	‘21.01.15	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(3차분) 관급자재 심의 요구서 제출 ※ 하수도과-910호	‘21.01.15	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설 전기공사 계약의뢰 ※ 하수도과-1005호	‘21.01.15	이영호 과장 조정선 팀장 윤선태 차장(협조) 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분) 현장대리인 변경 검토 ※ 하수도과-1770호	‘21.01.27	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분) 현장대리인 변경 검토결과 통보 ※ 하수도과-1835호	‘21.01.28	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관

○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분) 품질시험계획 승인 알림 ※ 하수도과-2373호	‘21.02.04	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설 전기공사 관급 계약의뢰 ※ 하수도과-2518호	‘21.02.05	이영호 과장 조정선 팀장 윤선태 차장
○ 소장마을 하수도 시설공사(3차분) 관급자재 납품기한 변경 요청 ※ 하수도과-2574호	‘21.02.05	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수처리장 예정부지 매입 검토 ※ 하수도과-4425호	‘21.03.04	김지선 단장 이돈주 과장(협조) 송향자 팀장(협조) 지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 김효근 차장(협조) 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분, 3차분) 관급자재 변경 계약 검토 ※ 하수도과-5565호	‘21.03.18	지홍섭 팀장(전대결) 이돈주 과장(협조) 송향자 팀장(협조) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분, 3차분) 관급자재 변경 계약 요청 ※ 하수도과-5571호	‘21.03.19	지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분, 3차분) 현장대리인 변경 검토 ※ 하수도과-5690호	‘21.03.22	지홍섭 팀장(전대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(2차분, 3차분) 현장대리인 변경 검토결과 통보 ※ 하수도과-6670호	‘21.04.02	지홍섭 팀장(대결) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 총괄 및 3차분 설계변경 ※ 하수도과-9389호	‘21.5.4	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 이돈주 과장(협조) 이영호 과장 송향자 팀장(협조) 조정선 팀장 윤선태 차장(협조) 김동언 주무관

○ 3차분 관급자재(아스콘) 변경계약 검토 ※ 하수도과-9962호	‘21.5.14	이영호 과장 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 실정보고에 따른 설계변경 ※ 하수도과-11431호	‘21.6.4	김지선 단장 이돈주 과장(협조) 이영호 과장 송향자 팀장(협조) 조정선 팀장 김동언 주무관
○ 물가변동 검토 용역 시행 ※ 하수도과-14334호	‘21.7.13	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 하도급 현장대리인 변경 검토보고 ※ 하수도과-15414호	‘21.7.27	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토 ※ 하수도과-16764호	‘21.8.12	박현식 부시장 김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(총괄 및 3차분) 실정보고 검토 ※ 하수도과-17563호	‘21.8.20	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 하도급관리계획서(변경) 검토 ※ 하수도과-18970호	‘21.9.13	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 관급자재 구매 검토 ※ 하수도과-20059호	‘21.9.30	박현식 부시장 김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 실정보고에 따른 검토보고 ※ 하수도과-23924호	‘21.9.30	김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 및 폐기물처리용역 변경 시행 ※ 하수도과-24661호	‘21.12.01	김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 전기공사 연장 검토보고 ※ 하수도과-26125호	‘21.12.17	김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 (4차분) 시행 ※ 하수도과-1122호	‘22.1.13	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 폐기물처리용역(3차분) 시행 ※ 하수도과-5354호	‘22.3.15	박현식 부시장 김지선 단장, 이돈주 과장, 송향자 팀장(협조) 이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 하도급 적정성 검토보고 ※ 하수도과-6552호	‘22.3.30	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 GISDB구축, 시공검사용역 공기연장 검토보고 ※ 하수도과-9333호	‘22.4.29	이영호 과장 이재태 팀장 김평준 차장, 김옥주 팀장(협조) 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(4차분) 실정보고 검토보고 ※ 하수도과-12391호	‘22.6.15	이영호 과장 김낙진 팀장, 송향자 팀장(협조) 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사(4차분) 관급자재(오수받이) 납품기한 연장요청 ※ 하수도과-13944호	‘22.7.5	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 전기시설부담급 지급 ※ 하수도과-15211호	‘22.7.21	이영호 과장 이재태 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 물가변동용역 시행 ※ 하수도과-17716호	‘22.7.21	이영호 과장 조계윤 과장, 장내근 팀장 (협조) 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 (2,3,4회)물가변동용역 시행 ※ 하수도과-17733호	‘22.8.26	이영호 과장 조계윤 과장, 장내근 팀장 (협조) 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 물가변동에 따른 계약금액 조정 검토보고 ※ 하수도과-22226호	‘22.11.1	정기명 시장 박현식 부시장 한광민 단장 조계윤 과장, 장내근 팀장 (협조) 이영호 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 및 전기공사 현장 실정보고 검토보고 ※ 하수도과-25251호	‘22.12.13	한광민 단장 김낙진 팀장, 김옥주 팀장 (협조) 이영호 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 간이해역이용협의 용역 시행 ※ 하수도과-25306호	‘22.12.14	이영호 과장 김낙진 팀장, 장내근 팀장 (협조) 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 전기공사 관급자재 납품기간 연장 검토보고 ※ 하수도과-26217호	‘22.12.23	한광민 단장 김낙진 팀장, 장내근 팀장 (협조) 이영호 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 폐기물처리용역 과업기간 연장 검토보고 ※ 하수도과-258호	‘23. 1. 4	한광민 단장 김낙진 팀장, 장내근 팀장 (협조) 이영호 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 현장대리인 변경 검토보고 ※ 하수도과-1243호	‘23. 1.18	주영근 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 전기공사 설계변경 및 공기 연장 검토보고 ※ 하수도과-1641호	‘23. 1.26	김태횡 단장 명미숙팀장, 최재영 과장 (협조) 주영근 과장 조균익 팀장 이영훈 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 현장실정보고 검토보고 ※ 하수도과-3894호	‘23. 2.21	김태횡 단장 명미숙팀장, 최재영 과장 (협조) 주영근 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 공사기간 연장 검토보고 ※ 하수도과-4485호	‘23. 3. 7	최재영 과장 명미숙 팀장 (협조) 주영근 과장 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 현장 실정보고 검토보고 ※ 하수도과-5321호	‘23. 3.16	주원평 팀장 명미숙 팀장, 최재영 과장 (협조) 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 전기공사 실정보고 검토보고 ※ 하수도과-10444호	‘23. 5.23	주영근 과장 명미숙팀장, 최재영 과장 (협조) 조균익 팀장 이영훈 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 일시정지 검토보고 ※ 하수도과-12216호, 12309호(정지)	‘23. 6.16	김태횡 단장 주영근 과장 명미숙팀장, 최재영 과장 (협조) 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 폐기물처리용역 변경시행 ※ 하수도과-12217호, 12362호(계약) ※ 수도행정-7726호(준공)	‘23. 6.15	김태횡 단장 주영근 과장 명미숙팀장, 최재영 과장 (협조) 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 시공검사용역 일시정지 검토 ※ 하수도과-12565호, 12304호(정지)	‘23. 6.20	주영근 과장 명미숙팀장, 최재영 과장 (협조) 주원평 팀장 문홍주 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 전기공사 준공 보고 ※ 하수도과-13640호	‘23. 7. 4	주영근 과장 조균익 팀장 문홍주 주무관 (협조) 이영훈 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 최종 설계변경 검토보고 ※ 하수도과-17940, 19193호(관급변경)	‘23. 8.31	김종기 부시장 오정환 단장 배도선 과장 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 유량조정조 증설지시 검토보고 ※ 하수도과-3781호	‘24. 2.19	오정환 단장 배도선 과장 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 예산 조정사용 검토보고 ※ 하수도과-4364호	‘24. 2.26	오정환 단장 최재영 과장, 이미영 팀장 (협조) 배도선 과장 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 설계변경 검토보고(총괄4회, 4차분 1회) ※ 하수도과-4704호	‘24. 2.29	정기명 시장 김종기 부시장 오정환 단장 최재영 과장, 이미영 팀장 (협조) 배도선 과장 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 하수 운반처리 검토보고 ※ 하수도과-5598호	‘24. 3.12	배도선 과장 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 공공하수처리시설 분리막 세정 용역 시행 ※ 하수도과-9460호	‘24. 5. 2	배도선 과장 최재영 과장, 이미영 팀장 (협조) 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 실정보고 승인 검토 ※ 하수도과-9838호	‘24. 5. 8	배도선 과장 최재영 과장, 이미영 팀장 (협조) 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 설게변경 검토보고 ※ 하수도과-11625호	‘24. 5. 8	배도선 과장 최재영 과장, 이미영 팀장 (협조) 주원평 팀장 문태영 주무관
○ 소장마을 하수도 시설공사 이관시설물 운영계획 검토보고 ※ 하수도과-13294호	‘24. 6.25	최재영 과장 배도선 과장 주원평 팀장 문태영 주무관