정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	하수종말처리장 악취방지시설 설치공사 (완료)
② 추진배경	하수종말처리장 주변에 아파트 및 주택이 인접하여 악취로 인한 민원이 지속적으로 발생하여 분뇨동등 4개동에 악취 저감시설 설치
③ 사업개요	○ 사업목적 : 하수종말처리장 주변 생활환경 개선 ○ 위 치 : 신월로 284-1, 하수종말처리장 ○ 사 업 비 : 5,000백만 원(국비 2,500 시도비 2,500) ○ 사업내용 : 분뇨동 등 4개동 악취 저감시설 1식
④ 사업부서	여수시 하수도과		⑤ 담당자		전기7급 윤선태 시설5급 최홍식
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘17. 1. ~‘19.12.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계용역 추진 방침 ※ 하수도과-2308호		‘17. 2. 3.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 국장 김기채 과장 윤대근 팀장 신희정 팀장
○ 기본 및 실시설계용역 계약 의뢰 ※ 하수도과-6212호		‘17. 3.30.		김기채 과장 윤대근 팀장 신희정 팀장
○ 재원협의 및 설계자문 요청 ※ 하수도과-4836호		‘18. 3.15.		박성재 과장 윤대근 팀장 신희정 팀장
○ 악취방지시설 설치공사 시행 ※ 하수도과-19132호		‘18.10.23.		권오봉 시장 고재영 부시장 정종태 국장 심근하 과장 윤대근 팀장 신희정 팀장
○ 악취방지시설 설치공사 계약 의뢰 ※ 하수도과-19817호		‘18.11. 2.		심근하 과장 윤대근 팀장 신희정 팀장

○ 악취방지시설 설치공사 계약 체결 및 착공 ※ 하수도과-21729호	‘18.12. 6.	정종태 국장 심근하 과장 박태열 팀장 우희원 주무관
○ 공사(전기설치) 선금 지급 ※ 하수도과-4228호	‘19. 3.11.	심근하 과장 김용만 팀장 정일석 팀장 홍경안 차장 윤선태 주무관
○ 탈취기 기자재제작 승인 ※ 하수도과-7757호	‘19. 4.25.	심근하 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 기성부분검사	‘19. 5.22.	심근하 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 소방 공사 계약체결 및 착공 ※ 하수도과-10733호	‘19. 6.10.	심근하 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 설계 변경(공사기간 연장) ※ 하수도과-13834호	‘19. 7.22.	김정남 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 설계 변경(전기공사) ※ 하수도과-13951호	‘19. 7.23.	김정남 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 설계 변경 계약심사 요청 ※ 하수도과-17295호	‘19. 7.23.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 장외영향평가 (유해화학물질 취급시설 결과서교부) ※ 하수도과-17435호	‘19. 9. 9.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 설계 변경(공사기간 연장 ) 검토 ※ 하수도과-19251호	‘19.10. 8.	김정남 단장 최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 변경계약 사항 알림 ※ 하수도과-19445호	‘19.10. 8.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관

○ 탈취기 변경계약 사항 알림 ※ 하수도과-19734호	‘19.10.11.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 직접시공 및 하도급 변경 검토 ※ 하수도과-20330호	‘19.10.17.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 하도급 연장(변경) 검토 보고 ※ 하수도과-20576호	‘19.10.23.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관
○ 교반기 및 프로세스제어반 변경계약 사항 알림 ※ 하수도과-20620호 ※ 하수도과-20621호	‘19.10.23.	최홍식 과장 김용만 팀장 조윤희 주무관
○ 악취방지시설 설치공사 준공 ※ 하수도과-20988호	‘19.10.28.	최홍식 과장 정일석 팀장 윤선태 주무관