정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	전라좌수영 동헌일원 복원사업
② 추진배경	○ 전라좌수영 겸 삼도수군통제영은 조선수군의 본거지이자 417년간 조선을 지켜온 국방유적지로 ○ 역대 전라좌수사가 정무를 집행하던 동헌과 그 일대의 체계적인 복원을 통해 문화유산에 대한 역사적 가치를 부각하여 문화관광자원으로 활용
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 동산동, 군자동, 관문동 일원(진남관 주변) ○ 사업기간 : 2015년 ~ 2026년 ○ 총사업비 : 250억원 ○ 사업내용 : 12,981㎡, 동헌 내 8동(운주헌, 결승당 등) 복원 및 역사공원 조성
④ 사업부서	여수시 문화유산과		⑤ 담당자	행정5급 김춘수 행정6급 엄태오 학예연구사 노혜진 시설8급 강병준 행정9급 박소현
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	2015. ~ 2026.
<그간 주요 추진내용>
○ 방침 결정(계획 수립) ※ 문화예술과-1504호(’15.01.21.)		’15. 01. 21.	주철현 시장 이승옥 부시장 이노철 국장 김재일 과장 장지문 팀장 김장식 주무관
○ 기본계획 수립용역 ※ 회계과-35490호(’15.08.18.)		’15. 08. 18.	김병완 과장 김준택 팀장 서혜은 주무관
○ 시굴조사 완료 ※ 문화예술과-25052호(’17.12.06)		’17. 12. 06.	하봉영 과장 김기흥 팀장 서혜은 주무관
○ 발굴조사 완료 ※ 회계과-21072호(’18.4.30.)		’18. 04. 30.	하봉영 과장 김기흥 팀장 서혜은 주무관
○ 토지 3필지 매입 ※ 문화예술과-8305(’18.4.30.)		’18. 04. 30.	하봉영 과장 김기흥 팀장 장명순 주무관
○ 폐기물 철거공사, 처리용역 계약 의뢰 ※ 문화예술과-20052(’18.10.17)		’18. 10. 17.	하봉영 과장 김기흥 팀장 강한빛 주무관
○ 시굴조사(3단계) 완료 ※ 회계과-10829(’19.03.13)		’19. 03. 13.	하봉영 과장 김기흥 팀장 서혜은 주무관
○ 정밀발굴조사(3단계) 착수 ※ 회계과-26080(’19.05.29)		’19. 05. 29.	하봉영 과장 김기흥 팀장 서혜은 주무관
○ 편입토지 등(추가분) 매입 ※ 문화예술과-13199(’19.6.24.)		’19. 06. 24.	하봉영 과장 김기흥 팀장 조찬일 주무관
○ 정밀발굴조사(3단계) 완료 ※회계과-42512(’19.08.22.)		’19. 08. 22.	김지선 과장 윤영희 팀장 서혜은 주무관
○ 편입토지 등(추가분) 감정평가 의뢰 ※ 문화예술과-21542(’19.10.11.)		’19. 10. 11.	김지선 과장 윤영희 팀장 조찬일 주무관
○ 건축물 철거공사 착공 ※ 회계과-58528(’19.11.18.)		’19. 11. 18.	김지선 과장 윤영희 팀장 강한빛 주무관
○ 건축물 철거공사 완료 ※ 회계과-6904호(’20.02.10.)		’20. 02. 10.	김지선 과장 황여진 팀장 강한빛 주무관
○ 건축물 철거 폐기물처리 용역 완료 ※ 회계과-7385호(’20.02.12.)		’20. 02. 12.	김지선 과장 황여진 팀장 강한빛 주무관
○ 방침결재 ※ 문화예술과-23176호(’20.09.25.)		’20. 09. 25.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 김지선 과장 황여진 팀장 강한빛 주무관
○ 방침결재 ※ 문화예술과-22693호(’20.09.29.)		’20. 09. 29.	권오봉 시장 서은수 부시장 김학섭 국장 김지선 과장 황여진 팀장 서혜은 주무관
○ 보상계획 열람 공고 ※ 문화예술과-837호(’21.01.12.)		’21. 01. 12.	고영준 과장 황여진 팀장 조찬일 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 문화예술과-4246호(’21.02.23.)		’21. 02. 23.	김학섭 국장 고영준 과장 황여진 팀장 조찬일 주무관
○ 감정평가 의뢰(동산동) ※ 문화예술과-7327호(’21.04.01.)		’21. 04. 01.	고영준 과장 황여진 팀장 조찬일 주무관
○ 수용재결 신청 ※ 문화예술과-10096호(’21.04.30.)		’21. 04. 30.	고영준 과장 황여진 팀장 조찬일 주무관
○ 수용재결 감정평가 수수료 집행 ※ 문화예술과-13679호(’21.06.11.)		’21. 06. 11.	고영준 과장 황여진 팀장 조찬일 주무관
○ 건축물 철거 실시설계용역 계약체결 ※ 회계과-45803호(’21.09.07.)		’21. 09. 07.	고영준 과장 황여진 팀장 김남희 주무관
○ 건축물 철거 실시설계용역 준공검사 공무원 지정 ※ 회계과-54245호(’21.11.02.)		’21. 11. 02.	고영준 과장 황여진 팀장 김주희 주무관
○ 건축물 철거공사 계약체결 ※ 회계과-59739호(’21.12.02.)		’21. 12. 02.	고영준 과장 황여진 팀장 윤영상 주무관
○ 지정폐기물 처리용역 계약체결 ※ 회계과-61651호(’21.12.13.)		’21. 12. 13.	고영준 과장 황여진 팀장 윤영상 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 문화예술과-823호(’22.01.12.)		’22. 01. 12.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 건축물 철거공사 준공검사 공무원 지정 ※ 회계과-2327호(’22.01.17.)		’22. 01. 17.	김춘수 과장 양현옥 팀장 백현철 주무관
○ 감정평가 수수료 집행 ※ 문화예술과-4950호(’22.03.02.)		’22. 03. 02.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 보상협의 알림(군자동) ※ 문화예술과-4943호(’22.03.03.)		’22. 03. 03.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 문화예술과-5719호(’22.03.11.)		’22. 03. 11.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 문화예술과-5838호(’22.03.14.)		’22. 03. 14.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 문화예술과-6009호(’22.03.16.)		’22. 03. 16.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 누락 지장물에 대한 평가 조서 제출요청(군자동) ※ 문화예술과-6204호(’22.03.18.)		’22. 03. 18.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 보상비 집행 ※ 문화예술과-5838호(’22.03.24.)		’22. 03. 24.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 소유권이전 등기수수료 집행 ※ 문화예술과-7065호(’22.03.29.)		’22. 03. 29.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 보상협의 알림 2차(군자동) ※ 문화예술과-7237호(’22.03.30.)		’22. 03. 30.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 문화예술과-7449호(’22.04.01.)		’22. 04. 01.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 도시계획시설(공원)사업 실시계획(변경)인가 신청 ※ 문화예술과-7872호(’22.04.07.)		’22. 04. 07.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 손실보상비 집행 ※ 문화예술과-9074호(’22.04.21.)		’22. 04. 21.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 소유권 이전 등기수수료 집행 ※ 문화예술과-9622호(’22.04.27.)		’22. 04. 27.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 수용재결 신청 ※ 문화예술과-10708호(’22.05.12.)		’22. 05. 12.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 수용재결 신청에 따른 수수료 (수입증지) 집행 ※ 문화예술과-11364호(’22.05.19.)		’22. 05. 19.	김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 시굴조사 용역 시행 ※ 문화예술과-12828호(’22.06.08.)		’22. 06. 08.	김춘수 과장 조계운 과장 김진욱 팀장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 시굴조사 용역 계약의뢰 ※ 문화예술과-12856호(’22.06.09.)		’22. 06. 09.	김춘수 과장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 3차 시굴조사 용역 계약체결 ※ 회계과-30859호(’22.06.24.)		’22. 06. 24.	김춘수 과장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 3차 시굴조사 완료 ※ 회계과-39814호(’22.08.17.)		’22. 08. 17.	김춘수 과장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 감정평가 수수료 집행 ※ 문화예술과-18943호(’22.08.18.)		’22. 08. 18.	김춘수 과장 양현옥 팀장 박소현 주무관
○ 발굴조사 용역 계약의뢰 ※ 문화예술과-19949호(’22.08.30.)		’22. 08. 30.	김춘수 과장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 발굴조사 용역 계약 체결 ※ 회계과-43667호(’22.09.13.)		’22. 09. 13.	김춘수 과장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 공탁금 집행 ※ 문화예술과-22645호(’22.09.28.)		’22. 09. 28.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 조찬일 주무관
○ 보상비 집행 ※ 문화예술과-23077호(’22.10.04.)		’22. 10. 04.	나병곤 국장 김춘수 과장 양현옥 팀장 박소현 주무관
○ 소유권 이전 등기수수료 집행 ※ 문화예술과-23287호(’22.10.06.)		’22. 10. 06.	김춘수 과장 양현옥 팀장 박소현 주무관
○ 수용재결에 따른 공탁수수료 집행 ※ 문화예술과-24255호(’22.10.18.)		’22. 10. 18	김춘수 과장 양현옥 팀장 박소현 주무관
○ 소유권 이전 등기수수료 집행 ※ 문화예술과-24254호(’22.10.18.)		’22. 10. 18.	김춘수 과장 양현옥 팀장 박소현 주무관
○ 발굴조사 용역 준공계 제출 ※ 문화예술과-28956호(’22.10.18.)		’22. 10. 18.	김춘수 과장 양현옥 팀장 노혜진 주무관
○ 부지 내 쇄석 포장 계약 체결 ※ 문화예술과-30053호(’22.12.19.)		’22. 12. 19.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 부지 내 쇄석 포장 계약 체결 ※ 문화예술과-30121호(’22.12.20.)		’22. 12. 20.	김춘수 과장 양현옥 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 실시설계용역 계약의뢰 ※ 문화유산과-208호(’23.01.16.)		’23. 01. 16.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 실시설계용역 계약체결 ※ 회계과-2575호(’23.01.27.)		’23. 01. 27.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 지적분할 측량 의뢰 ※ 문화유산과-695호(’23.01.30.)		’23. 01. 30.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 용역 계약의뢰 ※ 문화유산과-1132호(’23.02.10.)		’23. 02. 10.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 지적공부 정리결과 알림 ※ 문화유산과-1930호(’23.03.02.)		’23. 03. 02.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 문화유산과-2053호(’23.03.06.)		’23. 03. 06.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 용역 계약체결 ※ 회계과-9916(’23.03.14.)		’23. 03. 14.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 감정평가 추천 의뢰(→전라남도) ※ 문화유산과-2443(’23.03.14.)		’23. 03. 14.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 건축물 해체공사 실시설계용역 준공검사 공무원 지정 ※ 회계과-11405(’23.03.21.)		’23. 03. 21.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 지정철거공사 계약의뢰 ※ 문화유산과-3025(’23.03.28.)		’23. 03. 28.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 지정철거공사 계약체결 ※ 회계과-15757(’23.04.13.)		’23. 04. 13.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사(해체공사 계약 의뢰 ※ 문화유산과-3696(’23.04.13.)		’23. 04. 13.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사(폐기물 처리용역) 계약 의뢰 ※ 문화유산과-3695(’23.04.13.)		’23. 04. 13.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 매장문화재 발굴 착수신고서 제출(추가 정밀 발굴 조사) ※ 문화유산과-3821(’23.04.17.)		’23. 04. 17.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 감정평가 의뢰 ※ 문화유산과-4088(’23.04.24.)		’23. 04. 24.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 건축물 해체공사(폐목재 처리용역) 계약의뢰 ※ 문화유산과-4110(’23.04.24.)		’23. 04. 24.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사(폐기물 처리용역) 계약의뢰 ※ 문화유산과-4111(’23.04.24.)		’23. 04. 24.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 이의재결 감정평가 수수료 집행 ※ 문화유산과-4257(’23.04.25.)		’23. 04. 25.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 건축물 해체공사 계약 체결 ※ 회계과-19511(’23.05.03.)		’23. 05. 03.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 폐목재 처리용역 계약 체결 ※ 회계과-20128(’23.05.08.)		’23. 05. 08	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 지정철거공사 준공 ※ 문화유산과-4847(’23.05.10.)		’23. 05. 10.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 이의재결에 따른 보상비 집행 ※ 문화유산과-4994(’23.05.12.)		’23. 05. 12	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 건축물 해체공사 지정폐기물 처리용역 완료 ※ 문화유산과-5113(’23.05.16.)		’23. 05. 16.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사(해체신고) 대행용역 계약체결 ※ 회계과-22452(’23.05.18.)		’23. 05. 18.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 학술자문회의 ※ 문화유산과-5428(’23.05.23.)		‘23. 05. 23.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 보상협의 요청(1차) ※ 문화유산과-5825(’23.05.30.)		‘23. 05. 30.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 2차 학술자문회의 ※ 문화유산과-6173(’23.06.08.)		‘23. 06. 08.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 일시정지 검토보고 ※ 문화유산과-6525(’23.06.14.)		‘23. 06. 14.	김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 건축물 해체공사 폐기물 처리용역 착수계 ※ 문화유산과-6506(’23.06.15.)		’23. 06. 15.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 일시정지 통보 ※ 회계과-28267(’23.06.16.)		‘23. 06. 16.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 건축물 해체공사 준공계 ※ 문화유산과-6791(’23.06.21.)		’23. 06. 21.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 폐목재 처리용역 완료계 ※ 문화유산과-7097(’23.06.27.)		’23. 06. 27.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 폐기물 처리용역 설계변경 검토보고 ※ 문화유산과-7172(’23.06.27.)		’23. 06. 27.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 폐기물 처리용역 완료계 ※ 문화유산과-7242(’23.06.28.)		’23. 06. 28.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 보상협의 요청(2차) ※ 문화유산과-7451(’23.07.03.)		‘23. 07. 03.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 건축물 해체공사 해체신고 대행용역 완료계 ※ 문화유산과-7617(’23.07.06.)		’23. 07. 06.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 일시정지 해지 및 변경계약 검토보고 ※ 문화유산과-7943(’23.07.13.)		‘23. 07. 13.	김용필 국장 김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 건축물 해체공사 폐기물 처리용역 착수계 ※ 문화유산과-6506(’23.07.14.)		’23. 07. 14.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 건축물 해체공사 폐기물 처리용역 완료계 ※ 문화유산과-8141(’23.07.18.)		’23. 07. 18.	김춘수 과장 엄태오 팀장 강병준 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 변경계약 체결 ※ 회계과-35790(’23.07.18.)		‘23. 07. 18.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 보상협의 요청(최종) ※ 문화유산과-8510(’23.07.26.)		‘23. 07. 26.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 매장문화재 발굴 착수신고서 제출 ※ 문화유산과-8551(’23.07.27.)		‘23. 07. 27.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 도시계획시설(공원, 도로)사업 실시계획(변경)인가 및 지형도면 고시 알림 ※ 도시계획과-19617(’23.08.11.)		‘23. 08. 11.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 3차 학술자문회의 ※ 문화유산과-9972(’23.08.28.)		‘23. 05. 23.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 수용재결 신청 ※ 문화유산과-10422(’23.09.05.)		’23. 09. 05.	김춘수 과장 엄태오 팀장 박소현 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 일시정지 알림 ※ 회계과-48605(’23.10.04.)		‘23. 10. 04.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 일시정지 해지 및 변경계약 체결 ※ 회계과-54685(’23.11.03.)		‘23. 10. 04.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관
○ 추가 정밀발굴조사 용역 완료 ※ 문화유산과-13086(’23.11.06.)		’23. 11. 06.	김춘수 과장 엄태오 팀장 노혜진 주무관