정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수 웅천 마리나항만 개발사업
② 추진배경	해양레저 인프라 시설을 조성하여 마리나 산업 클러스터 및 국제 마리나 기반 구축
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 웅천동 1874번지 전면 해상 일원 ○ 총사업비 : 120,411백만 원(국비 29,014, 시비 91,397) ○ 개발규모 : 방파제 등 L=1,514m, 계류시설 300선석(해상 150, 육상 150), - 개발면적 : 164천㎡(육역 69, 수역 95) ○ 사업내용 : 클럽하우스, 문화복합 및 상업시설, 수리시설 등
④ 사업부서	여수시 해양항만레저과		⑤ 담당자	행정5급 윤국한 시설6급 강성욱
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	‘15.∼‘27.
<그간 주요 추진내용>
○ ｢웅천 마리나항만 개발사업｣ 사업계획서 제출 ※ 해양항만레저과-2453호		‘15.05.29.	주철현 시 장 이승옥 부시장 강승원 국 장 장종순 과 장 장광일 팀 장 정종기 주무관
○ 기본설계 및 전략환경영향평가 용역 착수 ※ 해양항만레저과-2724호		‘16.04.01.	강승원 국 장 노정열 과 장 윤석호 팀 장 정종기 주무관
○ 타당성 조사 의뢰 (여수시→행정자치부) ※ 해양항만레저과-2043호		‘17.03.13.	이영철 과 장 정종기 팀 장
○ 타당성 조사 업무협약 체결 ※ 해양항만레저과-5340호		‘17.06.20.	이영철 과 장 정종기 팀 장
○ 사전재해영향성 검토서 제출 (여수시→해수부) ※ 해양항만레저과-3071호		‘18.04.24.	오영록 과 장 명호남 팀 장 김희곤 주무관
○ 지방재정투자심사 자료제출 (여수시→행안부) ※ 해양항만레저과-5932호		‘18.08.13.	오영록 과 장 명호남 팀 장 박 성 주무관
○ 사업계획 및 마리나항만구역 지정고시 신청 ※ 해양항만레저과-8442호		‘18.11.16.	오영록 과 장 명호남 팀 장 박 성 주무관
○ 실시설계 등 6건 시행 ※ 해양항만레저과-59호		‘19.01.08.	권오봉 시 장 고재영 부시장 송석주 국 장 오영록 과 장 최금환 팀 장 박 성 주무관
○ 실시설계 등 6건 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-1986호		‘19.03.04.	오영록 과 장 최금환 팀 장 정준호 주무관
○ 실시설계용역 착수 보고회 개최		‘19.04.08.	권오봉 시 장 고재영 부시장 송석주 국 장 오영록 과 장 최금환 팀 장 정준호 주무관
○ 해상교통안전진단 용역 시행 ※ 해양항만레저과-1986호		‘19.05.17.	권오봉 시 장 고재영 부시장 이한곤 과 장 최금환 팀 장 최금환 팀 장 정준호 주무관
○ 실시설계 등 1건 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-6529호		‘19.07.10.	오영록 과 장 최금환 팀 장 김희곤 주무관
○ 해상교통안전진단 최종보고회		‘19.08.29.	이한곤 국 장 오영록 과 장 최금환 팀 장 김희곤 주무관
○ 해상교통안전진단서 보완 완료 보고서 제출 ※ 해양항만레저과-11486호		‘19.12.23.	오영록 과 장 최금환 팀 장 김희곤 주무관
○ 공유수면매립 기본계획 반영요청 결과 통보 ※ 해수부 해양레저관광과-117호		‘20.01.09.	-
○ 실시설계 등 7건 감독공무원 변경 ※ 해양항만레저과-318호		‘20.01.10.	오영록 과 장 최금환 팀 장 서주용 차 장
○ 해상교통안전진단서 심사 결과 통보(동의) ※ 해수부 해양레저관광과-640호		‘20.02.18.	-
○ 교통안전진단서(면제요구서) 작성 용역 및 교통안전진단 용역 준공 ※ 회계과-13376호		‘20.03.10.	-
○ 사업계획 승인을 위한 전문가 자문회의 개최 ※ 해수부 해양레저관광과-1693호		‘20.05.08.	-
○ 실시설계 등 중간보고		‘20.06.15.	권오봉 시 장 이한곤 국 장 오영록 과 장 최금환 팀 장 서주용 차 장
○ 사업계획 승인 및 사업시행자 지정 통보 ※ 해수부 해양레저관광과-2340호		‘20.06.19.	-
○ 환경영향평가(초안) 제출 ※ 해양항만레저과-7415호		‘20.07.21.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최 ※ 해양항만레저과-6800호		‘20.07.27.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 어업피해영향조사용역 준공 ※ 회계과-53999호		‘20.09.25.	-
○ 마리나항만구역 지정 통보 ※ 해수부 해양레저관광과-1848호		‘20.11.23.	-
○ 어업피해조사 용역 착수 ※ 해양항만레저과-12580호		‘20.12.14.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 실시설계 VE 시행계획서 승인 ※ 해양항만레저과-406호		‘21.01.14.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 해역이용협의 완료 ※ 여수해수청 해양수산환경과-1406호		‘21.03.24.	-
○ 공유수면 점용․사용 승인 알림 ※ 해양항만레저과-3051호		‘21.03.25.	-
○ 환경영향평가(본안) 제출 ※ 해양항만레저과-3415호		‘21.04.03.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 해역이용협의용역 일시정지 해지 ※ 해양항만레저과-3600호		‘21.04.07.	장인호 국 장 정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 환경영향평가용역 변경 계약 ※ 해양항만레저과-3755호		‘21.04.12.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 환경영향평가용역 일시정지 ※ 해양항만레저과-4037호		‘21.04.19.	장인호 국 장 정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 준설토 투기장 사용 협의 ※ 해양항만레저과-5123호		‘21.05.14.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 해양공간 적합성 협의 용역 시행 ※ 해양항만레저과-7829호		‘21.07.14.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 해양공간 적합성 협의 용역 계약체결 ※ 회계과-38211호		‘21.07.19.	정용길 과 장 박재천 팀 장 서주용 차 장
○ 어업피해조사 용역기관 계약기간 연장 승인 ※ 해양항만레저과-411호		‘22.01.13.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○ 사업계획 및 마리나항만구역 변경 신청 ※ 해양항만레저과-3000호		‘22.03.28.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○ 해양공간적합성 협의 요청 ※ 해양항만레저과-3844호		‘22.04.20.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○ 사업계획 및 마리나항만구역 변경 신청에 대한 승인 ※ 해수부 해양레저관광과-2288호		‘22.06.03.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○여수국가산업단지(웅천마리나항만) 개발 실시계획 승인 신청 ※ 해양항만레저과-6164호		‘22.06.16.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○실시계획 승인 신청 (여수지방해양수산청) ※ 해양항만레저과-6196호		‘22.06.17.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○건설기술자문(심의) 요청 (여수지방해양수산청) ※ 해양항만레저과-6799호		‘22.07.01.	조계완 과 장 박재천 팀 장 위성현 주무관
○해양공간적합성 협의 완료 ※ 해양항만레저과-8200호		‘22.08.02.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○건설기술자문(심의) 결과 알림 (여수지방해양수산청) ※ 해양항만레저과-9894호		‘22.09.14.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○공유수면 매립면허 승인신청 (전라남도) ※ 해양항만레저과-10480호		‘22.09.27.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○여수국가산업단지(웅천마리나항만) 개발 실시계획 승인(도시계획과) ※ 해양항만레저과-11252호		‘22.10.18.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○설계단가 적정성 검토의뢰 (여수청→조달청) ※ 여수지방해양수산청-4459호		‘22.11.14.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○일상감사 결과통보 (감사담당관실) ※ 해양항만레저과-12534호		‘22.11.18.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○환경영향평가 용역 완료 ※ 회계과-62128호		‘22.12.21.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○해양공간적합성 협의 용역 완료 ※ 회계과-63123호		‘22.12.23.	이근철 과 장 마동현 팀 장 위성현 주무관
○설계적정성 검토 결과 알림 (여수지방해양수산청) ※ 항만건설과-418호		‘23. 1.31.	윤국한 과 장 마동현 팀 장 강성욱 차 장
○일상감사 결과 조치계획 제출 ※ 해양정책과-1301호		‘23. 2.15.	윤국한 과 장 마동현 팀 장 강성욱 차 장
○지방재정 투자심사 제출(2단계) ※ 해양정책과-5920호		‘23. 5.31.	윤국한 과 장 마동현 팀 장 강성욱 차 장
○사업계획 변경 신청 제출 ※ 해양정책과-9042호		‘23. 7.31.	윤국한 과 장 김 혁 팀 장 강성욱 차 장
○실시계획 승인 보완 제출 ※ 해양정책과-9043호		‘23. 7.31.	윤국한 과 장 김 혁 팀 장 강성욱 차 장
○사업계획 변경 승인 ※ 해양수산부 해양레저관광과-3834호		‘23. 8.29.	-
○중앙투자 2단계 심사 결과 보고 ※ 해양정책과-11228호		‘23. 9.14.	정기명 시 장 김종기 부시장 정재호 국 장 윤국한 과 장 김 혁 팀 장 강성욱 차 장
○타당성조사 재조사 의뢰 ※ 해양정책과-11228호		‘23. 9.26.	윤국한 과 장 김 혁 팀 장 강성욱 차 장
○실시계획 승인 ※ 여수지방해수청 항만건설과-3932호		‘23. 9.26.	-
○타당성조사 업무 약정 체결 ※ 해양정책과-14554호		‘23.12.04.	윤국한 과 장 김 혁 팀 장 강성욱 차 장