정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	묘도 녹색산단 진입도로 개설사업
② 추진배경	산업단지 준공 전 진입도로 개설로 녹색산단 조기 활성화 도모
③ 사업개요	○ 사업목적 : 녹색산단 조성에 따른 일자리 창출 및 지역경제 활성화 ○ 위 치 : 전남 여수시 묘도동 1528-5번지 일원 ○ 사 업 비 : 14,323백만 원 * 전액 국비 (공사비 7,088, 보상비 6,817, 기타 418) ○ 사업내용 : L= 1.5km, B= 12.0m(접속도로 정비 0.5km)
④ 사업부서	여수시 공영개발과		⑤ 담당자		시설6급 박성식 시설8급 노명훈
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간		’17. 2.~’25. 2.
<그간 주요 추진내용>
○ 보상업무 위․수탁 체결 ※ 공영개발과-7433(2015. 11. 17.)		’15. 11. 27.		주철현 시장 이승옥 부시장 김세곤 국장 조일수 과장 김태용 팀장 고영란 주무관
○ 공사 시행계획(안) ※ 공영개발과-9491호		’16. 12. 26.		주철현 시장 최종선 부시장 조일수 국장 정원완 과장 김태용 팀장 안병현 주무관
○ 진입도로 공사 착공		’17. 2. 28.		정원완 과장 김태용 팀장 안병현 주무관
○ 도시관리계획(도로) 결정(변경) ※ 공영개발과-1851(2018. 4. 2.)		’18. 4. 9.		문태선 과장 차용석 팀장 안병현 주무관

○ 실시계획(변경) 승인 ※ 공영개발과-2183(2018. 4. 17.)	’18. 6. 26.	문태선 과장 차용석 팀장 안병현 주무관
○ 접속도로 공사 시행 계획 ※ 공영개발과-5989호	’18. 11. 5.	권오봉 시장 고재영 부시장 성동범 단장 유경상 과장 차용석 팀장 지정인 주무관
○ 접속도로 개설공사(2차분) 시행 계획 수립 ※ 공영개발과-1626호	’19. 3. 20.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 유경상 과장 김승주 팀장 지정인 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설사업 관련 추진상황 보고 ※ 공영개발과-2204호	’19. 4. 16.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 유경상 과장 김승주 팀장 지정인 주무관
○ 진입도로 개설공사(3차분) 시행 계획 수립 ※ 공영개발과-3206호	’19. 5. 31.	권오봉 시장 고재영 부시장 문태선 단장 유경상 과장 김승주 팀장 지정인 주무관
○ 진입도로 개설공사(4차분) 시행 계획 수립 ※ 공영개발과-999호	’20. 2. 18.	문태선 단장 명주완 과장 김승주 팀장 지정인 주무관
○ 진입도로 개설공사 일시정지 해제 및 5차분 시행 ※ 공영개발과-3424호	’20. 6. 1.	문태선 단장 명주완 과장 김승주 팀장 지정인 주무관
○ 진입도로 개설공사 6차분 시행 ※ 공영개발과-6674호	’20. 10. 15.	권오봉 시장 서은수 부시장 문태선 단장 명주완 과장 최금환 팀장 지정인 주무관
○ 진입도로 개설공사 총괄분 공사 기간 연장 검토 ※ 공영개발과-2456호	’21. 4. 19.	신윤옥 단장 명주완 과장 최금환 팀장 이영선 주무관
○ 진입도로 개설공사 7차분 시행 ※ 공영개발과-3972호	’21. 6. 25.	서은수 부시장 신윤옥 단장 명주완 과장 최금환 팀장 이영선 주무관
○ 진입도로 개설공사 7차분 공사 기간 연장 검토 보고 ※ 공영개발과-6154호	’21. 9. 23.	신윤옥 단장 박성식 과장 주영길 팀장 노명훈 주무관
○ 진입도로 개설공사(총괄분) 일시 정지 검토 보고 ※ 공영개발과-8490호	’21. 12. 28.	신윤옥 단장 박성식 과장 주영길 팀장 노명훈 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 신청(묘도녹색산단 진입도로) ※ 공영개발과-1004호	’24. 2. 8.	김문환 과장 차재원 팀장 전동국 주무관
○ 산지전용 변경협의 요청(묘도 녹색산단 진입도로) ※ 공영개발과-1081호	’24. 2. 14.	김문환 과장 차재원 팀장 전동국 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설공사 타절준공 검토보고 ※ 공영개발과-901호	’25. 2. 4.	정기명 시장 최정기 부시장 이영호 단장 정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설공사(총괄분) 계약상대자 의견 검토내용 회신 ※ 공영개발과-1013호	’25. 2. 7.	정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설공사공사타절 합의 ※ 공영개발과-1344호	’25. 2. 18.	정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설공사타절 준공 요청 ※ 공영개발과-1494호	’25. 2. 24.	정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 법률 자문 요청(묘도 녹색산단 진입도로 개설공사) ※ 공영개발과-2311호	’25. 3. 25.	정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 법률 자문 결과서 제출(묘도 녹색산단 진입도로 개설공사) ※ 공영개발과-3477호	’25. 5. 7.	정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 잔여공정 공사 추진 검토보고 ※ 공영개발과-3437호	’25. 5. 7.	정기명 시장 최정기 부시장 이영호 단장 정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설공사 잔여공정 추진 관련 제소전 화해 신청 ※ 공영개발과-3750호	’25. 5. 19.	이영호 단장 정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관
○ 묘도 녹색산단 진입도로 개설공사 잔여공정 제소전화해 보정 및 협약서 제출 ※ 공영개발과-4465호	’25.6.19.	정일석 과장 박재천 팀장 김영주 주무관