정책실명제 사업관리 이력서

정책실명제

등록번호

2015-61

담당부서

작성자

상하수도사업단 상수도과

(한상범/659-4908/

han10sb@korea.kr)

정 책 명

남수~둔덕간 송수관로 교체공사

- 사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 남수가압장에서 둔덕정수장간 송수관로(D700mm) 교체를 통해 관 노후, 부식에 따른 대형사고 사전예방 및 원활한 원수 공급을 통한 안정적인 수돗물 공급 추진

○ 추진기간 : 2013. 11.  ~ 2015. 11.

○ 총사업비 : 6,200백만원

○ 주요내용

- 관로 D700mm, L=5.04km

○ 추진경과

- 2013. 11.  4. : 총괄 및 1차분 착공

- 2014. 05. 30. : 1차분 준공(L=  837m)

- 2014. 09. 17. : 2차분 준공(L=  438m)

- 2014. 12. 29. : 3차분 준공(L=1,365m)

- 2015. 06. 23. : 4차분 준공(L=  998m)

- 2015. 09. 17. : 5차분 및 총괄준공(L= 1,409m)

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 7급  최우진

- 최종 결재자 : 여수시장  김충석

○ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시 장	김충석		‘10.7.1~’14.6.30	정책최종결정
시 장	주철현		‘14.7.1~’15.9.17	정책최종결정
부시장	정병재	행정3급	‘11.1.10~’12.12.31	검토자
부시장	이호경	행정3급	‘13.1.1~'14.7.31	검토자
부시장	이승옥	행정3급	‘14.8.1~’15.9.17	검토자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국 장	김태옥	시설4급	‘12.6.1~’12.12.30	검토자
국 장	박개환	행정4급	‘13.1.1~’13.6.30	검토자
국 장	김재곤	시설4급	‘13.7.1~’14.8.11	검토자
국 장	박개환	행정4급	‘13.1.1~’13.6.30	검토자
국 장	강승원	행정4급	‘14.8.12~‘15.2.9	검토자
국 장	민화기	시설4급	‘15.2.9’15.9.17	검토자
과 장	김정석	시설5급	‘11.1.31~’12.8.16	검토자
과 장	김회근	시설5급	‘12.8.17~’14.8.18	검토자
과 장	임채준	행정5급	‘14.8.19~’15.8.5	검토자
과 장	장세길	시설6급	‘15.8.6~’15.9.17	검토자
팀 장	김용선	시설6급	‘11.7.1~’13.1.31	준공검사원
팀 장	심근하	시설6급	‘13.2.1~‘15.2.9	준공검사원
팀 장	김정남	시설6급	‘15.2.9~’15.9.17	준공검사원
담당자	최우진	시설7급	‘13.2.1~’14.1.8	공사감독
담당자	박성원	시설8급	‘14.1.9~’15.2.9	공사감독
담당자	한상범	시설7급	‘15.2.9~’15.9.17	공사감독

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자 : (주)대명기술개발

○ 시공자 : 남해종합개발

추진실적

○ 2014. 05. 30. : 1차분 준공(L=  837m)

○ 2014. 09. 17. : 2차분 준공(L=  438m)

○ 2014. 12. 29. : 3차분 준공(L=1,365m)

○ 2015. 06. 23. : 4차분 준공(L=  998m)

○ 2015. 09. 17. : 5차분 및 총괄준공(L= 1,409m)